РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 ноября 2017 года г. Братск

Братский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи А.С. Поляковой,

при секретаре Т.И. Миличенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3619/2017 по исковому заявлению Министерства лесного хозяйства Красноярского края к Обществу с ограниченной ответственностью «ДеКом» о возложении обязанности выполнить лесовосстановительные мероприятия

УСТАНОВИЛ:

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в суд с иском к ответчику ООО «ДеКом», в котором просит обязать ООО «ДеКом» выполнить лесовосстановительные мероприятия до 01 августа 2018 года по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, за период 2016 год, в следующих объемах: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) -14,9 (га); заготовка семян древесных пород - 14,9 (кг).

В обоснование иска указал, что между агентством лесной отрасли Красноярского края и ООО «Сад» заключен договор аренды лесного участка от 19.11.2008 № 231-з. В дальнейшем между ООО «Сад» и ООО «Апит» заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 № 231-з. 26.04.2016 между ООО «Апит» и ООО «ДеКом» заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 № 231-з.

По настоящему договору арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 настоящего договора.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 13 договора аренды арендатор обязан: осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесами на лесном участке на условиях, в объемах и сроках, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

Вместе с тем, согласно сводному акту по воспроизводству лесов от 30.12.2016 г. ООО «ДеКом» не выполнил следующие работы: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) -14,9 (га); заготовка семян древесных пород - 14,9 (кг).

На сегодняшний день ООО «ДеКом» лесовосстановительные мероприятия за период 2016 год не выполнил.

В соответствии с пунктом 4 приказа Минприроды России от 19.11.2008 № 231-3 «Об утверждении Правил лесовосстановления», лесовосстановление обеспечивается: а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, - арендаторами этих лесных участков.

Согласно пункту 2 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации, на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.

В дальнейшем, поскольку ответчиком частично выполнены лесовосстановительные мероприятия по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнил исковые требования, указав, что просит суд возложить обязанность на ООО «ДеКом» выполнить лесовосстановительные мероприятия до 01 августа 2018 года по договору аренды лесного участка лесного участка от 19.11.2008 № 231-3, за период 2016 год, в следующих объемах: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 9,3 (га).

В судебное заседание представитель истца - Министерства лесного хозяйства Красноярского края не явился, будучи надлежаще извещен, просит дело рассмотреть в его отсутствие. Согласно письменным возражениям, Министерство, по результатам рассмотрения акта приемки работ по подготовке почвы под посев, посадку лесных культур, поясняет, что искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 9,3 (га) по договору аренды лесного участка лесного участка от 19.11.2008 № 231-з за период 2016 год ООО «ДеКом» не выполнены, в связи с чем, Министерство настаивает на заявленных требованиях.

Представитель ответчика ООО «ДеКом» по доверенности ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признал, суду пояснил, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 13 договора аренды арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесных участках на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств. Согласно приложению № 6 к договору аренды лесного участка от 19.11.2008 года № 231-з, ежегодный объем лесовосстановительных мероприятий по созданию лесных культур (искусственное лесовосстановление) составляет 40 га. Ранее суду были представлены соответствующие акты приемки работ, составленные сотрудниками КГБУ «Кодинское лесничество» 20 октября 2017 года, подтверждающие выполнение ООО «ДеКом» указанных мероприятий, общим объемом 52 га - работы за 2017 год в объеме 40 га, работы зa 2016 год в объеме 9,3 га, перевыполнение 2,7 га. В связи с тем, что представленными в судебное заседание документами подтверждается полное выполнение ООО «ДеКом» своих обязательств по лесовосстановлению в объемах, предусмотренных договором аренды лесного участка № 231-з от 19.11.2008 года, считает требования Министерства лесного хозяйства Красноярского края не подлежащими удовлетворению.

Представитель третьего лица КГБУ «Кодинское лесничество» в судебное заседание не явился, будучи надлежаще извещен, просит дело рассмотреть в его отсутствие.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

В силу ст. 42 Конституции РФ в соответствии с частью 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 62 Лесного кодекса РФ, лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (п. 1). На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (п.2).

Из письменных материалов дела установлено, что 19.11.2008 г. между агентством лесной отрасли Красноярского края (арендодатель) и ООО «Сад» (арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 231-з, в соответствии с которым, арендодатель, действующий с соответствии со ст. 72 и 74 Лесного кодекса РФ обязуется предоставить, арендатор обязуется принять во временное пользование лесные участки сроком на 23 года, находящиеся в государственной собственности, определенные п. 2 настоящего договора.

Согласно п. 2 договора, лесные участки общей площадью 18555,00 га, Проспихинского участкового лесничества, КГУ «Кодинское лесничество» предназначенные для заготовки древесины.

- № 1, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

-№ 2, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

-№ 3 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Подпунктом «ж» п. 13 договора аренды лесного участка № 231-з от 19.11.2008 г. предусмотрено обязанность арендатора осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесных участках на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

Согласно приложению № 6 к договору аренды лесного участка «Объемы и сроки выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке»:

Лесовосстановительные мероприятия

Целевое назначение лесов

Виды мероприятий

Единица измерения

Среднегодовой объем

Срок исполнения

Подготовка почвы и лесные культуры

га

40

2,3 кв.

Создание лесных культур*

га

40

2,3 кв.

Проведение мер содействия естественному возобновлению леса

га

340

3,4 кв.

Уход за лесными культурами*

га

40

2,3

Дополнение лесных культур*

га

0

0

Выращивание (приобретение) посадочного материала*

тыс.шт.

0

0

Заготовка лесных семян

кг

40

3 кв.

Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных древесных нахождений**

га

66

2,3 кв.

В том числе за счет: - искусственного лесовосстановления (лесных культур), 

га

0

0

- естетвенного восстановления (мер содействия естественному восстановлению леса)

га

66

2,3 кв.

*-объемы корректируются ежегодно, исходя из площадей пригодных для создания лесных культур, наличия лесных культур, требующих проведения данного вида мероприятия, 

**-объем корректируется ежегодно, исходя из наличия лесных культур, участков с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса, подлежащих переводу в покрытую лесом площадь.

Как следует из дополнительного соглашения № 1 к договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, ООО «Сад» с согласия Агентство лесной отрасли Красноярского края (арендодателя) уступает все свои права и обязанности по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з - ООО «Апит». ООО «Сад» гарантирует арендодателю, что работы по охране, защите, воспроизводству лесов, предусмотренные приложением № 6 к договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з проектом освоения лесов, будут исполнены в объемах и сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему соглашению.

26.04.2016 г. между ООО «Апит» (арендатор) и ООО «ДеКом» (новый арендатор) заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, по условиям которого арендатор с согласия арендодателя обязуется передать новому арендатору права и обязанности, предусмотренные договором аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, в отношении лесных участков отнесенные к эксплуатационным и защитным лесам, предназначенные для заготовки древесины: 

- лесной участок 

<

адрес>

- лесной участок 

<

адрес>

- лесной участок с 

<

адрес>;

- лесной участок 

<

адрес>

Пунктами 2.2, 2.3 договора предусмотрено, что прав аи обязанности арендатора, изложенные в договоре аренды № 231-з и дополни тельных соглашениях к нему, переходят в новому арендатору с момента регистрации настоящего договора. С даты государственной регистрации перехода права по настоящему договору ответственным перед арендодателем по договору аренды № 231-з становится новый арендатор. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что ООО «ДеКом» приняло на себя все обязательства, предусмотренные названным договором аренды лесного участка, в том числе, и по осуществлению санитарно-оздоровительные мероприятий, лесовосстановления и ухода за лесом на лесных участках на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств (пп. «ж» п. 13 договора аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з).

Указанные обстоятельства ответчиком не оспаривались, договоры заключены в письменной форме, подписаны сторонами, сведений о расторжении договоров, внесения в них изменений, в материалах дела не имеется. 

В обоснование иска, истец указал на то, что ООО «ДеКом» взятые на себя обязательства, предусмотренные пп. «ж» п. 13 договора аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, за период 2016 год не выполнил.

Исходя из сведений, указанных ООО «ДеКом», ООО «Апит» в лесных декларациях за 2016 год и дополнениях к ним, проекта лесовосстановления на 2016 год, планов содействия естественному возобновлению леса, карточек обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, пересчетных ведомостей жизнеспособного подроста при обследовании участка лесовосстановления, актах технических приемки площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса от 25, 26, 27 октября 2016 года КГБУ «Кодинское лесничество» составлен сводный акт по воспроизводству лесов от 30.12.2016 г. ООО «ДеКом», согласно которому ООО «ДеКом» не выполнил следующие работы: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) -14,9 (га); заготовка семян древесных пород - 14,9 (кг).

Однако, ответчик исковые требования не признал, поскольку считает, что все обязательства по лесовосстановлению, предусмотренные договором аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, ООО «ДеКом» исполнены в полном объеме и даже перевыполнены. В подтверждение своих доводов представил акты приемки работ по подготовке почвы под посев, посадку лесных культур от 20.10.2017 г.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 59, 60 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утв. Приказом МПР России от 16.07.2007 N 183 (в ред. действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов (п.2).

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п. (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений (п. 3).

Лесовосстановление обеспечивается: на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, - арендаторами этих лесных участков (4).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления (п.8).

Аналогичные нормы содержатся в Приказе Минприроды России от 29.06.2016 N 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления», действующим с 28.11.2016 г.

Таким образом, воспроизводство лесных ресурсов является важнейшей задачей, поставленной Лесным кодексом перед арендатором. Одним из основных путей расширенного воспроизводства лесных насаждений на арендованном участке является проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению. В состав этого комплекса входит искусственное и естественное восстановление лесов. Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовоссатновлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п. Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. 

В силу статей 54 и 55 Лесного кодекса обязанность по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, предоставленных в аренду, в соответствии с проектом освоения лесов, лежит на арендаторах этих лесных участков. 

Обязанность общества проводить работы по естественному и искусственному лесовосстановлению в объеме, заявленном истцом, предусмотрена статьей 62 Лесного кодекса РФ, условиями договора аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, Правилами лесовосстановления. Между тем, доказательств исполнения указанной обязанности в полном объеме, ответчиком в материалы дела не представлено. Акты от 20.10.2017 г. не подтверждают выполнение ООО «ДеКом» работ по естественному и искусственному восстановлению лесов в полном объеме. Изучив представленные ответчиком акты от 20.10.2017 г., истец уточнил исковые требования, в части объема выполнения лесовосстановительных мероприятий: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 9,3 (га). Иных доказательств, свидетельствующих о надлежащем исполнении ответчиком обязательств по проведению лесовосстановиетльных мероприятий в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями договора аренды лесного участка от 19.11.2008 г. № 231-з, в материалах дела не имеется. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательств исполнения обязательств, принятых согласно договору аренды, и в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, Правил лесовосстановления, ответчиком не представлено, в то время как указанная обязанность возложена на него в силу положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что требования Министерства лесного хозяйства Красноярского края об возложении на ответчика обязанности выполнить лесовосстановительные мероприятия до 01 августа 2018 года по договору аренды лесного участка от 19.11.2008 № 231-з, за период 2016 год, в следующих объемах: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) -9,3 (га), является законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства лесного хозяйства Красноярского края удовлетворить.

Обязать ООО «ДеКом» выполнить лесовосстановительные мероприятия до 01 августа 2018 года по договору аренды лесного участка лесного участка от 19.11.2008 № 231-3, за период 2016 год, в следующих объемах: искусственное лесовосстановление (посев, посадка лесных культур) - 9,3 (га).

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Братский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.С. Полякова