Дело № 2-806/2017 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

29 июня 2017 года г.Тверь 

Московский районный суд г.Твери в составе:

председательствующего судьи Орёл Ю.А.,

при секретаре Гридневе В.Р.,

c участием истца ФИО1, 

с участием представителя истца ФИО2, действующей на основании доверенности № от 19 января 2017 года и ордера № от 21 марта 2017 года, 

с участием представителя ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» ФИО3, действующего на основании доверенности от 20 марта 2017 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» о возложении обязанности устранить дефекты, допущенные при строительстве системы вентиляции, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

У с т а н о в и л :

В производстве Московского районного суда г. Твери находится гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» о возложении обязанности устранить дефекты, допущенные при строительстве системы вентиляции, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

В судебном заседании стороны представили суду мировое соглашение по настоящему гражданскому делу, в котором просили суд прекратить производство по делу, в связи с заключением сторонами мирового соглашения, по условиям которого:

1. Ответчик ООО «Дельта» обязуется за счет собственных средств и своими силами выполнить следующие работы в квартире жилого дома по адресу: 

<

адрес> в течение 30 дней неразрушающим способом с согласованием с собственником жилья с соблюдением требований и норм СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а именно: 

- наращивает шахту вентиляционных каналов на высоту + 1.100мм от существующей высоты шахты, расположенную по Оси 2 в Осях Д-Е, с вентиляционными каналами (в количестве 4-х штук) 

<

адрес> соответствии с нормами СП, путем кирпичной кладки. После этого обшивает, аналогичным имеющимся, металлом, применяемым для обшивки вентиляционных каналов на крыше дома. На существующие вентиляционные шахты (в количестве 4-х штук) устанавливает Зонты, ранее установленные, таким образом, чтобы расстояние между низом крышки зонта и верхом шахты было 320 мм, согласно тепловых узлов, предусмотренных Рабочими чертежами «Типовые детали и конструкции зданий и сооружений» Типовой Серии 4.904-12 (лист 26,27,28). Согласование данных работ с собственниками 

<

адрес> возложить на ФИО1

- устанавливает приточные оконные клапана (регулируемые «форточки» или «автономные клапана») марки GEALAN GECCO 3 приточной вентиляции для окон в количестве 9-ти штук, а именно: 

- на 1-м этаже на кухне - 1 окно, прихожей -2 окна и санузле - 1 окно; 

- на 2-м этаже в гардеробной - 1 окно, кабинете - 1 окно, спальне - 2 окна;

- на 3-м этаже - над лестницей - 1 окно;

- монтирует гибкий воздуховод ФуранФлекс в 2 вентканала, в целях полной герметизации вентканалов. Один из кухни 

<

адрес>. При этом, ФИО1 принимает на себя обязательство получить письменное согласие собственника квартиры 

<

адрес>. 

2. Истец ФИО1 обязуется за счет собственных средств устранить недостатки, выявленные в ходе строительной экспертизы, а именно: 

- демонтирует вентилятор в санузле и в прачечной на 1-м этаже, увеличивает отверстие по размеру вентиляционного канала диаметром 150 мм и устанавливает решетки;

- заглушает отверстие вентиляционного канала, в кухне после переноса стены; 

- демонтирует гибкий дополнительный вентиляционный канал, который подходит к газовому котлу и присоединяет его к вытяжке над газовой плитой пластиковой трубой сечением 150 мм; 

- расширяет отверстие в кухне с обратной тягой по размеру вентиляционного канала, устанавливает пластиковую трубу диаметром 150 мм; 

- демонтирует вентилятор на 2-ом этаже в санузле, после чего заглушает данный вентиляционный канал, на втором вентиляционном канале устанавливает решетку по размеру вентиляционного канала размером 100х 180 мм;

- демонтирует провода на крыше в шахте дымоудаления; 

- делает герметичным дверной проем в техническом подполье из помещений 1-го этажа путем установки порога с уплотнением. 

3. В связи с заключением мирового соглашения ФИО1 отказывается от исковых требований в части взыскания компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, в части взыскания неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и качества выполненной работы в размере 6164463 рубля 75 копеек и штрафа в размере 50% от суммы присужденной судом на основании ФЗ «О защите прав потребителей». 

4. Ответчик ООО «Дельта» обязуется возместить ФИО1 госпошлину в сумме 25 822 рубля, судебные издержки на оплату услуг представителя ФИО2 в сумме 30000 рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 60000 рублей в течение 5-ти дней после вступления мирового соглашения в законную силу по безналичному расчету на банковскую карту, предоставленную истцом ФИО1. 

5. После проведения всех мероприятий стороны составляют соответствующий акт. 

Из текста мирового соглашения, подписанного сторонами, следует, что сторонам понятны последствия утверждения судом заключенного мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 220, 221 ГПК РФ, в соответствии с которыми повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, подписано истцом ФИО1 и представителем ООО «Дельта» ФИО3 

После разъяснения судом положений ч.2, 3 ст.173, абз.4 ст.220, п.2 ч.1, ст.134, 428 ГПК РФ, согласно которым в случае утверждения мирового соглашения производство по делу прекращается, повторное предъявление того же иска не допускается, в случае уклонения сторон от исполнения условий мирового соглашения оно исполняется принудительно, участники процесса настаивали на утверждении представленного суду мирового соглашения. 

С учетом изложенного, рассмотрев ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ истец вправе уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Условия мирового соглашения, подписанные сторонами по делу, не противоречат требованиям закона, не ущемляют права и интересы других лиц и подлежат утверждению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 220 ГПК РФ, суд

определил:

утвердить мировое соглашение между сторонами по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» о возложении обязанности устранить дефекты, допущенные при строительстве системы вентиляции, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа по условиям которого:

1. Ответчик ООО «Дельта» обязуется за счет собственных средств и своими силами выполнить следующие работы в квартире жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в течение 30 дней неразрушающим способом с согласованием с собственником жилья с соблюдением требований и норм СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а именно: 

- наращивает шахту вентиляционных каналов на высоту + 1.100мм от существующей высоты шахты, расположенную по Оси 2 в Осях Д-Е, с вентиляционными каналами (в количестве 4-х штук) 

<

адрес> в соответствии с нормами СП, путем кирпичной кладки. После этого обшивает, аналогичным имеющимся, металлом, применяемым для обшивки вентиляционных каналов на крыше дома. На существующие вентиляционные шахты (в количестве 4-х штук) устанавливает Зонты, ранее установленные, таким образом, чтобы расстояние между низом крышки зонта и верхом шахты было 320 мм, согласно тепловых узлов, предусмотренных Рабочими чертежами «Типовые детали и конструкции зданий и сооружений» Типовой Серии 4.904-12 (лист 26,27,28). Согласование данных работ с собственниками 

<

адрес> возложить на ФИО1;

- устанавливает приточные оконные клапана (регулируемые «форточки» или «автономные клапана») марки GEALAN GECCO 3 приточной вентиляции для окон в количестве 9-ти штук, а именно: 

- на 1-м этаже на кухне - 1 окно, прихожей -2 окна и санузле - 1 окно; 

- на 2-м этаже в гардеробной - 1 окно, кабинете - 1 окно, спальне - 2 окна;

- на 3-м этаже - над лестницей - 1 окно;

- монтирует гибкий воздуховод ФуранФлекс в 2 вентканала, в целях полной герметизации вентканалов. Один из кухни 

<

адрес>. При этом, ФИО1 принимает на себя обязательство получить письменное согласие собственника квартиры 

<

адрес>. 

2. Истец ФИО1 обязуется за счет собственных средств устранить недостатки, выявленные в ходе строительной экспертизы, а именно: 

- демонтирует вентилятор в санузле и в прачечной на 1-м этаже, увеличивает отверстие по размеру вентиляционного канала диаметром 150 мм и устанавливает решетки;

- заглушает отверстие вентиляционного канала, в кухне после переноса стены; 

- демонтирует гибкий дополнительный вентиляционный канал, который подходит к газовому котлу и присоединяет его к вытяжке над газовой плитой пластиковой трубой сечением 150 мм; 

- расширяет отверстие в кухне с обратной тягой по размеру вентиляционного канала, устанавливает пластиковую трубу диаметром 150 мм; 

- демонтирует вентилятор на 2-ом этаже в санузле, после чего заглушает данный вентиляционный канал, на втором вентиляционном канале устанавливает решетку по размеру вентиляционного канала размером 100х 180 мм;

- демонтирует провода на крыше в шахте дымоудаления; 

- делает герметичным дверной проем в техническом подполье из помещений 1-го этажа путем установки порога с уплотнением. 

3. В связи с заключением мирового соглашения ФИО1 отказывается от исковых требований в части взыскания компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей, в части взыскания неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и качества выполненной работы в размере 6164463 рубля 75 копеек и штрафа в размере 50% от суммы присужденной судом на основании ФЗ «О защите прав потребителей». 

4. Ответчик ООО «Дельта» обязуется возместить ФИО1 госпошлину в сумме 25 822 рубля, судебные издержки на оплату услуг представителя ФИО2 в сумме 30000 рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 60000 рублей в течение 5-ти дней после вступления мирового соглашения в законную силу по безналичному расчету на банковскую карту, предоставленную истцом ФИО1. 

5. После проведения всех мероприятий стороны составляют соответствующий акт. 

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» о возложении обязанности устранить дефекты, допущенные при строительстве системы вентиляции, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа - прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, а в случае уклонения сторон от исполнения условий мирового соглашения оно исполняется принудительно.

Определение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Московский районный суд г. Твери в течение 15 дней.

Председательствующий: Ю.А. Орёл