Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 ноября 2017 года 

<

адрес>

Самарский районный суд 

<

адрес> в составе судьи Кривицкой О.Г.,

при секретаре Ненашевой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2568/2017 по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Тандем» о взыскании задолженности по договорам подряда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Тандем» о взыскании задолженности по договорам подряда, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ.

Согласно п. 1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязался по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» - 3 очередь, 

<

адрес> работы: устройство ленточного фундамента и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяется локальным ресурсным сметным расчетом № РС-1 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составила 339 500,35 рублей. Налогом на добавленную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по Договору определена сторонами на основании локального ресурсного сметного расчета № РС-1 (Приложение № к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ в соответствии с п.2.3 Договора № от 01.11.2016г. осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема - передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

Обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п. 3.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

Однако ООО «Тандем» свои обязательства по Договору № от 01.11.2016г. не исполнило, оплату за выполненные ООО «МАКСИМУС» работы не произвело.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ.

Согласно п.1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязуется по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» работы: устройство ливневой канализации и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ, и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяются локальным ресурсным сметным расчетом № РС-6 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 432 531,92. Налогом на добавочную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по настоящему Договору определена сторонами на основании локального ресурсного сметного расчета № РС-6 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ, в соответствии с п. 2.3 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема-передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами форм КС-2, КС-3.

При этом обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п.3.2 Договора № от 05.12.2016г.)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-1 от 15.02.2017г. на сумму 1 432 531,92 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Тандем» частично оплатило выполненные ООО «МАКСИМУС» работы по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 112,90 рублей, что подтверждается Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

Задолженность ООО «Тандем» перед ООО «МАКСИМУС» за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составляет 312 419 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ.

Согласно п.1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязуется по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» 2, 3 очередь, 

<

адрес> работы: общестроительные работы (устройство стяжки квартир 

<

адрес>) и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ, и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяются локальными ресурсными сметными расчетами № РС-8, № РС-9, № PC-10 (Приложение №, №, № к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составила 3 092 230,91 рублей. Налогом на добавочную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по настоящему Договору определена сторонами на основании:

локального ресурсного сметного расчета № РС-8 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 773 057,73 рублей,

локального ресурсного сметного расчета № РС-9 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 1 159 586,59 рублей,

локального ресурсного сметного расчета № PC-10 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 1 159 586,59 рублей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ, в соответствии с п. 2.3 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема-передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

При этом обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п. 3.2 Договора № от 05.12.2016г.)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ. обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 15.02.2017г. на сумму 3 092 230,91 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, ООО «Тандем» свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнило, оплату за выполненные ООО «МАКСИМУС» работы не произвело. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МАКСИМУС» и ФИО1 был заключен Договор №/У-2017 уступки прав (цессии).

В соответствии с п. 1.1 Договора №/У-2017 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (цедент) уступает, а ФИО1 (цессионарий) принимает права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 339 500,35 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей, требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 11.5).

На дату заключения договора цессии цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 339 500,35 рублей, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей. На дату заключения договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составила 339 500,35 рублей. Указанную задолженность в размере 339 500, 35 рублей цедент уступает цессионарию.

Также принимает права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 3 092 230,91 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 руб., Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 руб., Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 057,73 руб., требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 11.5).

На дату заключения настоящего договора цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 3 092 230,91 рублей, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 рублей, Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 рублей, Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 057,73 рублей.

На дату заключения настоящего договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составила 3 092 230,91 рублей. Указанную задолженность в размере 3 092 230,91 рублей цедент уступает цессионарию.

Кроме того, ООО «МАКСИМУМ» уступило ФИО1 права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 312 419 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 531,92 рублей, требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от 05.122.2016 г. (п. 11.5).

На дату заключения настоящего договора цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 1 432 531,92 рубль 92 копейки, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 531,92 руб. ООО «Тандем» частично оплатило выполненные цедентом работы по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 112,90 руб., что подтверждается соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ 

На дату заключения настоящего договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составляет 312 419 рублей. Указанную задолженность в размере 312 419 рублей цедент уступает цессионарию.

Согласно п. 1.2 Договора №/У-2017 от ДД.ММ.ГГГГ уступаемые права (требования), указанные в п. 1.1. настоящего договора, переходят от цедента к цессионарию в момент подписания сторонами настоящего договора.

В соответствии с п. 2.3 Договора №/У-2017 от 10.04.2017г. цедент обязуется в 3-х-дневный срок после подписания настоящего договора уведомить должника об уступке своих прав и обязанностей по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ цессионарию путем передачи должнику копии настоящего договора.

Факт надлежащего уведомления ООО «Тандем» об уступке прав и обязанностей по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от 05.12.2016г. и заключении Договора №/У-2017 от 10.04.2017г. подтверждается подписью представителя ответчика на бланке договора цессии.

ФИО1 обращался в адрес ООО «Тандем» с требованием о погашении задолженности по Договору № подряда на выполнение строительных работ от 01.11.2016г., Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ 

Претензия оставлена ответчиком без ответа, задолженность ответчиком на день подачи искового заявления не погашена.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ФИО1 просил суд взыскать с ООО «Тандем» в свою пользу задолженность по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 339 500,35 рублей; по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312 419,00 рублей; по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 092 230,91 рублей, а всего 3 744 150,26 рублей.

Взыскать с ООО «Тандем» в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины в сумме 26 921 рублей.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика ООО «Тандем» ФИО3 (директор общества) в судебном заседании относительно удовлетворения исковых требований не возражал, наличие задолженностей по договорам подряда не оспаривал, с расчетом согласился. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ (л.д. 11-14 т. 1).

Согласно п. 1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязался по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» - 3 очередь, 

<

адрес> работы: устройство ленточного фундамента и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяется локальным ресурсным сметным расчетом № РС-1 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составила 339 500,35 рублей. Налогом на добавленную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по Договору определена сторонами на основании локального ресурсного сметного расчета № РС-1 (Приложение № к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ, в соответствии с п.2.3 Договора № от 01.11.2016г., осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема - передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

Обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п. 3.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, ООО «Тандем» свои обязательства по Договору № от 01.11.2016г. не исполнило, оплату за выполненные ООО «МАКСИМУС» работы не произвело.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ (л.д. 19-22 т. 1).

Согласно п.1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязуется по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» работы: устройство ливневой канализации и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ, и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяются локальным ресурсным сметным расчетом № РС-6 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 432 531,92. Налогом на добавочную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по настоящему Договору определена сторонами на основании локального ресурсного сметного расчета № РС-6 (Приложение № к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ, в соответствии с п. 2.3 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема-передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами форм КС-2, КС-3.

При этом обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п.3.2 Договора № от 05.12.2016г.)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-1 от 15.02.2017г. на сумму 1 432 531,92 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Тандем» частично оплатило выполненные ООО «МАКСИМУС» работы по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 112,90 рублей, что подтверждается Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

Задолженность ООО «Тандем» перед ООО «МАКСИМУС» за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составляет 312 419 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тандем» и ООО «МАКСИМУС» был заключен Договор № подряда на выполнение строительных работ (л.д. 30-33 т. 1).

Согласно п.1.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (подрядчик) обязуется по заданию ООО «Тандем» (заказчик) собственными и (или) привлеченными силами выполнить в сроки, установленные настоящим Договором, на объекте: «Жилая застройка в г.о. Новокуйбышевск по 

<

адрес> (1,2,3 очереди строительства)» 2, 3 очередь, 

<

адрес> работы: общестроительные работы (устройство стяжки квартир 

<

адрес>) и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ, и оплатить стоимость их работ на условиях и в сроки, определенные настоящим договором.

Перечень и состав подлежащих выполнению работ, определяются локальными ресурсными сметными расчетами № РС-8, № РС-9, № PC-10 (Приложение №, №, № к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ общая стоимость работ по настоящему договору составила 3 092 230,91 рублей. Налогом на добавочную стоимость не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Стоимость работ по настоящему Договору определена сторонами на основании:

локального ресурсного сметного расчета № РС-8 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 773 057,73 рублей,

локального ресурсного сметного расчета № РС-9 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 1 159 586,59 рублей,

локального ресурсного сметного расчета № PC-10 (Приложение № к настоящему Договору) на сумму 1 159 586,59 рублей, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.2 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение срока действия настоящего договора общая стоимость работ по настоящему договору, указанная в п.2.1 настоящего договора, является фиксированной и не подлежит изменению.

Оплата работ, в соответствии с п. 2.3 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется путем перечисления заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика или путем передачи подрядчику векселей по акту приема-передачи векселей или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами форм КС-2, КС-3.

При этом обязанности заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком заказчика со счета заказчика или со дня подписания сторонами акта приема-передачи векселей.

Пунктом 3.1 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ - ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ - ДД.ММ.ГГГГ. К выполнению работ подрядчик приступает в течение трех календарных дней с даты заключения договора (п. 3.2 Договора № от 05.12.2016г.)

Согласно п. 9.5 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ. обязательства подрядчика считаются выполненными после завершения работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

ООО «МАКСИМУС» надлежащим образом исполнило свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в указанные в договоре сроки произвело работы на объекте, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 15.02.2017г. на сумму 3 092 230,91 рублей.

Срок оплаты выполненных работ по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ.

Однако ООО «Тандем» свои обязательства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнило, оплату за выполненные ООО «МАКСИМУС» работы не произвело. 

В соответствии с положениями ст. 388 Гражданского кодекса РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МАКСИМУС» и ФИО1 был заключен Договор №/У-2017 уступки прав (цессии) (л.д. 41-42 т. 1).

В соответствии с п. 1.1 Договора №/У-2017 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» (цедент) уступает, а ФИО1 (цессионарий) принимает права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 339 500,35 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей, требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 11.5).

На дату заключения договора цессии цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 339 500,35 рублей, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500,35 рублей. На дату заключения договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составила 339 500,35 рублей. Указанную задолженность в размере 339 500, 35 рублей цедент уступает цессионарию.

Также принимает права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 3 092 230,91 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 руб., Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 руб., Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 057,73 руб., требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 11.5).

На дату заключения настоящего договора цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 3 092 230,91 рублей, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 рублей, Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 159 586,59 рублей, Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 057,73 рублей.

На дату заключения настоящего договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составила 3 092 230,91 рублей. Указанную задолженность в размере 3 092 230,91 рублей цедент уступает цессионарию.

Кроме того, ООО «МАКСИМУМ» уступило ФИО1 права (требования) по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Цедентом и ООО «Тандем», в части требования оплаты с ООО «Тандем» задолженности в сумме 312 419 рублей по оплате работ, выполненных по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, поименованных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 531,92 рублей, требования оплаты с ООО «Тандем» штрафных санкций за нарушение срока оплаты по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 11.5).

На дату заключения настоящего договора цедент выполнил по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, работы на общую сумму 1 432 531,92 рубль 92 копейки, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № АКТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 432 531,92 руб. ООО «Тандем» частично оплатило выполненные цедентом работы по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 112,90 руб., что подтверждается соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ 

На дату заключения настоящего договора задолженность должника перед цедентом за выполненные по договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ работы составляет 312 419 рублей. Указанную задолженность в размере 312 419 рублей цедент уступает цессионарию.

Согласно п. 1.2 Договора №/У-2017 от ДД.ММ.ГГГГ уступаемые права (требования), указанные в п. 1.1. настоящего договора, переходят от цедента к цессионарию в момент подписания сторонами настоящего договора.

В соответствии с п. 2.3 Договора №/У-2017 от ДД.ММ.ГГГГ цедент обязуется в 3-х-дневный срок после подписания настоящего договора уведомить должника об уступке своих прав и обязанностей по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ цессионарию путем передачи должнику копии настоящего договора.

Факт надлежащего уведомления ООО «Тандем» об уступке прав и обязанностей по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от 05.12.2016г. и заключении Договора №/У-2017 от 10.04.2017г. подтверждается подписью представителя ответчика на бланке договора цессии (л.д. 42 т. 1).

ФИО1 обращался в адрес ООО «Тандем» с требованием (претензией) о погашении задолженности по Договору № подряда на выполнение строительных работ от 01.11.2016г., Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 44-45 т. 1). Однако претензия оставлена ответчиком без ответа, задолженность не погашена. 

Ответчиком факт выполнения подрядчиком ООО «МАКСИМУС» строительных работ по заказу ООО «Тандем» не оспаривался». В доказательство указанного обстоятельство сторонами представлены акты о приемке выполненных работ ( л.д.17,26,33 т.1).

Оснований не доверять представленным документам не имеется.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства в их совокупности, согласие ответчика с исковыми требованиями, исходя из положений ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, суд полагает исковые требования в части взыскания задолженности по договорам подряда подлежащими удовлетворению в заявленных истцом размерах. 

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика ООО «Тандем» в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 26 921 рублей (л.д. 3а т. 1).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Тандем» о взыскании задолженности по договорам подряда удовлетворить.

Взыскать с ООО «Тандем» в пользу ФИО1 задолженность по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 339 500,35 рублей; 

задолженность по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 312 419,00 рублей; 

задолженность по Договору № подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 092 230,91 рублей; 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 921 рублей, а всего 3 771 071,26 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд 

<

адрес> в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательном виде.

Судья: Кривицкая О.Г.

Мотивированное решение изготовлено 04.12.2017 года.