Дело № 2-3068/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21ноября 2023 года г. Севастополь 

Нахимовский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Богаевской Т.С. 

при секретаре судебного заседания ФИО5, 

с участием 

представителя истца ФИО6, 

представителя ответчика ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заявлению ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго», третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора – Общество с ограниченной ответственностью «Севэнергосбыт», Товарищество собственников недвижимости «СНТ «Сапун-гора» о защите прав потребителя, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств,

установил:

ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Севастопольэнерго» в котором с учетом заявления об увеличении исковых требований просила возложить обязанность на ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>; взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения условий договора в размере 

<

данные изъяты> руб.; компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.

В обоснование иска указывает, что является собственником земельного участка №, площадью 10,99 кв.м., и жилого дома, расположенных в границах ТСН «СНТ «Сапун-Гора», г. Севастополь. Жилой дом по данному адресу является местом постоянного (круглогодичного) проживания истца и супруга - пенсионера. Домовладение и земельный участок расположены в сельской местности, не газифицированы, при их эксплуатации используются бытовые и хозяйственные электрические устройства с выделенной при первичном подключении (технологическом присоединении) номинальной активной мощностью потребления 3,5 кВт, что является недостаточным для полноценной эксплуатации домовладения и земельного участка. В 2021 году по заявлению истца сетевой организацией ООО «Севастопольэнерго» выданы Технические условия для присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВУЩ -0.4 кВ, максимальной мощностью 5 кВт, с учетом ранее присоединенной мощности 3,5 кВт 220В в рамках договора энергоснабжения №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). ФИО2 обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение, необходимые для электроснабжения объекта - принадлежащей ей жилого дома. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 15 Технических условий составляет 1 год со дня поступления подтверждающих документов об оплате счета. Обязанности по оплате подключения истцом исполнены ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с предъявленным счетом №от 05 мая.2022 года. Поскольку в установленный срок обязательства по договору об исполнении технических условий с фактическим приемом (подачей) мощности 15 кВт исполнены не были, направленные на адрес ответчика претензии оставлены без разрешения, ФИО2 обратилась в суд с заявленными требованиями.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО6 доводы иска поддержала по указанным в иске основаниям. На иске настаивала частично отказалась от требования об обязании ТСН СНТ « Сапун-Гора» не чинить препятствий в технологически присоединении. 

Представитель ответчика ООО « Севастопольэнерго» надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания в суд не явился, о причинах неявки не сообщил, об отложении дела не просил. 

В предыдущем судебном заседании от 

<

данные изъяты> года представитель ООО «Севастопольэнерго», действующий по доверенности ФИО7, не оспаривая основания заявленных исковых требований, против исковых требований возражал,указав на причины неисполнения технических условий по независящим от ООО «Севастопольэнерго» обстоятельствам, связанных с субподрядной организацией и необходимостью мероприятий по согласованию места расположения новой линии электропередачи. 

Представитель третьего лица ТСН СНТ «Сапун гора» по доверенности ФИО8 в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражал.

Третье лицо ФИО10 исковые требования поддержал 

Третье лицо ООО «Севэнергосбыт» в судебное заседание явку представителей не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщил.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 167 ГПК РФ в отсутствии не явившихся лиц.

Выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло и энергоснабжения.

В силу абзаца шестого пункта 1 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии относятся к деятельности субъектов естественной монополии.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике", устанавливая правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики и определяя полномочия органов государственной власти по регулированию этих отношений, предусматривает, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (абзац первый пункта 1 статьи 26).

Во исполнение требований федерального законодателя постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, действующие в редакции постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации (пункт 1).

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Договор технологического присоединения является публичным договором в силу закона.

По определению статьи 3 Закона об электроэнергетике территориальная сетевая организация - это коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных названным федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Обязательство по совершению действий, указанных в статье 3 Федерального закона «Об электроэнергетике», возникает у сетевой организации в силу статьи 26 этого федерального закона по договору об осуществлении технологического присоединения и состоит в реализации определенных мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения.

Пунктом 3 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения (абзац первый).

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй).

Пунктами 16.3 и 25.1 Правил недискриминационного доступа на сетевую организацию возложена обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами, до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

При этом, сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (абзац третий).

Как следует из материалов дела, ФИО2 на основании нотариально удостоверенного договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ является собственником земельного участка, кадастровый №, и жилого дома расположенного по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>. Жилой дом является местом постоянного проживания истца и ее супруга ФИО9 Соответствующие сведения о праве собственности внесены в ЕГРН.

В соответствии с договором электроснабжения с потребителем –собственником домовладения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между истцом и ООО «Севастопольэнерго», ФИО2 является потребителем коммунальной услуги электроснабжения жилого дома по указанному выше адресу. ООО «Севастопольэнерго» принимает обязанности Гарантирующего поставщика услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.1 Договора).

Мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов 3,5 кВт (п. 4 Договора). В обязанности поставщика входит осуществление предоставленной коммунальной услуги Потребителю в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, в необходимых для него объемах и надлежащего качества с соответствии с требованиями закона (п.7 Договора).

Согласно Акта о технологическом присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ТСН СНТ «Сапун-гора» и собственником земельного участка № (истец), подтверждены характеристики подключения энергопринимающих устройств Потребителя к ВЛ-0,23 кВ ТСН «Сапун-Гора». Основной источник питания ВЛ -0,4 кВ от ТП 1261. Наличие присоединения счетчика СЕ 101 «Энергомера» №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданной истцом заявки ООО «Севастопольэнерго» выданы Технические условия для присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>.

В соответствии с п. 2 Технических условий объектом технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя является жилой дом, кадастровый №, и жилого дома расположенного по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет: 15 кВт, с учетом ранее присоединенной мощности 3,5кВт 220В в рамках договора энергоснабжения № (п. 3 Технических условий).

Точка присоединения: нижние клеммы отходящего коммутационного аппарата и установленного в вводно-учетном щите ВУЩ-О,4кВ после прибора учёта электрической энергии, присоединенного от ближней опоры построенной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кв.

Прогнозируемые границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливаются в точке присоединения электроустановки, но не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка (п.7).

Основной источник питания: ПС-110/6В № (п.8). 

По условиям пункта 10 Технических условий сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая разработку проектной (рабочей) документации на строительство КЛ-6кВ и ЛЭП-0.4кв, установку проектируемой КТП-6/0,4кВ и ВУЩ - 0,4кВ. Согласование принимаемых технических решений или проекта электроснабжения, а также согласование используемого оборудования с ООО «Севастопольэнерго» и другими заинтересованными организациями, собственниками объектов (земли).

Истец ФИО2, в свою очередь, обязалась выполнить возложенные на заявителя мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; оплатить стоимость подключения в установленный срок.

Обязанности по оплате подключения истцом исполнены ДД.ММ.ГГГГ по предъявленному ответчиком счету №от ДД.ММ.ГГГГ.

Уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, направленным заказной почтовой корреспонденцией уведомлением с описью вложений истец уведомила сетевую организацию об исполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, предусмотренных техническими условиями, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения.

В соответствии с п. 15 Технических условий № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств составляет 1 год со дня оплаты заявителем счета.

Срок истечения исполнения обязательств по исполнению технических условий - ДД.ММ.ГГГГ. На момент обращения истца в суд с исковым заявлением условия договора исполнены не были.

Направленное в адрес ООО «Севэнергосбыт» уведомление о исполнении публичных функций и обязательств по договору (технических условий) разрешение не нашло. Ответ предоставлен не был.

В п. 3 ст. 401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, которые в ст. 21 и 26 Закона об электроэнергетике устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединённой мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем первым п. 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пп. 12(1), 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй п. 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго п. 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п. 14). 

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и осуществление подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надёжности и качества электрической энергии).

При этом из подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25 (1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счёт в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25(1) Правил присоединения мероприятий с п. 28 данных Правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, указывают, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведённых положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

Пунктом 1 ст. 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил № договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в качестве существенных условий должен содержать положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550,00 руб., уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550,00 руб., уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Согласно предоставленному истцом в материалы дела расчету размер неустойки за нарушение сроков исполнения договора подлежит установлению в размере 5 % за каждый день просрочки от уплаченной суммы 

<

данные изъяты> дня просрочки = 

<

данные изъяты> руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Таким образом, суд, с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.

В порядке ст. 98, 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежат взысканию судебных расходы по делу по заявленным требованиям истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, в размере 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома удовлетворить частично.

Возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: по адресу: Севастополь, ТСН СНТ «Сапун-гора», 

<

адрес>, в соответствии с Техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ №, максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт, с учетом ранее присоединенной мощности 3,5 кВт, не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО2 неустойку за нарушение срока исполнения договора в размере 

<

данные изъяты>., компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в доход местного бюджета госпошлину 300 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Нахимовский районный суд. 

Решение в окончательной форме принято судьей ДД.ММ.ГГГГ

Председательствующий судья БогаевскаяТ.С.