УИД 25RS0003-01-2025-003342-06

Дело № 2-498/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2026 года гор. Владивосток

Первореченский районный суд гор. Владивостока Приморского края в составе: председательствующего судьи Смадыч Т.В.,

при секретаре Кожевникове Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» о возложении обязанности,

установил:

Истец обратился в суд с названным иском, в обоснование, указав, что между истцом и АО «ДРСК» заключен договор на выполнение работ, технического присоединения к электрическим сетям объекта «Энергопринимающие устройства на земельном участке», максимальной мощностью 10кВт, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт.Смоляниново, 

<

адрес>, участок №А и техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ 05-504-25-2009. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по договору им произведена своевременно ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ответчик не приступил к работам. Просил суд обязать ответчика выполнить работы по договору, взыскать неустойку.

Впоследствии истец уточнил заявленные требования, просил суд обязать АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, расположенного на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Смоляниново, 

<

адрес>, участок №А, кадастровый номер земельного участка 25:24:150201:2166, в соответствии с условиями договора-счета об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №-ТП в срок, не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору-счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 307,97 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 26 153,99 рублей.

В судебном заседании представитель истца уточнил сумму неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, просил взыскать 25 623,56 рублей и сумму штрафа, просил взыскать 22 811,78 рублей.

Истец и его представитель в судебном заседании на удовлетворении заявленных требованиях настаивали, с учетом уточнений.

Представитель ответчика, в судебном заседании с требованиями истца не согласился, предоставив письменные возражения по заявленным требованиям, в которых указал, что условиями типового договора-счета от ДД.ММ.ГГГГ закреплены обязательства не только АО «ДРСК», но и ФИО4 Истец обязан был уведомить сетевую организацию о выполнении п. 11 технических условий. До настоящего времени истцом уведомление о выполнении технических условий в адрес ответчика не направлено. Заявленный истцом размер неустойки просила уменьшить. Требования истца о компенсации морального вреда и взыскании штрафа считает необоснованными.

Выслушав доводы участников процесса, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В пункте 3 статьи 539 ГК РФ предусмотрено, что к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным данным кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Договор технологического присоединения исходя из п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон № 35-ФЗ), пл. 6, 16, 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила N 861), по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Кодекса).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «ДРСК» заключен договор-счет №-ТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Энергопринимающие устройства на земельном участке», максимальной мощностью 10 кВт, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт.Смоляниново, 

<

адрес>, участок 4А,

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев (п. 5 условий типового договора).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 55 703,40 рублей (п. 10 условий типового договора).

ДД.ММ.ГГГГ истец осуществил оплату ответчику за технологическое присоединение в полном размере, что подтверждает справка по операции ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 6 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в адрес ответчика с письменной претензией, в которой указал, что ответчик обязался до ДД.ММ.ГГГГ подключить энергопринимающие устройства на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт.Смоляниново, 

<

адрес>, участок 4А. На дату подачи претензии услуга не оказана. Просил незамедлительно решить данную проблему, а также предложить варианты компенсации, за нарушение условий договора.

Ответом от ДД.ММ.ГГГГ в адрес истца директор АО «ДРСК» указал, что в связи с увеличением спроса на технологическое присоединение в 2022-2024 годах и значительным количеством мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей на территории 

<

адрес>, выполнение мероприятий планируется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик дал истцу аналогичный ответ, с указанием того, что выполнение мероприятий планируется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.21-786/2025, в том числе по заявлению ФИО1, АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, выразившегося в нарушении порядка технологического присоединения к электрическим сетям к назначению наказания в виде административного штрафа.

В ходе рассмотрения дела по существу, ДД.ММ.ГГГГ директор АО «ДРСК» направил ФИО4 ответ о том, что филиал организации предпримет максимальные усилия для выполнения мероприятия в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.

При этом из подпункта "б" пункта 25 и подпункта "б" пункта 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подпункте "б" пункта 25 и подпункте "б" пункта 25(1) Правил присоединения мероприятий с пунктом 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, приводит к выводу о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом "г" пункта 25(1) Правил присоединения установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Таким образом, в отношении лиц, указанных в пункте 14 Правил присоединения, обратившихся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, к которым относится ответчик, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения, неотъемлемой частью которого является обязанность сетевой организации по обеспечению технических условий технологического присоединения.

Соответственно АО "ДРСК" как сетевая организация по договору обязано было не только осуществить мероприятия по технологическому присоединению, но и совершить действия, направленные на обеспечение технической возможности такого присоединения.

Заключая указанный договор, АО "ДРСК" обладало сведениями, необходимыми для исполнения названного договора, в том числе сведениями о местонахождении земельного участка.

Также судом установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ АО «ДРСК» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Смоляниново, 

<

адрес>, участок №А, кадастровый номер земельного участка 25:24:150201:2166, не исполнен, объект не подключен к электрическим сетям.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, согласно условиям договора, заключенного между сторонами

составляет 10 кВт, категория надежности 3, класс напряжения электрических сетей к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (п.3 условий типового договора).

Как следует из пункта 4 приведенного договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 26 лет со дня заключения настоящего договора.

Пунктом 7 технических условий определена точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП-0,4кВ.

В силу пункта 10 приведенных технических условий сетевая организация осуществляет строительство ЛЭП-0,4кВ протяженностью 60 м, ответвлением от существующей ЛЭП-0,4кВ «

<

адрес>» КТП-83014 до границы участка Истца; реконструкцию ВЛ-0,4кВ с монтажом узла присоединения к ответвительной опоре ВЛ-0,4кВ; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

Требования, которые надлежало выполнить заявителю, указаны в пункте 11 приведенных технических условий, среди которых: монтаж ввода от проектируемой точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности; осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

ФИО1 относится к потребителям, указанным в пункте 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила, Постановление Правительства №).

В соответствии с пунктом 6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях.

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, в течении одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

Согласно пункту 108 Правил Постановления Правительства №, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Согласно пункту 110 Правил (Постановление Правительства №), в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0.4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением №(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением № к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

Сетевая организация не осуществляет проверку выполнения технических условий и фактическое присоединение к электрическим сетям в отношении следующих заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже:

А) Физических лиц, с мощностью устройств до 15 кВт по 3 категории надежности;

Б) Юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с мощностью устройств до 150кВт по 2, 3 категории надежности.

В отношении указанных заявителей сетевая организация обеспечивает возможность осуществить действиями заявителя фактическое присоединение его объектов к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности в соответствии с инструкцией.

Вне зависимости от уровня напряжения, по указанным категориям заявителей, оформление актов (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) осуществляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы размещаются в Личном кабинете клиента. Подписание документов со стороны заявителя не требуется. С даты размещения актов (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в Личном кабинете договор на технологическое присоединение считается исполненным.

ФИО1 в соответствии с п.п. 10-12 Договора своевременно и в полном объеме выполнено обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение в размере 55 703,40 рублей, что подтверждается справкой по операции, выданной ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк».

Также истец, ДД.ММ.ГГГГ уведомил ответчика о выполнении мероприятий, предусмотренных п.11 технических условий.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым для устранения нарушений прав истца обязать ответчика не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, расположенного на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Смоляниново, 

<

адрес>, участок №А, кадастровый номер земельного участка 25:24:150201:2166, в соответствии с условиями договора-счета об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №-ТП.

В соответствии с пунктом 17 утвержденного публичного типового договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Поскольку ответчиком объект истца не подключен к электрическим сетям, то требования истца о взыскании с ответчика неустойки, подлежат удовлетворению в переделах заявленных требований, с учетом того, что счет истцом был оплачен ДД.ММ.ГГГГ, работы должны были быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ включительно, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 25 623,56 рубля, в пределах заявленных истцом исковых требований, установленная пунктом 17 утвержденного публичного типового договора, сторона договора, в размере 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку факт нарушения прав истца нашел доказательственное подтверждение в ходе производства по делу, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в соответствии со ст. ст. 151, 1101 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ "О защите потребителей", в размере 20 000 рублей, который определен на основании установленных по делу обстоятельств, соответствует требованиям разумности и справедливости.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, размер штрафа на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" составляет 22 811,78 рублей.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Обязать АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, расположенного на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Смоляниново, 

<

адрес>, участок №А, кадастровый номер земельного участка 25:24:150201:2166, в соответствии с условиями договора-счета об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №-ТП в срок, не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в пользу ФИО1 неустойку 25 623,56 рубля, компенсацию морального вреда 20 000 рублей, штраф 22 811 рублей.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Первореченский районный суд 

<

адрес> в течение месяца с момента его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий

Мотивированное решение изготовлено: 30.01.2026