УИД:23RS0042-01-2024-001468-06

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новороссийск 8 августа 2024 года 

Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе судьи Литвинова А.Н.,

при секретаре Тесленок Т.Н., с участием представителей сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2387/2024 по иску 

<

ФИО1 к ПАО «Россети Кубань» о защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л :

<

ФИО1 обратился в суд с иском, в котором просит обязать ПАО «Россети Кубань» исполнить обязательства по договору 

<

№> от 1 июля 2023 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям взыскать неустойку за период с 1 января по 27 февраля 2024 года в сумме 2 314 рублей 20 копеек, неустойку с 28 февраля 2024 года по день фактического исполнения обязательства, возмещение убытков в сумме 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф в размере 50% от присужденной суммы. 

В обоснование своих требований 

<

ФИО1 в иске указал, что им с ПАО «Россети Кубань» заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям 

<

№> от 01.07.2023, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств заявителя по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Свои обязательства по оплате работ по технологическому присоединению она выполнила в полном объеме. Установленный договором срок окончания работ по технологическому присоединению истек, однако ответчик подключение к электрическим сетям не произвел. Размер неустойки за период с 1 января по 27 февраля 2024 года составляет 2 314 рублей 20 копеек. Понесенные им убытки состоят из расходов по оплате аренды электрогенератора сумма которых составляет 60 000 рублей. 

В судебном заседании представитель истца 

<

ФИО5 иск поддержала, ссылаясь на изложенные в нем обстоятельства. 

Представитель ответчика 

<

ФИО3 иск не признала, указав в своих возражениях, что стоны заключили договор технологического присоединения к электрическим сетям 

<

№> от 01.07.2023, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств заявителя, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Для выполнения технологического присоединения энергопринимающих устройств сетевая организация, взяла на себя обязательства, предусмотренные техническими условиями №11-01/1116-23-вд, в том числе разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя разрешенной к использованию мощности, установка трехфазных средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ и ниже, строительство ВЛИ-0,4 проводом СИП -2А (0,016 км) от опоры №3 пр.№1 ТП 10/0.4 кВ СЛ-15-1174 до границы земельного участка заявителя, установку трехфазных средств коммерческого учета электрической энергии прямого включения 0,4кВ, при необходимости произвести процедуру согласования увеличения отбора мощности от сети вышестоящей сетевой организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, проведение проверки выполнения настоящих технических условий. Мероприятия ПАО «Россети Кубань» выполнены 21.02.2024, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям и актом №123001641 допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. Заявитель не уведомил сетевую организацию о готовности к подключению своих энергопринимающих устройств (указанных в заявке), не выполнил комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 15кВт, не обеспечил селективность действия устройств коммутации в присоединяемой внутренней сети потребителя, не обеспечил для проверки существование внутренней сети потребителя для отбора максимальной мощности, не предоставил сетевой организации место для размещения прибора учета электрической энергии, и доступ к таким местам размещения. Неисполнение истцом своих обязательств по договору стали причиной невозможности осуществления сетевой организацией технологического присоединения в установленный договором срок. 

Заслушав объяснения сторон и исследовав письменные доказательства, суд считает, что иска не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии определены Законом об электроэнергетике.

В статье 26 Закона об электроэнергетике определено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе по урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей регулируется Правилами N 861.

В соответствии с пунктом 3 Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и при наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил N 861).

В пункте 7 Правил N 861 установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки на технологическое присоединение; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению потребителем и сетевой организацией производится по границе участка потребителя в соответствии с положениями пунктов 16.1, 16.3, подпункта "г" пункта 25.1 Правил N 861.

Договор о технологическом присоединении по существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Согласно пункту 2 статьи 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года N 54 разъяснено, что сторона, намеревающаяся приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от его исполнения лишь на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что другая сторона не произведет исполнение в установленный срок, обязана в разумный срок предупредить последнюю об этом (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).

Из представленных суду документов видно, что стороны заключили договор технологического присоединения к электрическим сетям 

<

№> от 01.07.2023, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств заявителя, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>.

Для выполнения технологического присоединения энергопринимающих устройств сетевая организация, взяла на себя обязательства, предусмотренные техническими условиями №11-01/1116-23-вд, в том числе разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя разрешенной к использованию мощности, установка трехфазных средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ и ниже, строительство ВЛИ-0,4 проводом СИП -2А (0,016 км) от опоры №3 пр.№1 ТП 10/0.4 кВ СЛ-15-1174 до границы земельного участка заявителя, установку трехфазных средств коммерческого учета электрической энергии прямого включения 0,4кВ,при необходимости произвести процедуру согласования увеличения отбора мощности от сети вышестоящей сетевой организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, проведение проверки выполнения настоящих технических условий. 

Мероприятия со стороны ПАО «Россети Кубань» выполнены 21.02.2024, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Заявитель не уведомил сетевую организацию о готовности к подключению своих энергопринимающих устройств (указанных в заявке), не выполнил комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 15кВт, не обеспечил селективность действия устройств коммутации в присоединяемой внутренней сети потребителя, не обеспечил для проверки существование внутренней сети потребителя для отбора максимальной мощности, не предоставил сетевой организации место для размещения прибора учета электрической энергии, и доступ к таким местам размещения. Исходя из изложенного, заявитель не готов на дату подачи иска к завершению процедуры технологического присоединения, поскольку нарушил процедуру технологического присоединения, предусмотренную п.85 Правил № 861. 

В соответствии с п. 17 договора стороны установили, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Истцом не представлены доказательств, свидетельствующих о том, что все необходимые мероприятия, предусмотренные техническими условиями, после выполнения которых сетевая организация должна была произвести фактическое присоединение энергопринимающих устройств на момент предъявления иска были произведены. 

Таким образом, принимая во внимание отсутствие готовности энергопринимающих устройств заявителя (истца) к фактическому присоединению, ответчик имеет равнозначное право требования взыскания с истца неустойки за период неисполнения обязательству по договору. 

Согласно части 3 ст. 328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска 

<

ФИО1 к ПАО «Россети Кубань» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору 

<

№> от 1 июля 2023 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям взыскании неустойки за период с 1 января по 27 февраля 2024 года в сумме 2 314 рублей 20 копеек, неустойки с 28 февраля 2024 года по день фактического исполнения обязательства, убытков в сумме 60 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей и штрафа в размере 50% от присужденной суммы отказать. 

Решение может быть обжаловано в Краснодарской краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение месяца со дня его составления в окончательной форме. 

Судья А.Н. Литвинов