РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ольхонский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Афанасьевой Т.В., при секретаре Мардаевой Г.С., с участием представителя истца П.Н.В., действующей на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия один год,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Б.А.Г. к Филиалу акционерного общества «И» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

Б.А.Г. обратился в Ольхонский районный суд с иском к Филиалу акционерного общества «И» об обязании осуществить мероприятия по технологическому присоединению жилого дома, расположенного по земельном участке по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым № и хозяйственных построек, расположенных на земельных участках № и №, расположенных по адресам: 

<

адрес> соответственно, в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда; взыскать с ответчика судебные расходы по уплаченной госпошлине в размере 300 руб. 

В судебное заседание истец Б.А.Г. не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель истца по доверенности П.Н.В. в судебном заседании исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить. 

Представитель ответчика филиал АО «И» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, представили письменный отзыв, в котором просили в удовлетворении исковых требований отказать. 

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Суд, выслушав представителя истца, изучив письменный отзыв представителя ответчика, исследовав и оценив представленные суду письменные доказательства, в соответствии с требованиями статей 67, 68 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), находит исковые требования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации Постановлением от 27.12.2004 N 861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила N 861). 

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства. 

Исходя из положений пункта 3 Правил N 861 следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил). 

Действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения). 

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Судом установлено, что Б.А.Г. являясь собственником земельного участка с кадастровым № и расположенного на нем жилого дома по адресу: 

<

адрес> и хозяйственных построек, расположенных на земельных участках № и №, расположенных по адресам: 

<

адрес> соответственно, заключил с АО "И" договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Пунктом 4 данного договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора. 

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п. 6.2 договора, сетевая организация обязуется в течение 8 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя. 

Пунктом 10 договора № установлен размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Службы по тарифам 

<

адрес> №-спр составляет 62880 руб.

Пунктом 10 договора № установлен размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Службы по тарифам 

<

адрес> №-спр от ДД.ММ.ГГГГ составляет 578 543,79 руб.

Пунктом 10 договора № установлен размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Службы по тарифам 

<

адрес> №-спр от ДД.ММ.ГГГГ составляет 652 071,49 руб.

В приложении к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в пунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 содержатся технические условия для присоединения к электрическим сетям. 

Обязательства по оплате услуг сетевой организации Б.А.Г. исполнены в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежными документами и не оспорено ответчиком. 

Уведомлениями от ДД.ММ.ГГГГ истец известил АО "И" о выполнении им технических условий.

Из пояснений представителя истца в суде следует, что ответчиком до настоящего времени обязательства по договору о технологическом присоединении не исполнены, истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ направлена претензия, которая оставлена без ответа. 

Из отзыва АО "И" следует, что филиалом АО "И", в частности, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об осуществлении технологического присоединения (далее – договор), также ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №. Однако в 

<

адрес> существует дефицит мощностей на центрах питания АО «И». Направление средств инвестиционной программы АО «И» на реализацию льготного технологического присоединения с учетом объема некомпенсированных выпадающих доходов приводит к снижению надежности электроснабжения существующих потребителей, в том числе населения, в связи с недофинансированием мероприятий по реконструкции существующей электросетевой инфраструктуры, а также к снижению доступности услуги по технологическому присоединению для других групп заявителей. Исполнение АО «И» обязанности по договору в срок, предусмотренный подпунктом «б» п.16 Правил, на сегодняшний день является недопустимым.

Таким образом, судом установлен факт неисполнения ответчиком обязанности по технологическому присоединению принадлежащего истцу жилого дома к электрическим сетям. 

Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание отсутствие подписанного сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, суд находит требование истца об обязании ОАО "ИЭСК" осуществить технологическое присоединение принадлежащего истцу жилого дома законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

При этом, учитывая необходимость проведения ответчиком указанных им работ, суд полагает возможным возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства по договорам об осуществлении технологического присоединения в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

Согласно чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ истец уплатил государственную пошлину в размере 300 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Б.А.Г. удовлетворить. 

Возложить на Филиал акционерного общества «И» (ИНН №, ОГРН №) обязанность исполнить обязательства по договорам об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Филиала акционерного общества «И» (ИНН №, ОГРН №) в пользу Б.А.Г. (паспорт № №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) судебные расходы по уплаченной государственной пошлины в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Ольхонский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня составления мотивированного решения. 

Мотивированный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья Т.В. Афанасьева