Дело № 2-7089/2025

УИД 50RS0031-01-2025-002867-98

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 августа 2025 года г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе 

председательствующего судьи Захаровой Л.Н.

при секретаре Комерзан К.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО "Мособлгаз" о защите прав потребителей, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2, уточняя исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратилась в суд с иском к ответчику АО «Мособлгаз» об обязании подписать с ФИО2 дополнительное соглашение о продлении срока до ДД.ММ.ГГГГ включительно Договора по технологическому подключению и пуску газа от ДД.ММ.ГГГГ исполнить обязательства по пуску газа в жилой дом по адресу: АДРЕС срок - до ДД.ММ.ГГГГ включительно; оплатить неустойку (пени) истцу, вследствие нарушение установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара (коммунального ресурса), предусмотренных ст. 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» в сумме № руб.; оплатить неустойку (пени) истцу, в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги) предусмотренных ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» в сумме № руб.; возместить досудебные, судебные расходы, в том числе по оплате услуг представителю истца в сумме № руб.; взыскании в счет компенсации морального вреда в размере № руб.; штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца.

В обоснование требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Мособлгаз» был заключен Договор № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно п.1.3 раздел 1 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 1 (один) год со дня заключения Договора. В настоящее время этот срок истек ДД.ММ.ГГГГ. Ответчиком нарушены сроки исполнения Договора п.1.3 и согласно аб.12 п. 3.1. раздел 3 «Обязанности и права сторон» данного Договора Акт о подключении (технологическом присоединении) ответчиком до сих пор не составлен и не подписан, как не произведено и фактическое присоединение (врезка и пуск газа), т.е. ответчиком нарушены сроки исполнения договорных обязательств и нарушены права истца, что ответчик признает и согласен.

Представитель истца в судебное заседание явилась, уточненные исковые требования поддержала.

Представители ответчика АО «Мособлгаз» в судебное заседание явилась, исковые требования не признала, представила письменные возражения.

Выслушав явившихся лиц, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

Пунктом 2 Правил подключения закреплено понятие "догазификация" осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» (программа социальной газификации), утвержденной Постановлением Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № (с последующими изменениями и дополнениями).

АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики ФИО3 АДРЕС.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мособлгаз» и ФИО2 заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №

В соответствии с условиями Договора, исполнитель (АО «Мособлгаз») обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. Заявитель ФИО2 обязалась обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС кадастровый № (п.1.1 Договора).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 1 год со дня заключения Договора (п.3 Договора), то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Потребитель (Истец) обязан оплатить данные работы согласно п.5.2. Договора в следующем порядке: «Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее плата) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет № п. 5.№, что составляет №, истец оплатил после подписания договора и 50% должен оплатить после подписания акта о подключении. Но до сих пор акта о подключении нет, пуск газа ответчиком не осуществлен.

Истец со своей стороны добросовестно исполнил договорные обязательства.

В силу пункта 3 договора технологического присоединения ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных обязанностей по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые объект капитального строительства жилой дом заявителя.

Согласно абз. 2 п. 1 п. 3 ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 N «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги).

ДД.ММ.ГГГГ Потребитель (Истец) обратился к ответчику с Претензией досудебного урегулирования № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение 2), в котором требовал продлить сроки действия Технических условий безвозмездно, в связи с нарушением срока выполнения договорных обязательств ответчиком, осуществить фактическое присоединение (врезки и пуска газа), составить и подписать акт о подключении домовладения по адресу: АДРЕС

Согласно отчёту, об отслеживании почтового отправления №, размещённому на официальном сайте АО «Почта России», письмо было получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ.

АО «Мособлгаз» систематически перенося даты пуска газа с ДД.ММ.ГГГГ пустыми обещаниями подвергает истца моральным, физическим и нравственным страданиям, поскольку в доме истца ответчик демонтировал систему печного отопления и смонтировал систему отопления под газ.

Но, так как, ответчик не исполнил обязательства по п.1.3. Договора по пуску газа ДД.ММ.ГГГГ, то истец отапливается 2 отопительных сезона электроприборами, стараясь хоть как-то спасти свой дом от сырости, плесени, а в последующем и от разрушения, так как дом из бревна, облицован кирпичом и внутри отделан деревом- вагонкой. Дому с такой конструкцией (бревно, облицованное кирпичом и отделанное деревом) нужна постоянная поддерживающая температура, чтобы избежать конденсата, плесени и гниения древесины. Особенно это важно для бревна, которое является гигроскопичным материалом и подвержено воздействию влаги. Кирпичная облицовка также может накапливать влагу, что усугубляет проблему.

Более того, по представленным ответчикам документам можно сделать вывод, что Подрядчик, на которого ответчик пытается взвалить вину выполнил свои обязательства полностью перед АО «Мособлгаз», согласно Технического задания, в котором не указаны мероприятия по проколу и пуско-наладочные работы по подаче газа. Это подтверждено действиями ответчика, так как подписанный акт выполненных работ с Подрядчиком не содержит претензий к выполненной работе.

Ответчик направил в адрес истца Дополнительное соглашение, которое истец получил ДД.ММ.ГГГГ., с датой переноса пуска газа с ДД.ММ.ГГГГ (согласно Дорожной карте приобщенной к материалам дела) до ДД.ММ.ГГГГ, которая также не подтверждена ни дорожной картой, приобщенной к материалам дела, ни фактическими обстоятельствами дела. 

Просрочка исполнения договорных обязательств ответчиком началась с ДД.ММ.ГГГГ Отопительный сезон начинается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Истцом представлен расчет неустойки:

№

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара истец выдвигает требование в сумме № руб.

Суд не соглашается с данным расчетом, полагая его арифметически не верным.

В силу ст. 39.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В настоящем случае спорные правоотношения урегулированы Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года N 1547, в силу подп. "и" п. 52 которых договор о подключении содержит следующие существенные условия, в частности, обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Данное условие содержит порядок определения специальной неустойки, прямо указывающий на необходимость ее расчета, исходя из внесенной платы, установленной договором, за технологическое подключение. Данная норма вообще не предусматривает расчета неустойки при производстве безвозмездного подключения газоиспользующего оборудования.

Разрешая требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ, суд, руководствуясь пп. "и" п. 52 Правил N 1547, исходил из того, что истец заказал выполнение работ по указанному договору для целей удовлетворения личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то есть в рамках догазификации, на спорные правоотношения сторон распространяется законодательство о защите прав потребителей, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки в размере № руб.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", с учетом фактических обстоятельств по делу, понесенных истцом нравственных страданий и исходя из требований разумности и справедливости, суд находит требования истца о взыскании компенсации морального вреда обоснованными, с учетом степени вины ответчика, характера и степени причиненных истцу нравственных страданий, суд находит возможным взыскать компенсацию морального вреда в размере № руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Так как Договор по технологическому присоединению и пуску газа является Договором смешанного характера и до настоящего времени, ни услуга - технологическое присоединение, ни поставка товара - коммунального ресурса (первоначальный пуск газа) не были выполнены в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, суд полагает возможным взыскать штраф в размере № руб.

Разрешая требования об обязании подписать с ФИО2 дополнительное соглашение о продлении срока до ДД.ММ.ГГГГ включительно Договора по технологическому подключению и пуску газа от «ДД.ММ.ГГГГ года, исполнить обязательства по пуску газа в жилой дом по адресу: АДРЕС срок - до ДД.ММ.ГГГГ включительно, суд приходит к выводу об их удовлетворении.

Поскольку суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны расходы на оплату юридических услуг в размере № руб. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере № руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО2 к АО "Мособлгаз" - удовлетворить частично.

Обязать АО "Мособлгаз" ( ИНН №) подписать с ФИО2 ( ИНН № дополнительное соглашение о продлении срока до ДД.ММ.ГГГГ включительно Договора по технологическом подключению и пуску газа от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать АО "Мособлгаз" ( ИНН № исполнить обязательства по пуску газа в жилой дом по адресу: АДРЕС срок - до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Взыскать с АО "Мособлгаз" ( № в пользу ФИО2 ( ИНН № неустойку за нарушение сроков выполнения работы ( оказания услуги) в размере № руб., в счет компенсации морального вреда № руб., штраф в размере № руб., в счет возмещения расходов на оплату юридических услуг № руб.

В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки в большем размере - отказать.

Взыскать с АО "Мособлгаз" ( ИНН № государственную пошлину в доход местного бюджета № руб.

Решение может быть обжаловано в ФИО3 областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Федеральный судья Л.Н. Захарова

Мотивированное решение изготовлено 29 августа 2025 года