Дело № 2-698/2026 19 января 2026 года

УИД: 78RS0023-01-2025-005850-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Гомзяковой В.В.,

при секретаре Федоровой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Д.Ю. к ПАО «Россети Ленэнерго» о признании условий договора недействительными, обязании произвести определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит признать недействительным пункт 5 договора об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок технологического присоединения составляет 6 месяцев со дня заключения данного договора, обязать ответчика исполнить договор в срок 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей (л.д. 3-7).

В обоснование требований истцом указано, что между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. Пунктом 5 договора установлено, что срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, согласно п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета по договору, оплата произведена истцом 16.06.2025. Пункт 5 договора противоречит пп. б п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, которым предусмотрен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в течении 30 рабочих дней.

Представитель ответчика И.К., действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, возражал относительно удовлетворения заявленных требований.

Истец в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Суд, определив рассмотреть дело в отсутствие истца по правилам ст. 167 ГПК РФ, выслушав мнение представителя ответчика, изучив материалы дела, оценив представленные в дело доказательства согласно ст. 67 ГК РФ, приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.26 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В соответствии с абзацем четвертым п. 1 ст. 26 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным

Согласно абзацу 2 подпункта "б" пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 30 рабочих дней устанавливается - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении в том числе следующих условий: расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности). В случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта срок 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №(л.д. 17-21), а также подписаны технические условия для присоединения к электрическим сетям (24-25).

Пунктом 5 договора установлено, что срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, согласно п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения.

Оплата произведена истцом 16.06.2025 (л.д. 27-34).

09.09.2025 ответчик исполнил договор, о чем составлен акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электрической энергии абонента Д.Ю.. (л.д. 62-63), уведомлением от 10.09.2025 истец был извещен о возможности технологического присоединения (л.д. 64-69).

Истец просит признать 5 договора об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок технологического присоединения составляет 6 месяцев со дня заключения данного договора, ссылаясь на то, что пункт 5 договора противоречит пп. б п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, которым предусмотрен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 30 рабочих дней.

Пунктом 10.2.1. технических условий предусмотрены следующие мероприятия, связанные с технологическим присоединением: выполнить проверку существующей ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1929, Л-1 по пропускной способности, при необходимости выполнить замену существующего провода на СИП-2 расчётного сечения; выполнить проверку коммутационных аппаратов на отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ ТП-1929 в соответствии с дополнительно присоединяемой нагрузкой, при необходимости выполнить замену.

Указанные мероприятия являются мероприятиями по реконструкции объектов электросетевого хозяйства и не относятся к работам по строительству или обеспечению коммерческого учета электрической энергии.

Учитывая, что в данном случае от сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, оснований для признания недействительный п. 5 договора не имеется.

Учитывая, что условия договора по присоединению договор исполнен в установленный договором срок 09.09.2025, оснований для удовлетворения требований обязать ответчика исполнить договор в срок 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения.

Истец со ссылкой на Закон РФ «О защите прав потребителей» просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В ходе рассмотрения дела не нашел подтверждение факт нарушения ответчиком прав истца, в связи с чем оснований для удовлетворения требований о компенсации морального вреда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 67, 98, 167, 193-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении требований Д.Ю. к ПАО «Россети Ленэнерго» о признании условий договора недействительными, обязании произвести определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение изготовлено 09.02.2026.