№ 2-197/2020

УИД 75RS0017-01-2020-000346-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 сентября 2020 года с. Нижний Цасучей

Ононский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Булгакова А.В., при секретаре Середкиной Е.С., с участием помощника прокурора Ононского района Жамбаловой М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ононского района в интересах неопределенного круга лиц, муниципального района «Ононский район» к ООО «Стройгарант» об обязании устранить недостатки, выявленные при приемке работ по муниципальному контракту, 

установил:

Прокурор Ононского района обратился в суд с названным иском в порядке ст. 45 ГПК РФ, указывая в обоснование, что 08.07.2019 между муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный межпоселенческий социально- культурный центр» (далее МБУК РМСКЦ) и ООО «Стройгарант» по итогам электронного аукциона, проведенного в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ), заключен муниципальный контракт № 1, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК РМСКЦ. Цена контракта составила 11782559,85 руб. Срок выполнения работ - 10.10.2019 (п. 1.3 контракта). Дополнительным соглашением № 1 от 09.08.2019 цена контракта увеличена на 10% на основании пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ и составила 12960816 руб. Дополнительным соглашением № 1 от 11.11.2019 изменен срок выполнения работ до 10.12.2019 на основании п. 9 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ. 25.12.2019 распоряжением Администрации муниципального района «Ононский район» назначена комиссия по приемке работ по муниципальному контракту. Согласно акту приемки выполненных работ от 25.12.2019 работы приняты на сумму муниципального контракта с недоделками (замечаниями): входные наружные двери 4 шт. обмерзают, заменить двери или устранить обмерзание; заменить треснувшие оконные стеклопакеты 4 шт.; заменить треснувший дверной стеклопакет в фойе; установить плинтус в фойе и коридоре 1 этажа (по керамической плитке); окрасить сцену в зрительном зале и фойе морилкой; установить перегородку в туалете на 1 этаже из ПВХ; установить дверные наличники в подвале; установить деревянную дверь в зрительном зале 700*2100 мм; заменить пожарные ящики на соответствующие ГОСТу; устранить течь в радиаторе на 1 этаже; произвести облицовку оконных и дверных наружных откосов; установить водоотливы оконных блоков; произвести ревизию неработающих секций радиаторов 3 шт. (холодные); устранить неисправность двери в подвале (не закрывается); устранить неисправность замка в железной фасадной двери (не работает снаружи); устранить неровности пола в кабинетах №№ 41, 42; установить на выгребной яме горловину с закрывающейся крышкой; произвести планировку территории в месте расположения выгребной ямы; убрать и вывезти строительный мусор; устранить мигание ламп накаливания в зрительном зале. Оплата по контракту произведена ответчику в полном объеме. В течение декабря 2019 года - февраля 2020 года в адрес ответчика направлялись соответствующие требования об устранении недоделок. Гарантийным письмом от 29.05.2020 ответчик обязался устранить все выявленные замечания. Несмотря на это, на сегодняшний день остаются не устраненными следующие недостатки: не заменены треснувшие оконный стеклопакет 1 шт. и дверной стеклопакет 1 шт.; не установлен плинтус в коридоре 1 этажа (по керамической плитке); не произведены ремонт оконных и дверных откосов, облицовка оконных и дверных наружных откосов; не установлены водоотливы оконных блоков; не произведен ремонт неработающих секций радиаторов; не произведена планировка территории в месте расположения выгребной ямы; не произведено обследование и ремонт пожарной сигнализации филиалов МБУК РМСКЦ; не вывезен строительный мусор. Просит обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в целях устранения недостатков, выявленных при приемке работ по муниципальному контракту № 1 от 08.07.2019, выполнить следующие работы: заменить треснувшие оконный стеклопакет 1 шт. и дверной стеклопакет 1 шт.; установить плинтус в коридоре 1 этажа (по керамической плитке); произвести ремонт оконных и дверных откосов, облицовку оконных и дверных наружных откосов; установить водоотливы оконных блоков; произвести ремонт неработающих секций радиаторов и системы отопления; произвести планировку территории в месте расположения выгребной ямы; произвести обследование и ремонт пожарной сигнализации филиалов МБУК РМСКЦ; вывезти строительный мусор; решение суда обратить к немедленному исполнению.

В судебном заседании процессуальный истец помощник прокурора Ононского района Жамбалова М.Б., представитель материального истца директор МБУК РМСКЦ ФИО1 от части требований отказались. Пояснив, что требования: установить плинтус в коридоре 1 этажа (по керамической плитке); установить водоотливы оконных блоков; произвести планировку территории в месте расположения выгребной ямы; вывезти строительный мусор исполнены ответчиком добровольно, до рассмотрения дела в суде. От требования произвести обследование и ремонт пожарной сигнализации филиалов МБУК РМСКЦ также отказались, пояснив, что это не предусмотрено контрактом. В остальной части просили иск удовлетворить, решение суда обратить к немедленному исполнению в связи с наступлением холодов и отопительного сезона.

Представитель ответчика ООО «Стройгарант» в судебное заседание не явился, исковые требования не признал по доводам, изложенным в возражении на исковое заявление. 

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из материалов дела, 08 июля 2019 года между МБУК РМСКЦ (заказчик) и ООО «Стройгарант» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 1, предметом которого являлся капитальный ремонт здания МБУК РМСКЦ, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к контракту), спецификацией материалов и оборудования, используемых при выполнении работ (приложение № 2) и условиями договора. Срок выполнения работ со дня подписания до 10 октября 2019 года. 

Согласно разделу 7 указанного контракта, продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации – 36 месяцев на весь объем выполненных подрядчиком работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. 

Дополнительным соглашением от 11 ноября 2019 года к муниципальному контракту № 1 срок исполнения контракта изменен – до 10.12.2019. 

Согласно акту приемки выполненных работ после капитального ремонта, 25 декабря 2019 года рабочей комиссией, назначенной распоряжением главы администрации муниципального района «Ононский район», приняты в эксплуатацию работы по капитальному ремонту МБУК РМСКЦ с недоделками, согласно приложению № 1 от 25.12.2019. При обследовании выявлены следующие замечания и недоделки: входные наружные двери 4 шт. обмерзают, заменить двери или устранить обмерзание; заменить треснувшие оконные стеклопакеты 4 шт.; заменить треснувший дверной стеклопакет в фойе; установить плинтус в фойе и коридоре 1 этажа (по керамической плитке); окрасить сцену в зрительном зале и фойе морилкой; установить перегородку в туалете на 1 этаже из ПВХ; установить дверные наличники в подвале; установить деревянную дверь в зрительном зале 700*2100 мм; заменить пожарные ящики на соответствующие ГОСТу; устранить течь в радиаторе на 1 этаже; произвести облицовку оконных и дверных наружных откосов; установить водоотливы оконных блоков; произвести ревизию неработающих секций радиаторов 3 шт. (холодные); устранить неисправность двери в подвале (не закрывается); устранить неисправность замка в железной фасадной двери (не работает снаружи); устранить неровности пола в кабинетах №№ 41, 42; установить на выгребной яме горловину с закрывающейся крышкой; произвести планировку территории в месте расположения выгребной ямы; убрать и вывезти строительный мусор; устранить мигание ламп накаливания в зрительном зале.

30 и 31 января 2020 года составлены акты проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту здания МБУК РМСЦ, выявлены замечания и недоделки. 

04 февраля 2020 года направлена и 14 февраля 2020 года вручена подрядчику претензия с требованием устранить выявленные замечания до 15 мая 2020 года. 

В ответ на претензию подрядчик ООО «Стройгарант» 17 февраля 2020 года обязался устранить дефекты до 31 мая 2020 года. 

Затем в мае 2020 года подрядчик направил заказчику гарантийное письмо, в котором обязался устранить все замечания по контракту в срок до 15 июня 2020 года. 

Вместе с тем, как следует из акта выявленных замечаний и недоделок по обследованию приемки выполненных работ после капительного ремонта МБУК РМСКЦ от 03 августа 2020 года, рабочая комиссия, назначенная распоряжением главы администрации муниципального района «Ононский район» выявила следующие замечания и недоделки: заменить два стеклопакета, установить облицовку оконных и дверных наружных откосов, установить водоотливы оконных блоков, произвести ремонт оконных и дверных откосов, окрасить водоэмульсионной краской загрязненные стены, установить входную металлическую дверь с западной стороны здания, произвести планировку территории возле выгребной ямы, вывезти мусор с территории, произвести обследование и ремонт пожарной сигнализации, произвести ремонт секций радиаторов и системы отопления, установить плинтуса в коридоре первого этажа по керамической плитке. 

На момент рассмотрения дела в суде остались неисполненными следующие работы: заменить треснувшие оконный стеклопакет 1 шт. и дверной стеклопакет 1 шт.; 

- произвести ремонт оконных и дверных откосов, облицовку оконных и дверных наружных откосов; 

- произвести ремонт неработающих секций радиаторов и системы отопления. 

Таким образом, установлено, что в гарантийный срок до 15 июня 2020 года подрядчик дефекты, выявленные в ходе приемки выполненных работ после капитального ремонта, не устранил.

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено. 

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными и достаточными для рассмотрения дела по существу.

С учетом изложенного исковые требования суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В связи с наступлением отопительного сезона, поскольку заявлены требования по ремонту неработающих секций радиаторов и системы отопления, решение подлежит немедленному исполнению. 

Согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ, п. 8 ст. 333.20 НК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Учитывая требования п. 3 ст. 333.19 НК РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 рублей. 

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ононского района в интересах неопределенного круга лиц, муниципального района «Ононский район» к ООО «Стройгарант» об обязании устранить недостатки, выявленные при приемке работ по муниципальному контракту удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в целях устранения недостатков, выявленных при приемке работ по муниципальному контракту № 1 от 08.07.2019 выполнить следующие работы: - заменить треснувшие оконный стеклопакет 1 шт. и дверной стеклопакет 1 шт.; 

- произвести ремонт оконных и дверных откосов, облицовку оконных и дверных наружных откосов; 

- произвести ремонт неработающих секций радиаторов и системы отопления; 

Обратить решение в этой части к немедленному исполнению. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройгарант» в бюджет муниципального района «Ононский район» государственную пошлину в сумме 3000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи жалобы через Ононский районный суд.

Судья А.В. Булгаков

В окончательной форме решение принято 25 сентября 2020 года