Дело № 12-68 /2019

Р Е Ш Е Н И Е

г. Киров 13 февраля 2019 года

Судья Октябрьского районного суда г. Кирова Минервина А.В. 

при секретаре судебного заседания Колесниковой Л.М. 

рассмотрев жалобу ФИО1 на постановление №19-03/2018-176 заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Кировской области от 20.12.2018 года, по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении директора Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» ФИО1, 

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Кировской области № 19-03/2018-176 от 20.12.2018 г. директор КОГКУ «Управление капитального строительства» ФИО1 признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. 

На данное постановление ФИО1 подана жалоба, в которой он просит вышеуказанное постановление отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава и события административного правонарушения. В обоснование указал, что по результатам плановой выездной проверки соблюдения условий предоставления и использования средств из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности субъектов РФ в рамках подпрограммы « Искусство», был составлен акт проверки, согласно которого комиссия пришла к выводу о расходовании денежных средств субсидии с нарушением условий ее предоставления и расходования. Вместе с тем, указанный акт не содержит вывода о нецелевом расходовании бюджетных средств. В рассматриваемом случае денежные средства в сумме 257491 руб.13 коп., потрачены на строительно-монтажные работы и оборудование на объекте «Детский космический центр», которые выполнены по согласованию с проектировщиком и оплачены за счет имеющегося в сводном сметном расчете, прошедшем проверку достоверности определения сметной стоимости, 2-х % резерва на непредвиденные работы на основании актов о приемке выполненных работ форма КС-2 от 12.10.2017 №44. Данные денежные средства оплачены в размерах не превышающих сметную стоимость строительства объекта, прошедшую проверку на достоверность в ФАУ «Главгосэкпертиза». При этом законодательством не предусмотрены обязательные требования к проведению дополнительной государственной экспертизы в отношении откорректированных работ, не влияющих на надежность и безопасность объекта капитального строительства.

КОГКУ «УКС» получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26.12.2017 и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта «Детский космический центр в ФИО2» от 26.12.2017 Казанским филиалом ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Работы по выполнению третьей шпатлевки стен и покрытия поверхностей грунтовкой глубокого проникновения выполнены в рамках госкотракта от 17.04.2017г., заключенного с ООО «Регионсантехмонтаж» согласно локальной смете № 8. КОГКУ «УКС» в 2017 году до начала выполнения дополнительных работ обращалось в организацию, проводившей экспертизу проектной документации объекта, с целью получения заключения о том, что работы по выполнению третьей шпатлевки и покрытия поверхностей грунтовкой глубокого проникновения не влияют на безопасность объекта строительства, но получило отказ в устной форме. Факт того, что выявленные нарушения не являются нецелевым расходованием выделенных на строительство и оборудование объекта бюджетных средств, подтвержден также постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 285.1 УК РФ. 

В судебном заседании ФИО1, представители ФИО1 по доверенности ФИО3,ФИО4 доводы жалобы поддержали в полном объеме.

Представители УФК по Кировской области ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, в судебном заседании пояснили, что оснований для отмены постановления не имеется, жалоба не содержит дополнительных доводов. Просит оставить постановление от 20.12.2018 года без изменения, жалобу без удовлетворения.

Исследовав материалы административного дела, заслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Статьей 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - установлен административный штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. 

В постановлении указано, что согласно распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 1783-р, из федерального бюджета бюджету Кировской области предоставлена субсидия на завершение строительства и оборудование Детского космического центра в г. ФИО2 (

<

...>) в размере 95 507,5 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 1783-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2013 № 1121 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов культуры и центров культурного развития государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов культуры и центров культурного развития муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, главным распорядителем в отношении которых является Министерство культуры Российской Федерации» (далее – Правила от 05.12.2013 № 1121) между Минкультуры России и Правительством Кировской области заключено соглашение от 08.11.2017 № 1809-01.1-41/10-17 о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности (муниципальной собственности) (далее – Соглашение от 08.11.2017).

Согласно пункту 1.1. Соглашения от 08.11.2017, а также приложениям №1 и № 2 к нему, субсидия предоставлена в целях софинансирования мероприятия: «завершение строительства и оборудование Детского космического центра в г. ФИО2 (

<

...>)». 

На разработанную в 2012 году проектную документацию на строительство объекта «Детский космический центр в г.ФИО2», на основании заявления КОГКУ «УКС» от 10.02.2012 № 6-252 Кировским областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы» (далее – КОГАУ «Управление государственной экспертизы») проведена государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий, по результатам которой выдано положительное заключение государственной экспертизы от 19.03.2012 № 43-1-5-0979-12 (далее положительное заключение от 19.03.2012 № 43-1-5-0979-12).

В связи с корректировкой сметной документации на строительство объекта «Детский космический центр в г.ФИО2», по заявлению КОГКУ «УКС» от 06.08.2014 № 1073-6 Казанским филиалом федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России») проведена государственная экспертиза откорректированной проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, по результатам которой выдано положительное заключение от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05 (далее - положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05).

В 2017 году КОГКУ «УКС» вновь осуществлена корректировка проектной документации по строительству и оборудованию Детского космического центра в городе ФИО2 в части внутренней отделки помещений №№ 103, 104, 201, 202, 205, 209 и 318 по разработанному дизайн-проекту, в связи с чем по заявлению КОГКУ «УКС» от 15.12.2017 ФАУ «Главгосэкспертиза России» проведена государственная экспертиза скорректированной проектной документации, по результатам которой выданы положительное заключение от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 на проектную документацию и положительное заключение от 26.12.2017 № 00-1-0567-17 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (далее положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и № 00-1-0567-17).

КОГКУ «УКС» и ООО «РегионСантехМонтаж» заключили государственный контракт от 17.04.2017 № 0340200003316004801-0077480-02 (далее ГК от 17.04.2017) на производство строительно-монтажных работ по дизайн-проекту шести помещений на объекте капитального строительства «Детский космический центр в г. ФИО2» в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием на общую сумму 17575703 рубля (с учетом дополнительного соглашения от 10.10.2017 №2).

На основании анализа перечня работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и от 26.12.2017 № 00-1-0567-17, и локальной сметой № 8 – приложение № 1 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 № 2 установлено, что в локальной смете № 8 указаны работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, и локальными сметами на строительно-монтажные работы по дизайн-проекту шести помещений на общую сумму 257491,13 руб., а именно:1) помещение 103 (вестибюль): третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под покраску; покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17; облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом; установка люка; люк; элемент на потолке «Звезды туманности, облака газа»;2) помещение 201 (экспозиционный зал), помещение 202 (конференц-зал), помещение 205 (фойе), помещение 209 (выставочный зал), помещение 318 «Экспозиционный зал»: третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под покраску; покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17.

Указанные выше работы по локальной смете № 8, не предусмотренные проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 №0565-17/КГЭ-1996/02 и № 00-1-0567-17, приняты КОГКУ «УКС» по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 27.10.2017 № 44 (далее Акт от 27.10.2017 №44) на общую сумму 575703 руб.

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 27.10.2017 №44, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма (КС-3) от 27.10.2017 № 8, платежному поручению от 26.12.2017 № 908, а также Справке по расчету стоимости дополнительных работ по объекту «Детский космический центр» в г. ФИО2 в части строительно-монтажных работ дизайн-проекту 6 (шести) помещений фактические расходы средств, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии из федерального бюджета, на оплату работ, не предусмотренных проектной документацией, имеющей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и № 00-1-0567-17, составили 257491,13 руб.

Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) определено, что принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

Пунктом 6 статьи 81 БК РФ установлено, что порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, предусмотренных в составе федерального бюджета, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункту «в» пункта 3 Правил от 05.12.2013 № 1121, одним из условий предоставления и расходования субсидий является наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, выданные федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы».

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 1783-р, пункту 1 Правил от 05.12.2013 № 1121, Соглашению от 08.11.2017 (пункт 1.1, приложения №№1,2) субсидия предоставлена в целях софинансирования мероприятия: «завершение строительства и оборудование Детского космического центра в г. ФИО2 (

<

...>)». 

Перечень работ по завершению строительства Детского космического центра в г. ФИО2, оплата которых возможна за счет средств субсидии, выделенной из федерального бюджета, определен проектно-сметной документацией, имеющей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Принимая во внимание, что условием предоставления и расходования субсидии является наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, выданные федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы», целью предоставления средств субсидии является оплата работ по завершению строительства и оборудованию Детского космического центра исключительно предусмотренных проектной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Кроме того, согласно приложению № 6 к Соглашению от 08.11.2017: «Графики исполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства», одним из планируемых мероприятий по завершению строительства и оборудованию Детского космического центра в г. ФИО2 (

<

...>) является получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В приложении № 6 к Соглашению от 08.11.2017 указаны реквизиты положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05. 

Расходование средств субсидии на оплату дополнительных работ по смете №8 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 №2, не предусмотренных утвержденной в установленном порядке проектной документацией (не предусмотренных проектной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и от 26.12.2017 № 00-1-0567-17), не соответствует целям предоставления субсидии, поскольку стоимость и законность указанных выше дополнительных работ не учтены в сметной стоимости, определенной в связи с заключением Соглашения от 08.11.2017 и не должны быть оплачены за счет средств субсидии по условиям её предоставления.

Любые действия, приводящие к направлению бюджетных средств на цели, не обозначенные при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, оплата работ, законность осуществления которых документально не подтверждена, не соответствует целям предоставления субсидии, определенным пунктом 1 Правил от 05.12.2013 № 1121, пунктом 1.1 Соглашения от 08.11.2017, приложениями №№1,2 к Соглашению от 08.11.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Платежное поручение от 26.12.2017 № 908, которым подтверждается факт оплаты работ, не предусмотренных проектной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и от 26.12.2017 № 00-1-0567-17, подписано директором КОГКУ «УКС» - ФИО1.

ФИО1 на основании трудового договора от 18.03.2014 № 1 является директором КОГКУ «УКС». 

Пунктом 3 раздела II должностной инструкции директора КОГКУ «УКС», утвержденной и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 03.10.2016 (далее – должностная инструкция), установлена обязанность директора КОГКУ «УКС» по обеспечению организации в том числе административно-хозяйственной и финансовой деятельности КОГКУ «УКС».

Согласно пунктам 7 и 13 раздела II должностной инструкции директор КОГКУ «УКС» обязан обеспечивать целевое и эффективное использование

Таким образом, в нарушение требований статьи 38, пункта 6 статьи 81 БК РФ, пункта 1, подпункта «в» пункта 3 Правил от 05.12.2013 № 1121, пункта 1.1 Соглашения от 08.11.2017, пункта 1 «Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» - приложения № 1 к Соглашению от 08.11.2017, пункта 8.3 государственного контракта от 17.04.2017 № 0340200003316004801-0077480-02, в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей директором КОГКУ «УКС» - ФИО1 за счет средств, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии из федерального бюджета, оплачены работы, не предусмотренные проектной документацией, имеющей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и от 26.12.2017 № 00-1-0567-17, в сумме 257491,13 руб., что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ является нецелевым использованием средств федерального бюджета и образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.

Административный орган сделал правомерный вывод о том, что расходование денежных средств на оплату дополнительных работ по смете №8 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 №2, не предусмотренных утвержденной в установленном порядке проектной документацией, не соответствует целям предоставления субсидии и является нецелевым использованием средств, образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В данном случае ФИО1 не обеспечено соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Вина ФИО1 подтверждена материалами дела. 

Дополнительные работы на сумму 257 491,13 руб. предусмотрены по локальной смете № 8 - приложение № 1 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 № 2, не были согласованы актами как непредвиденные работы, приняты по Акту от 27.10.2017 №44 как основные работы в рамках дополнительного соглашения от 10.10.2017 №2, не могли были быть оплачены за счет неиспользованного остатка сметной стоимости, предусмотренной сводным сметным расчетом на непредвиденные работы.

Документов, подтверждающих, что работы, предусмотренные по локальной смете № 8 - приложение № 1 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 № 2, относятся к работам, потребность в которых возникла в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства, что относило бы их к непредвиденным работам по смыслу пункта 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, в материалы дела не представлено.

Дополнительные работы по локальной смете № 8 – приложение №1 к дополнительному соглашению от 10.10.2017 № 2 – в сумме 257491,13 руб. не были предусмотрены проектной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также проектно-сметной документацией и техническим заданием к ГК от 17.04.2017.

Оплата дополнительных работ, которые не были предусмотрены проектной документацией, получившей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24.09.2014 № 0599-14/КГЭ-1996/05, от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 и от 26.12.2017 № 00-1-0567-17, на сумму 257491,13 руб. осуществлена за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации), что подтверждается платежным поручением от 26.12.2017 № 908, согласно данным графы «назначение платежа» которого, средства перечислялись по целевой статье 04000R111F.

Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2017 год – приложение № 11 к Закону Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», по целевой статье 04000R111F запланированы расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Детский космический центр в г. ФИО2).

Согласно пункту 2 статьи 79.1 БК РФ субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

Пунктом 6 статьи 81 БК РФ установлено, что порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, предусмотренного в составе федерального бюджета, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 1783-р, положения пункта 1, подпункта «в» пункта 3 Правил от 05.12.2013 № 1121, Соглашения от 08.11.2017 (пункт 1.1, приложения №№1,2) субсидия предоставлена на софинансирования завершения строительства и оборудование конкретного объекта - Детского космического центра в г. ФИО2 (

<

...>). Перечень мероприятий и работ по завершению строительства Детского космического центра в г. ФИО2, оплата которых возможна за счет средств субсидии, выделенной из федерального бюджета, определен проектно-сметной документацией, имеющей положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Оплата за счет средств субсидии иных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», не соответствует условиям и цели предоставления средств из федерального бюджета.

Действующее законодательство предусматривает возможность направления проектно документации на повторную государственную экспертизу по инициативе застройщика или технического заказчика. ( пункт 44 Положения №145 от 05.03.2007г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий")

Согласно материалам административного дела в связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство объекта «Детский космический центр в г.ФИО2» в части внутренней отделки помещений №№ 103, 104, 201, 202, 205, 209 и 318 по разработанному дизайн-проекту, по заявлению КОГКУ «УКС» в 2017 году ФАУ «Главгосэкспертиза России» проведена государственная экспертиза скорректированной проектной документации, по результатам которой выданы положительное заключение от 26.12.2017 № 0565-17/КГЭ-1996/02 на проектную документацию и положительное заключение от 26.12.2017 № 00-1-0567-17 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, что противоречит доводам ФИО1 о невозможности прохождения повторной государственной экспертизы.

В силу положений действующего законодательства ФИО1 является должностным лицом, ответственным за нарушение, предусмотренное ст. 15.14 КоАП РФ. 

Таким образом, по мнению суда вина ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ подтверждается материалами административного дела.

Административное наказание назначено в пределах санкции ст. 15.14 КоАП РФ. 

Каких-либо нарушений КоАП РФ, при производстве по делу об административном правонарушении в отношении ФИО1 влекущих отмену или изменение постановления от 20.12.2018г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении директора Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» ФИО1, не установлено.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

Р Е Ш И Л :

Постановление №19-03/2018-176 заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Кировской области от 20.12.2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора КОГКУ «УКС» ФИО1 оставить без изменения, а жалобу ФИО1 без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья А.В. Минервина