Дело № 2-3716/2025 

74 RS0002-01-2025-003702-82

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Челябинск 06 октября 2025 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: 

председательствующего М.Н. Величко, 

при секретаре Н.В. Оразовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Филиалу ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» о взыскании неустойки и компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к филиалу публичному акционерному обществу «Россети Урал» - «Челябэнерго» (далее по тексту – филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»), в котором просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный между Филиалом ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» и ФИО1 , в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по указанному договору за период с 14.08.2024 по 09.04.2025 в размере 41352 рубля 50 копеек, а также за период с 10 апреля 2025 года по день фактического исполнения обязательств из расчета 173 рубля 75 копеек за каждый день просрочки. 

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика по истечении десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению, компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, а также штраф в размере 50% от присужденных в пользу потребителя денежных средств. 

В обоснование иска указал, что является собственником земельного участка, расположенного 

<

адрес> Осиновка, по гп ЗАО СПФ СИЖ, кадастровый №. 13 февраля 2024 года истцом был заключен договор с филиалом ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6100100162, по которому сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Однако филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» в предусмотренный договором срок не осуществило присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца. 

Истец в судебное заседание не явился, извещен, о причинах неявки суд не уведомил.

Представитель ответчика филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признала, представила возражения на исковое заявление, заявила о применении положений ст. 333 ГК РФ к неустойке, сослалась на то, что взыскание судебной неустойки в данном случае недопустимо, поскольку ведет к двойной мере ответственности для исполнителя услуг. Представитель ответчика пояснила, что планируемая дата подключения объекта истца к электрической сети 16 ноября 2025 года. 

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № (далее – Правила), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно подп. «в» пункта 16 Правил к существенным условиям договора технологического присоединения относится право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре. При этом, аналогичное право сетевой организации законом не предоставлено, единственное специальное основание для одностороннего расторжения договора технологического присоединения – нарушение сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Таким образом, применительно к положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», договор об осуществлении технологического присоединения является публичным, что означает невозможность отказа от его заключения в силу ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 416 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Исходя из изложенного, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед потребителем услуги, а также наличие обстоятельств, безусловно свидетельствующих о невозможности исполнения договора, отсутствия технической возможности для этого лежит на нем самом.

Судом установлено, что по заявке на технологическое присоединение № от 22.01.2024 года между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 13.02.2024 года. Объект присоединения расположен 

<

адрес> по гп ЗАО СПФ СИЖ, кадастровый №.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 69500 рублей. Указанная сумма уплачивается в соответствии с графиком: 15% - 10425 рублей в течение 5 дней со дня выставления сетевой организации счет, 30% - 20850 рублей в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета, 20% - 13900 рублей в течение 10 дней со дня размещения акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в Личном кабинете. 

Согласно п.1.3 счета на оплату ТП № от 13.02.2024 с даты оплаты настоящего счета договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным. 

В соответствии с 1.4. того же счета с даты оплаты настоящего счета стороны осуществляют мероприятия, указанные в ТУ №. Срок выполнения мероприятий 6 месяцев с даты оплаты настоящего счета. 

Судом установлено, что на счет ответчика денежные средства, оплаченные истцом ДД.ММ.ГГГГ, поступили ДД.ММ.ГГГГ. Следовательно, ответчик обязан был выполнить мероприятия по технологическому присоединению в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако, ответчиком в установленный срок работы по техническому присоединяю к сетям не выполнено. 

В соответствии с п. 30 Правил № 861, в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

Согласно абзацу 15 ст. 26 Федерального закона РФ «Об электроэнергетике», по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе, мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Разрешая требования о компенсации морального вреда, суд принимает во внимание положения ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», ст. 151 Гражданского кодекса РФ, разъяснений, изложенных в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с учетом разумности и справедливости, а также конкретных обстоятельств дела, считает возможным взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 2 000 рублей.

Пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с подп. «в» пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, установлено, что одним из существенных условий договора является положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором. 

Сторона пункта 16 Правил, пункта 4.2 договора технического присоединения, сторона договора нарушившая сроки исполнения обязательства ( мероприятия, обязательств по внесению платы ( в том числе авансовых платеже предусмотренных пунктом 3.1.1 Договора ( при их наличии), установленных настоящим Договором, обязана уплатить другой Стороне в течение 10 ( десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойки, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению –не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Поскольку исполнитель допустил просрочку выполнения обязательств по технологическому присоединению, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с 16 августа 2024 года по 06 октября 2025 года (417 дней), размер которой составит 72453,75 рублей (из расчета: 69500 х 0,25% х 417дня).

Ответчиком заявлено о применении к требованиям истца в части взыскания неустойки положений ст. 333 ГК РФ. 

Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и определения неустойки на основе федеральных законов, поскольку размеры неустойки должны быть соразмерны указанным в этой конституционной норме целям. 

Статьей 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК Российской Федерации речь идет не только о праве суда, но и, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. 

Однако доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, которые бы позволили суду снизить размер неустойки, ответчиком суду не представлено. До настоящего времени ответчик своих обязательств перед истцом не исполнил. 

Так, разъясняя применение положений ст. 333 ГК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указал, что применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым (пункт 34).

В пунктах 73 и 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (пункт 73).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункт 75).

Вопреки доводам представителя ответчика оснований для снижения размера неустойки по ст. 333 ГК РФ у суда не имеется ввиду отсутствия доказательств ее явной несоразмерности последствиям неисполнения обязательства.

Кроме того, с ответчика в пользу истца следует взыскать неустойку в размере 173 рубля 35 копеек, начиная с 07.10.2025 до дня осуществления технологического присоединения к электрическим сетям о договору №, заключенному между Филиалом ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» и ФИО3 . 

При этом суд считает возможным, возложить на Филиал ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» (ИНН №) обязанность в срок до 16 ноября 2025 года исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный между Филиалом ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» и ФИО3 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» подлежит взысканию штраф в размере 37226,88 рублей, из расчета: (72453,75+2000) рублей x 50%.

Однако при определении соразмерности штрафа, суд учитывает возражения ответчика о несоразмерности штрафа, принимает во внимание, что штраф, прдеусмотренный положениями ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», наряду с неустойкой, является мерой ответственности за нарушение обязательства контрагента, а потому может быть снижен на основании ст. 333 ГК РФ. 

Не допуская неосновательного обогащения истца, определяя баланс между интересами истца и ответчика, учитывая, то с ответчика в пользу истца взыскана неустойка без применения положений ст. 333 ГК РФ, суд считает возможным снизить размер штрафа до 15000 рублей. 

Оснований для взыскания с ответчика в пользу истца судебной неустойки, предусмотренной ст. 308.3 ГК РФ, не имеется, поскольку судом уже взыскана с ответчика неустойка за нарушение срока исполнения обязательств по день фактического исполнения ответчиком обязательств по вышеуказанному договору. Применение двойном меры ответственности за одно и то же нарушение недопустимо. 

Согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В связи с удовлетворением иска, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к Филиалу ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» о взыскании неустойки и компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Возложить на Филиал ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» (ИНН №) обязанность в срок до 16 ноября 2025 года исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный между Филиалом ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» и ФИО1 . 

Взыскать с Филиала ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» (ИНН №) в пользу ФИО1 (паспорт сери 7510 №) компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, неустойку за нарушение срока технологического присоединения в размере 72453 рубля 75 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, штраф в размере 15000 рублей, а также неустойку в размере 173 рубля 35 копеек, начиная с 07.10.2025 до дня осуществления технологического присоединения к электрическим сетям о договору №, заключенному между Филиалом ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» и ФИО1 

Взыскать с Филиала ПАО «Россети-Урал» - «Челябэнерго» (ИНН №) в доход местного бюджета госпошлину в размере 7000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Центральный районный суд г. Челябинска.

Председательствующий М.Н. Величко

<

данные изъяты>