Дело №а-2813/18 Великий Новгород Великий Новгород

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 мая 2018 года Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи Галкиной Н.А.,

при секретаре Шмандиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску ГОКУ «Новгородавтодор» к судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области ФИО1, УФССП России по Новгородской области о признании незаконным постановления о взыскании исполнительского сбора, уменьшении исполнительского сбора,

у с т а н о в и л:

ГОКУ «Новгородавтодор» (далее – Учреждение) обратилось в суд с административным иском о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области ФИО1 от 03.05.2018 года о взыскании исполнительского сбора, уменьшении исполнительского сбора.

В обоснование указано, что решением Новгородского районного суда от 15.11.2017 года по делу № 2-5331/17 на Учреждение возложена обязанность по устранению дефектов дорожного покрытия автомобильной дороги «Уторгош-Передольская» на территории Шимского района Новгородской области. 05.03.2018 года на основании исполнительного листа № 2-5331/17 судебным приставом-исполнителем в отношении Учреждения возбуждено исполнительное производство № а постановлением от 03.05.2018 года за неисполнение судебного решения взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб. Учреждение полагает, что данное постановление является незаконным, поскольку судебный акт не исполнен в связи с отсутствием финансирования Учреждения в необходимом объеме. Кроме того, для исполнения требований исполнительных документов необходимо инициировать процедуру заключения государственного контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования, проведение которой занимает длительное время. Таким образом, неисполнение решения суда связано с наличием объективных, уважительных обстоятельств, независящих от воли Учреждения, в связи с чем, оспариваемое постановление следует признать незаконным, либо уменьшить взысканный исполнительский сбор. 

Определением суда к участию в деле в качестве административного ответчика привлечено УФССП России по Новгородской области.

Представители административного истца Учреждения, административного ответчика УФССП России по Новгородской области, административный ответчик судебный пристав-исполнитель МОСП по ИОИП ФИО1, представители заинтересованных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, прокуратуры Шимского района в суд не явились, о дате и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

На основании ч. 6 ст. 226 КАС РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 8 ст. 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление.

В соответствии с положениями статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон) исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа (часть 1 статьи 112 Федерального закона).

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (часть 2 статьи 112 Федерального закона).

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей (часть 3 статьи 112 Федерального закона).

Таким образом, исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.

Из материалов дела следует, что решением Новгородского районного суда Новгородской области от 15.11.2017 года по делу № 2-5331/17 удовлетворен иск прокурора Шимского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц. На ГОКУ «Новгородавтодор» возложена обязанность в срок до 12.01.2018 года выполнить работы по устранению дефектов дорожного покрытия утем асфальтирования дорожного полотна на автомобильной дороге межмуниципального значения «Уторгош - Передольская», на участках проезжей части: 04-850 км. выбоины глубиной 10 см и площадью 1,69 м2, 08+800 км. выбоины глубиной 9 см и площадью 1,8 м., 08+250 км. выбоины глубиной7 см. и площадью 0,9 м, 09+300 км. выбоины глубиной 6 см. и площадью 1,69 м, 09+550 км. выбоины глубиной 9 см. и площадью 4,4 м2., 11+500 км. выбоины глубиной 8 см. и площадью 0,86 м. 12+020км. выбоины глубиной 8 см и площадью 0,99 м2. 

26.12.2017 решение вступило в законную силу, 06.02.2018 Новгородским районным судом выдан исполнительный лист.

05.03.2018 года судебным приставом-исполнителем ОСП Солецкого, Волотовского и Шимского районов УФССП России по Новгородской области на основании исполнительного листа № 2-5331/17 возбуждено исполнительное производство №5840/18/53015-ИП, Учреждению установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 

21.03.2018 Учреждение (письмом №1163/10) обратилось в ОСП Солецкого, Волотовского и Шимского районов с просьбой о продлении срока, установленного для исполнения требований исполнительного документа. В обоснование Учреждение указало, что в соответствии с п. 12.3.1 СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Акуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5оС, осенью – не ниже 10оС. В силу сложившихся климатических условий исполнение требований, содержащихся в постановлении от 05.03.2018 о возбуждении исполнительного производства № невозможно.

18.04.2018 исполнительное производство № поступило на исполнение в МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области и принято последним на исполнение, исполнительному производству присвоен №.

03.05.2018 судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области ФИО1 вынесено постановление о взыскании с должника ГОКУ «Новгородавтодор» исполнительского сбора в размере 50 000 рублей в связи с неисполнением требований исполнительного документа в срок, установленный для его добровольного исполнения.

Данное постановление получено ГОКУ «Новгородавтодор» 08.05.2018 года.

Разрешая требование административного истца о признании незаконным постановления о взыскании исполнительского сбора, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов исполнительного производства, каких-либо сведений о принятых ГОКУ «Новгородавтодор» мерах по исполнению судебного решения до вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора Учреждением в адрес судебного пристава-исполнителя представлено не было.

Оспариваемое Учреждением постановление вынесено и утверждено в рамках возбужденного исполнительного производства уполномоченными на то должностными лицами, срок и порядок принятия оспариваемого постановления соблюдены, содержание постановления соответствует требованиям закона и материалам исполнительного производства.

Таким образом, поскольку в срок, установленный для добровольного исполнения требования исполнительного документа, должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, судебный пристав-исполнитель обоснованно наложил на должника денежное взыскание (исполнительский сбор).

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования Учреждения о признании незаконным постановления о взыскании исполнительского сбора не основаны на законе, соответственно в удовлетворении данного требования следует отказать.

Как разъяснено в п.74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 года №50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных существенных обстоятельств уменьшить размер исполнительского сбора не более чем на одну четверть от размера, установленного частью 3 статьи 112 Закона об исполнительном производстве, либо освободить должника от его взыскания не только при разрешении требований об уменьшении размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания, но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора.

В соответствии с п. 75 Постановления Пленума Верховного суда РФ №50, основанием освобождения субъекта предпринимательской деятельности от взыскания могут являться только обстоятельства непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Иные лица могут быть освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 статьи 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения содержащегося в исполнительном документе требования. Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного (муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения требований исполнительного документа само по себе не является основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенное в постановлении от 30.07.2001 №13-П, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также положений ч.ч. 2, 7 ст. 112 Закона об исполнительном производстве и ст. 401 ГК РФ, основанием для уменьшения размера исполнительского сбора следует считать нарушение должником установленного срока исполнения требований исполнительного документа вследствие обстоятельств, полностью либо в значительной степени находящихся вне его контроля, при соблюдении должником той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего (своевременного) исполнения. 

В силу п.1.15, 1.16 Устава ГОКУ «Новгородавтодор», Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области.

Как видно из материалов дела, Учреждение направляло в Министерства (ранее – Департамент) транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области расчеты финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Новгородской области на 2017 год и на 2018 год, согласно которым нормативная потребность в финансовых затратах на 2017 год составляла: на содержание автомобильных дорог – 9 479 732 руб. 40 коп., на ремонт автомобильных дорог – 4 257 825 руб. 80 коп., на капитальный ремонт автомобильных дорог – 17 444 422 руб. 60 коп.; на 2018 год: на содержание автомобильных дорог – 9 819 666 руб. 20 коп., на ремонт автомобильных дорог – 4 201 597 руб. 70 коп., на капитальный ремонт автомобильных дорог – 18 243 693 руб. 60 коп.,

При этом Учреждению в 2017 году на содержание автомобильных дорог было выделено 986 933 руб. 30 коп. (10,4% от норматива); на ремонт – 187 365 руб. 90 коп. (4,4% от норматива); на капитальный ремонт – 159 393 руб. 70 коп. (0,9% от норматива). В 2018 году на содержание автомобильных дорог Учреждению выделено 1 049 442 руб. 20 коп. (10,7% от норматива); на ремонт – 700 230 руб. 60 коп. (16,7% от норматива); на капитальный ремонт – 50 291 руб. 90 коп. (0,3% от норматива).

Учреждением, кроме того, представлены письменные обращения в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области (от 15.02.2017 г. №АКС-267-И, от 11.07.2017 г. №АКС-1663-Н, от 20.02.2018 г.) о выделении дополнительного финансирования на цели ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новгородской области, а также своевременного исполнения судебных актов, которыми на Учреждение возложена обязанность обеспечить содержание данных автомобильных дорог в соответствии с установленными требованиями. 

Таким образом, административным истцом предпринимались меры, направленные на своевременное исполнение решения суда, чему, однако, препятствовало отсутствие необходимого бюджетного финансирования. Данное обстоятельство хотя и не относится к непредвиденным и непредотвратимым, но, вместе с тем, существенно снижает степень вины ГОКУ «Новгородавтодор» в несвоевременном исполнении судебного постановления. 

На дату рассмотрения дела требования исполнительного документа Учреждением не исполнены. 

С учетом обстоятельств дела, оснований для освобождения Учреждения от взыскания исполнительского сбора отсутствуют.

Вместе с тем, по информации, представленной Учреждением (письмо от 24.05.2018 №2219/10) в целях исполнения требований исполнительного документа по исполнительному производству № заключен государственный контракт № от 25.12.2017 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Солецком и Шимском муниципальных районах Новгородской области протяженностью 549,137 км. на 1 полугодие 2018 года. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а равно учитывая, что на день вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании с Учреждения исполнительского сбора со дня возбуждения исполнительного производства прошел незначительный период времени, в течение которого исполнение должником требований исполнительного документа в полном объеме являлось объективно затруднительным, суд приходит к выводу о наличии оснований для уменьшения размера исполнительского сбора, взысканного с ГОКУ «Новгородавтодор» по исполнительному производству №, на 1/4 часть, то есть до 37 500 рублей.

Руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

решил:

Административный иск ГОКУ «Новгородавтодор» удовлетворить частично.

Уменьшить размер исполнительского сбора, взысканного постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Новгородской области ФИО1 от 03 мая 2018 года с должника ГОКУ «Новгородавтодор» в рамках исполнительного производства № на 1/4 часть, то есть до 37 500 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий Н.А. Галкина

Мотивированное решение составлено: 28 мая 2018 года.