Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2017 года г. Минусинск

Минусинский городской суд в составе: 

председательствующего Дудусова Д.А., 

при секретаре Коротковой В.В., 

с участием представителя истца ФИО1 (доверенность от 12.04.17г.),

рассмотрев в открытом заседании гражданское дело по иску Былина ВС к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки и денежной компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Минусинский городской суд с требованиями к ПАО «МРСК Сибири» об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки и денежной компенсации морального вреда. 

Свои требования в исковом заявлении и в судебном заседании через своего представителя по доверенности ФИО1 истец мотивировал следующим. 

ФИО2 является собственником земельного участка по адресу 

<

адрес> общей площадью 1 420 кв.м., кадастровый номер № На земельном участке возведен жилой дом, в который можно будет вселиться семье ФИО2 после технологического присоединения к электрическим сетям.

18.02.16г. между ПАО «МРСК Сибири»- сетевая организация и ФИО2 был заключен договор № 20.2400.269.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям». Согласно п. 1 договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя- жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых устройств 15 Квт, категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,40 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

В соответствии с п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора. В соответствии с разделом III договора ФИО2 внес плату за технологическое присоединение в размере 550 рублей на основании квитанции от 18.02.2016г.. Срок исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истек 18.08.2016г.. До настоящего времени сетевой организацией ПАО «МРСК Сибири» никаких мероприятий по исполнению договора не произведено. ФИО2 неоднократно обращался в сетевую организацию с претензиями об исполнении обязательств по договору.

В силу п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Правила № 861 определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг; общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемым системным оператором и другими субъектами оперативно-диспетчерского управления, а также порядок оказания этих услуг, а также порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Согласно Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии. Договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации. В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их. Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового договора, (пп. 4, 9, 12, 32).

В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. (пп.3, 6). Этими же Правилами установлена и процедура технологического присоединения, которая заключается в подаче заявки, в т.ч. физическим лицом (заявителем), намеренным осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, заключении договора, выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором, получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата, составление акта о технологическом присоединении (п.7).

В пункте 18 Правил отражены мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа исполнительной власти по техническому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, (п.16.3 указанных Правил).

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса РФ определено, что, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 314 Гражданского кодекса РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Из положений ст. 12 Гражданского кодекса РФ следует, что к числу способов защиты гражданских прав относятся: присуждение к исполнению обязанности в натуре, выплаты неустойки и компенсации морального вреда.

В силу ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Срок исполнения обязательств по договору истек 18 августа 2016 года. Просрочка исполнения обязательства за период с 19.08.2016 по 30.04.2017г. составляет 131 день. Указанием Банка России от 11.12.2015г. № 3894-У установлена ставка рефинансирования Центробанка с 01.01.2016г. в размере 11 % годовых. Размер неустойки по Договору составляет: 550 руб. х (0,014 х 11%) х 131 день = 110, 96 рублей.

Кроме того, статьей 332 ГК РФ (законная неустойка) предусмотрено, что кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей могут возникать из договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Договор ФИО2 заключен для личных нужд, поэтому на правоотношения распространяются положения Закона «О защите прав потребителей». В соответствии со ст. 13 Закона о Защите прав потребителей, за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Размер законной неустойки составляет: 550 руб. х 1 % х 131 день = 720, 50 рублей. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В случае своевременного исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, ФИО2 по состоянию на 01.04.2017г. уже имел бы возможность сдать построенный дом в эксплуатацию, и переселиться в него со своей семьей. Вместо этого, истец вынужден арендовать жилье, что увеличивает его ежемесячные расходы на содержание семьи. Дополнительные нравственные страдания были причинены ФИО2 не желанием предпринимать какие бы то ни было меры по исполнению Договора о технологическом присоединении, навязывании новых сроков исполнения обязательств по договору, не исполнении обязательств в сроки, указанные в ответах на претензии. Указанными действиями и бездействием ФИО2 был причинен моральный вред в размере 50 000 рублей.

Размер штрафа, предусмотренного ст. 13 Закона о защите прав потребителей, составляет: (110.96 руб + 720.50 руб + 50 000 руб.) / 50 % = 25 415, 73 рублей.

С учетом изложенного, просит обязать ПАО «МРСК Сибири» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора № 20.2400.269.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 18.02.2016г., заключенного с ФИО2; взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО2 договорную неустойку в размере 110 рублей 96 копеек, законную неустойку- 720 рублей 50 копеек, денежную компенсацию морального вреда 50 000 рублей и штраф- 25 415 рублей 73 копейки. 

Представитель ответчика- ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, ранее в предварительном судебном заседании, действуя через своего представителя по доверенности ФИО3 и в своем письменном отзыве ответчик исковые требования признал частично, свою позицию мотивировал следующим.

Исковые требования в части обязания осуществить технологическое присоединение ответчик признает, однако, просит установить срок осуществления присоединения- 4 месяца со дня вступления в законную силу решения суда, исходя из следующего.

Так, по условиям договора 20.2400.269.16 об осуществлении технологического присоединения жилого дома гр. ФИО2 для ПАО «МРСК Сибири» как сетевой организации предусмотрены, в том числе обязанности по строительству новых объектов электроэнергетики, а именно: от РУ-0,4 кВ ТГТ-10/0.4 кВ № 3-13-26 до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭГ1-0,4 кВ; определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 3-13-26 на номинальный ток согласно подключаемой нагрузке. При выполнении подобных мероприятий сетевой организации необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документы на строительство и реконструкцию, изыскать денежные средства, необходимые для строительства и другие.

Пункт 18 Правил устанавливает, что одними из мероприятий по технологическому присоединению являются (п.п. б, г): разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренными техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. Исходя из требований п. 18 Правил по указанным мероприятиям сетевая организация должна разработать проектную документацию и выполнить технические условия. Таким образом, п. 18 Правил в качестве первого мероприятия, которое выполняется для осуществления технологического присоединения (за исключением подготовки и выдачи технических условий) предусматривает разработку проектной документации.

С целью исполнения мероприятий в соответствии с договором ТП, управлением проектирования Филиала, разработана проектная документация шифр 495.2016, согласована со сторонними организациями и экспертной комиссией. Проектная документация утверждена приказом от 10.04.2017 № 283-пр. В настоящее время ведутся землеустроительные работы. Строительно- монтажные работы запланированы на июль 2017 года. В целях размещения указанных электросетевых объектов в соответствии с требованиями земельного законодательства необходимо оформить права на земельные участки, на которых данные объекты планируются к размещению. В отсутствие такого оформления, созданные сетевой организацией объекты будут являться самовольной постройкой и могут быть подвергнуты сносу на основании статьи 222 ГК РФ. 

Согласно п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ определены виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов. Постановлением Правительства Красноярского края от 03.12.2014 № 1300 утвержден перечень таких объектов. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ., а так же связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное включены в указанный Перечень. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливается нормативно правовым актом субъекта Российской Федерации.

Законом Красноярского края от 03.06.2015 № 8-3469, вступившим в силу 27.06.2015, в статью 3 закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» введен пункт 17, которым к компетенции Правительства края отнесено установление порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1300. Со стороны филиала, с 16.03.2015, неоднократно направлялись письменные обращения в адрес органов власти с целью внесения законодательной инициативы. Однако указанный порядок был принят лишь 15.12.2015 (Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 №677-п). При этом, перечень объектов подпадающих под 1300 Постановление Правительства до сих пор не утвержден, в связи с чем, общество не имеет возможности оформить необходимые документы на земельный участок и приступить к строительству объектов электросетевого хозяйства.

Кроме того, осуществление строительства не попадает под действие законодательства об электроэнергетике и регламентируется градостроительным законодательством, которым установлено, что строительство или реконструкция любого объекта должны вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и с соблюдением градостроительных норм и правил (ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ»), Таким образом, строительство линейного объекта возможно лишь при наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, выделенные соответствующим органом муниципального управления для размещения линейного объекта и имеющегося разрешения на строительство, нарушение данных требований ведет к сносу такого объекта независимо от категории и количества присоединенных потребителей. Планируемый срок осуществления технологического присоединения - 2 квартал 2018 года.

Моральный вред по ст. 15 Закона о защите прав потребителей подлежит взысканию только в случае наличия вины исполнителя. Вина ПАО «МРСК Сибири» в длительном сроке осуществления технологического присоединения объекта истца, как обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения и разрешения дела о причинении морального вреда истцу, отсутствует по указанным выше объективным обстоятельствам, в связи с чем, компенсация морального вреда не подлежит взысканию.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. Следовательно, взыскание законной неустойки не правомерно, так как штрафная санкция в установленном размере установлена Постановлением Правительства РФ 861. Таким образом, в нарушение действующего законодательства, истцом было применено 2 штрафные санкции за совершение одного нарушения - нарушения срока исполнения мероприятий. Данное требование является не правомерным и нарушает основы гражданского законодательства.

С учетом изложенного, просит в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Выслушав представителя истца и исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Ответчик признал исковые требования в части обязания осуществить технологическое присоединение; суд принимает признание иска ответчиком в данной части, поскольку, он не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц. При этом, суд соглашается с правовой позицией истца, изложенной в обоснование данного требования.

Разрешая вопрос об установлении срока исполнения решения суда в данной части и оценивая доводы сторон, суд полагает разумным установить срок исполнения решения суда- 3 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Оценивая требования истца о взыскании предусмотренной договором неустойки, суд соглашается с расчетом этой неустойки и полагает ее подлежащей взысканию в полном объеме, в сумме 110 рублей 96 копеек.

В части взыскания неустойки в размере 720 рублей 50 копеек, суд соглашается с доводами ответчика, полагая, что истцом неверно применены нормы права и, его требование о взыскании второй неустойки за одно и то же нарушение не основано на требованиях ГК РФ и, не подлежит удовлетворению.

Статьей 151 ГК РФ регламентировано, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Согласно статье 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Согласно статье 15 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»: «Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.».

Учитывая характер нарушения прав истца, длительность нарушения прав и указанные ответчиком обстоятельства, которые повлияли на нарушение обязательства со стороны ответчика, суд полагает разумной денежную компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Учитывая, что истец неоднократно обращался с претензией к ответчику, ответчик требования потребителя-истца в добровольном порядке в полном объеме не исполнил, в силу требований пункта 6 статьи 13 закона и пункта 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.12г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 5 055 рублей 48 копеек, исходя из расчета: 10 000 + 110,96 = 10 110,96 : 2=5 055 рублей 48 копеек.

С ответчика подлежит взысканию в пользу муниципального образования г. Минусинск государственная пошлина в размере 1 000 рублей( 400 рублей- за требование имущественного характера и 600 рублей- за требования неимущественного характера).

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Былина ВС к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки и денежной компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения исполнить условия договора № 20.2400.269.16 от 18.02.2016г.- осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям принадлежащие ФИО2 энергопринимающие устройства расположенные в жилом доме по адресу: 

<

адрес>. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу Былина ВС денежную сумму в размере 15 166 рублей 44 копейки; в том числе: неустойку- 110 рублей 96 копеек, денежную компенсацию морального вреда- 10 000 рублей и штраф- 5 055 рублей 48 копеек. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Былина ВС к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о взыскании неустойки- отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу муниципального образования г. Минусинск государственную пошлину в размере 1 000 рублей.

Решение может быть обжаловано через Минусинский городской суд в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия судом мотивированного решения. 

Председательствующий: