Дело № 2-3300/2021

УИД: 22RS0068-01-2021-004559-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 июня 2021 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Топорова А.А.,

при секретаре Хитриной А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Барнаульская сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Барнаульская сетевая компания» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков

В обоснование требований указано, что 29.08.2018 между ООО «Барнаульская сетевая компания» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Дата заключения договора - 05.09.2018. По условиям договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта; здание канализационно-распределительной камеры, здание насосной станции, здание материального склада, расположенного по адресу: ...., с учетом технологических характеристик в точке присоединения, определенных техническими условиями. Согласно пункту 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение, определенном в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 753 от 25.12.2017 г., составляет 92 007 руб. 68 коп. Условиями пункта 3.2 договора установлен порядок внесения платы за технологическое присоединение. Перечень мероприятий, подлежащих выполнению сторонами договора, определен в технических условиях № 04-29/872 от 28.08.2018, являющихся приложением № 1 к договору, срок действия которых установлен в 2 года. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 05.09.2019 (п. 1.5. договора). Обязательство по внесению платы за технологическое присоединение, установленное п. 3.2. договора ФИО1 не выполнено. ООО «Барнаульская сетевая компания» осуществило мероприятия и создало условия возможности фактического подключения объекта ФИО1 со стороны зоны ответственности сетевой организации по технологическому присоединению, понеся при этом расходы на сумму 84 834,00 руб. В связи с неисполнением заявителем обязательств, предусмотренных техническими условиями, сетевая компания направила заявителю уведомление от 03.02.2021 сприложением соглашения о расторжении договора. 

На основании изложенного истец просил расторгнуть договор № от 05.09.2018 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; взыскать с ответчика в свою пользу убытки в размере 87 658,80 руб. и расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 745,02 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 настаивала на исковых требованиях в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежаще посредством телефонограммы.

Суд полагает возможным рассмотреть дело при указанной явке.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861 (далее Правила N 861), в соответствии со статьями 21, 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Абзац второй пункта 3 Правил N 861 предусматривает, что независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

На сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая строительство новых линий электропередачи, подстанций, замену или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизацию оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, в силу прямого указания закона является деятельностью по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения.Согласно п. п. "г" п. 25 (1) Правил N 861 распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляется заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12 (1), 14 и 34 Правил N 861, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя (п. 16.3 Правил).

Судом установлено, что 29.08.2018 между ООО «Барнаульская сетевая компания» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Дата заключения договора - 05.09.2018. 

По условиям договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта; здание канализационно-распределительной камеры, здание насосной станции, здание материального склада, расположенного по адресу: ...., с учетом технологических характеристик в точке присоединения, определенных техническими условиями. 

Согласно пункту 3.1, 3.2 договора размер платы за технологическое присоединение, определенном в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 753 от 25.12.2017 г., составляет 92 007,68 руб. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 

10% платы вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

30% платы вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

20 % платы вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

30% платы вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 % платы вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении. 

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению сторонами договора, определен в технических условиях № от 28.08.2018, являющихся приложением № 1 к договору, срок действия которых установлен в 2 года. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 05.09.2019 (п. 1.5. договора).

ООО «Барнаульская сетевая компания» осуществило мероприятия и создало условия возможности фактического подключения объекта ФИО1 со стороны зоны ответственности сетевой организации по технологическому присоединению, понеся при этом расходы на сумму 84 834,00 руб. 

Поскольку обязательство по внесению платы за технологическое присоединение, установленное п. 3.2. договора ФИО1 не выполнено, истец направил заявителю уведомление от 03.02.2021 с приложением соглашения о расторжении договора, которое оставлено без удовлетворения.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В соответствии с п. 16 (5) Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Поскольку при рассмотрении данного дела установлен факт неисполнения ответчиком обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, что в силу подп. 1 п 2. ст. 450 является существенным нарушением условий данного договора, следовательно требования истца о расторжении указанного договора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий со стороны контрагента, вправе предъявить ему требование о возмещении убытков, причиненных прекращением договора (пункт 1 статьи 393, пункт 3 статьи 450, пункт 5 статьи 453 ГК РФ).

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной степенью достоверности (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из материалов дела следует, что в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение, для осуществления технологического присоединения непосредственно истцом были выполнены мероприятия, по подготовке и выдаче технических условий, а также мероприятия, указанные в п. 1 и 2 технических условий (сетевая организация осуществила, запроектировала и построила ВЛЗ-6 кВ на ж/б опорах проводом СИГ1-Зх50 от опоры №2 ВЛ-6 кВ Л-13-233 до земельного участка по ...., длиной Г=0,06 км; в РУ-6 кВ, ПС-13 яч.12 заменило трансформаторы тока ТВЛМ-10 (400/5) на ТВЛ.М-10 (600/5)). Стоимость работ составила 87 658,80 руб.

С учетом изложенного суд взыскивает с ответчика в пользу истца убытки в сумме 87 658,80 руб., удовлетворяя иск в полном объеме.

На основании ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины 2 745,02 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Расторгнуть договор № от 05.09.2018 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Барнаульская сетевая компания» убытки в сумме 87 658 руб. 80 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины 2 745 руб. 02 коп.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья: А.А. Топоров