Дело №

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Дульдурга 24 февраля 2025 года

Дульдургинский районный суд Забайкальского края в составе: 

председательствующего судьи Бальжинимаева Б.Б.,

при секретаре Будаевой Д.Б., 

с участием представителя ответчика ФИО3, посредством видеоконференц-связи на 

<

адрес>,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", Публичному Акционерному Обществу "Россети Сибирь" об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения,

установил:

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском мотивировав тем, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ответчиком Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которого ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, а именно для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя «Объект сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № (п. 3 Договора) в течение 1 года (п. 5 Договора).

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 20000 рублей. Согласно п.11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке: в размере 

<

данные изъяты> руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня заключения договора; в размере 

<

данные изъяты> руб. в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; в размере 

<

данные изъяты> руб. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; в размере 

<

данные изъяты> руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; в размере 

<

данные изъяты> руб. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п.15 Договора датой исполнения обязательств Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет ФИО2 организации.

В соответствии с условиями пункта 13 Договора истцом по реквизитам, указанным в Договоре, была произведена оплата услуг ответчика в сумме 20000 руб., которые, согласно справки по операции на сумму 2000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на банковский счет ПАО «МРСК СИБИРИ».

ФИО1 неоднократно устно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока. Однако, несмотря на предпринимаемые меры по побуждению исполнить обязательства, ответчик до настоящего времени не исполняет условий Договора об осуществлении технологического присоединения, ссылаясь на задержку и перенос срока выполнения работ. 

Таким образом, у ответчика было достаточное время для подготовки необходимого материала для надлежащего исполнения обязательств по договору, начиная со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ДД.ММ.ГГГГ, однако им не была проявлена та степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, им не было предпринято никаких мер для надлежащего исполнения своих обязательств.

На основании изложенного, просит суд обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «Россети Сибирь», №) исполнить обязанность по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № в течение 90 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

В отзыве на исковое заявление ответчик ПАО «Россети Сибирь» указывает на то, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. 

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу п. 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Техническими условиями предусмотрено, что сетевая организация обязана:

Выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением. Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП № ф. Алханай. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-НПА и составляет 

<

данные изъяты> руб.

Фактические затраты ФИО2 организации на исполнение договора в ценах 2024 года составляет 

<

данные изъяты> рублей без НДС.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Правила (пункт 7) устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

- подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

- заключение договора;

- выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

- получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

- фактический прием (подача) напряжения и мощности;

- составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

Согласно п. 25 Правил, в технических условиях для заявителей должно быть указано на распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией) (п. а2).

Пункт 16.6 Правил устанавливает, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем и в тех случаях, когда заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Таким образом, Правилами императивно распределена обязанность по исполнению мероприятий осуществления технологического присоединения: потребитель выполняет мероприятия в границах своего земельного участка до точки присоединения, а сетевая организация выполняет мероприятия до точки присоединения, расположенной на границе земельного участка потребителя.

Между сторонами заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Ответчик принял на себя обязательство по технологическому присоединению электроустановки объекта – объекта сельскохозяйственного производства, расположенного (которая будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 5 Договора).

При этом, условиями заключенного договора предусмотрено, что мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, выполняются не только силами сетевой организации, но и заявителем. Перечень таких мероприятий, подлежащих выполнению сторонами, был согласован в Технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Согласно п. 10.3 Технических условий, заявитель обязан выполнить следующее:

- На границе балансовой принадлежности электрических сетей обеспечить поддержание качества электрической энергии в соответствии с действующей НТД РФ; 

- Установка приборов измерения и регистрации качества электрической энергии, фильтрокомпенсирующих устройств, средств обеспечения нечувствительности систем управления непрерывным технологическим процессом в соответствии с действующей НТД РФ в случае если в ходе проектирования энергопринимающих устройств заявителя установлено их влияние на ухудшение соответствующих параметров качества электрической энергии в точках технологического присоединения;

- Ввод от РУ-0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности);

- разработать проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

- после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО2 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Пунктом 8 Договора предусмотрена обязанность заявителя надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.

Этим же пунктом предусмотрена обязанность заявителя уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защиты и автоматики, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Сетевая организация, в свою очередь, обязана в течение 10 дней дней со дня получения такого уведомления обязана осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств Истца должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора и не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления Истцом о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (п, 2 Договора),

Таким образом, обе стороны обязаны выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями в течение одного года после заключения договора, причем исполнение обязанностей заявителем по выполнению технических условий предшествует исполнению сетевой организацией своих обязанностей по осмотру устройств заявителя и их присоединения к электрическим сетям (п. 6,8. договора).

ФИО1 в нарушение условий заключенного договора не уведомил ПАО «Россети Сибирь» о выполнении им технических условий, что ответчиком расценивается не выполнение со стороны заявителя технических условий.

В силу ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Часть 1 ст. 330 ГК РФ устанавливает, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии со ст.328 ГК РФ, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказа гься от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.Ни одна из сторон обязательства, по условиям кото юго предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Истец не представил в материалы дела доказательств надлежащего исполнения в установленный договором срок принятых на себя обязательств по договору, которые в соответствии со ст. 328 ГК РФ, являются встречными по отношению к обязательствам ответчика, обуславливают исполнение ответчиком своих обязанностей по договору.

При указанных обстоятельствах заявленные ФИО1, требования не подлежат удовлетворению (аналогичная судебная практика - Решение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №, Решение Арбитражного суда 

<

адрес> по делу №, Постановление ФАС ВСО по делу №, Определение Верховного Суда РФ по делу №).

<

данные изъяты>

Исходя из утвержденных стандартизированных ставок, цена договора покрывает только затраты сетевой организации на подготовку к выдачу технических условий, проверку их исполнения.

На сегодняшний день у ФИО2 организации имеются обстоятельства, затрудняющие исполнение договора, заключенного с истцом. 

<

данные изъяты>

Пунктом 81 Основ ценообразования рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций ограничен предельными (минимальными и максимальными) уровнями цен (тарифов), утверждаемых ФАС России и прогнозом социально-экономического развития, предусматривающий максимальный рост тарифа по категории потребителей «прочие» - 3%, по категории потребителей «население и приравненные к нему категории» - 5%.

В условиях, когда максимально допустимый рост тарифов на услуги сетевых организаций ограничен, компенсация выпадающих доходов, возникающих в связи с технологическим присоединением, в требуемом объеме не производится.

ПАО «Россети Сибирь» приняты все возможные, зависящие от Общества меры, направленные на исполнение обязательств Общества по договорам технологического присоединения, в том числе по изысканию источников финансирования. Для разрешения вопроса, ПАО «Россети Сибирь» обратилось к 

<

адрес>, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию 

<

адрес>. Ситуация в сфере технологического присоединения осложнена не обеспечением земель, выделяемых для реализации различных программ, направленных на развитие территорий и сельского хозяйства, соответствующей инфраструктурой, что серьезно увеличивает дефицит источников финансирования и мощностей электросетевой компании.

<

данные изъяты>

На ДД.ММ.ГГГГ за 2024 год судами 

<

адрес> вынесено 61 решение о понуждении Общества к исполнению договоров технологического присоединения с применением к обществу мер гражданской ответственности на сумму более 2 200 тыс. руб.; 137 исковых заявлений с аналогичными требованиями находятся на рассмотрении. Также Общество в 2024 привлечено к административной ответственности за просрочку исполнения обязательств по технологическому присоединению на сумму более 19 млн. руб.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения.

Помимо значительных материальных затрат причиной несвоевременного исполнения договора, является поставка материалов для строительства линий электропередач.

Заключение договоров поставки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 223-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Конкурсная процедура занимает 3-4 месяца, сроки поставки товара от 1 до 6 месяцев.

Кроме того, на сегодняшний день приостановили поставку материалов в связи с образовавшейся задолженностью такие поставщики как ООО «Брайт-Энерго», ООО «Красэнергопоставка», ООО НПО «ЭнТРИ», ООО «ГК СИБСНАБ», что свидетельствует о наличии трудного финансового положения ПАО «Россети Сибирь».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства (отсутствие финансирования на осуществления строительства, длительные сроки поставки материалов необходимых для исполнения договоров, капитальное строительство линий электропередач), исполнение договора в установленный срок осуществить невозможно по объективным причинам.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения.

В связи с изложенным, в случае принятия решения об удовлетворении исковых требований, Общество полагает, что разумным сроком, в течение которого оно может быть исполнено не менее одного года, с момента вступления решения суда в силу. Заявленный истом семидневный срок с даты вступления решения в законную силу является неисполнимым.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, в силу ст.167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие истца. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3 исковые требования признала, суду пояснила, что доводы по исковым требованиям изложены в отзыве. Просила суд установить срок для исполнения решения суда не менее 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

Выслушав представителя ответчика, изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, разработаны технические условия и заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (пункт 5).

По договору сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, в том числе: в течение 10 дней со дня её уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, указанного в технических условиях (2 года) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности, разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию (пункт 7).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 20 000 руб. (пункт 11 договора). В соответствии с Правилами технологического присоединения оплата в указанном размере заявителем внесена частично пятью платежами – в размере 10 %, 30 %, 20 %, 30 %, 10 % платы за технологическое присоединение.

Во исполнение условий договора были выданы Технические условия №. 

В соответствии с пунктом 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Таким образом, ответчик обязан выполнить принятые по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.7500.2106.21 обязательства.

Поскольку ответчиком обязанность по выполнению предусмотренных техническими условиями работ по технологическому присоединению в установленный договором срок не исполнена, заявленное требование о понуждении к исполнению договора подлежит удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что ответчику необходимо время для выполнения обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, суд с учётом обстоятельств неисполнения условий договора, объёмов работы, климатических условий 

<

адрес>, считает разумным установить шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, в который ответчиком должны быть совершены возложенные на него действия.

В силу части 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу пункта 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание объем и характер работ, которые необходимо выполнить ответчику для исполнения судебного акта, климатические условия, установленные по делу обстоятельства, позицию сторон по данному вопросу, суд приходит к выводу о том, что разумным сроком исполнения решения суда является – 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу. 

По правилам статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в связи с чем с ПАО «Россети-Сибирь» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 

<

данные изъяты> рублей в доход местного бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление ФИО1 

<

данные изъяты> к филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", Публичному Акционерному Обществу "Россети Сибирь" об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения - удовлетворить. 

Обязать ПАО "Россети Сибирь" в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» (

<

данные изъяты>) в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в силу исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ путем осуществления технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» 

<

данные изъяты> в доход бюджета муниципального района «

<

адрес>» государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Мотивированное решение изготовлено 03 марта 2025 года.

Председательствующий Б.Б. Бальжинимаев