Дело №2-2226/2020

УИД: 92RS0003-01-2020-003199-38

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Севастополь 04 сентября 2020 года

Ленинский районный суд города Севастополя в составе председательствующего - судьи Байметова А.А., при секретаре – Гонтарь С.В., с участием представителя истца – ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» к ФИО2 

<

данные изъяты> о взыскании расходов и неустойки в связи с исполнением договорных обязательств,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Севастопольэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО2 

<

данные изъяты> о взыскании суммы фактически понесенных расходов за разработку технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения, а также неустойку (пени) в размере 

<

данные изъяты>., судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты>

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строящегося садового дома, который будет располагаться по адресу: СТ «Куликово поле», уч.40. ФИО2 

<

данные изъяты> были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям №. По условиям договора истец принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ, указанных в п. 10 технических условий №. В соответствии с данным договором ответчик принял на себя обязательства по выполнению технических условий, а именно: установить вводно-учетный щит - ВУЩ- 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности сетей; организовать в ВУЩ- 0,4 кВ расчетный узел учета электроэнергии с применением прибора учета электрической энергии классом точности не ниже 2.0; установить в ВУЩ-0,4кВ устройство, обеспечивающее защиту ЭПУ и контроль величины максимальной мощности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Построить питающую ЛЭП -0,4 кВ от точки присоединения электроустановки объекта к Р/Щ-0,4кВ объекта. Разработать проектную документацию объекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил устройства электроустановок и другой нормативно-технической документации. Принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект электроснабжения согласовать с ООО «Севастопольэнерго» и другими заинтересованными организациями, собственниками земли (землепользователями). Согласно п. 5 Договора № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора. Ответчиком указанные в п. 11 Технических условий мероприятия выполнены не были. В силу п. 9 Договора № ответчиком заявка на продление технических условий не направлялась. В соответствии с п. 13 Технических условий и п. 4 Договора № установлен срок действия технических условий - два года со дня подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ срок действия технических условий истек. Фактически бездействия ответчика по исполнению своих обязательств по договору свидетельствуют об одностороннем отказе от исполнения обязательств. По договору № плата за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты>., которая была частично внесена ответчиком в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 17 Договора № сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить другой стороне неустойку (пени), равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. В связи с неисполнением ответчиком мероприятий, предусмотренных п. 11 Технических условий, истец понес расходы за разработку технических условий и договора на технологическое присоединение в сумме 

<

данные изъяты>., а также за неисполнение договорных обязательств начислена неустойка (пени) в размере 

<

данные изъяты>. Ввиду ранее оплаченных ответчиком денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>., сумма, подлежащая к взысканию с ответчика в пользу истца составляет 

<

данные изъяты> Невозможность фактического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении обусловлена отсутствием выполненных мероприятий со стороны ответчика ФИО2 

<

данные изъяты>, за что сетевая организация не несет ответственности. Ответчиком своевременно не было заявлено о расторжении договора, письма истца были ответчиком проигнорированы. Претензия истца от ДД.ММ.ГГГГ о погашении фактически понесенных расходов была ответчиком оставлена без удовлетворения и ответа.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном объеме, сославшись на обоснования, изложенные в исковом заявлении. 

Ответчик заявления о рассмотрении дела в его отсутствие суду не подавал, письменных возражений на иск не представил, в связи с чем суд, принимая во внимание согласие представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Суд, выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено материалами дела, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 

<

данные изъяты> в ООО «Севастопольэнерго была подана заявка на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, в п. 4 заявки указано обращение в связи с новым строительством. Из заявки усматривается, что ранее присоединенная мощность составляла 0 кВт, просит предоставить максимальную мощность 50кВт.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Севастопольэнерго» и ФИО2 

<

данные изъяты> заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту - Договор).

В соответствии с разделом 1 пунктов 1 и 2 Договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) строящегося садового дома на земельном участке, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 50кВт; категория надежности: III категория; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящегося садового дома, который будет располагаться по адресу: 

<

адрес>

Согласно п. 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении № 1.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего Договора.

Пункт 5 Договора (в редакции дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ) предусматривает срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

В соответствии с разделом 2 Договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 30 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. 

Заявитель при этом обязан: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 30 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности энергоснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников энергоснабжения.

Пунктом 13 Технических условий предусмотрено, что срок их действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В судебном заседании было установлено, что стороной истца были разработаны Технические условия № для присоединения к электрическим сетям и Договор №.

Ответчиком была произведена оплата по договору № в размере 

<

данные изъяты> 

Вместе с тем, ответчик, в установленный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ срок, мероприятия по технологическому присоединению не выполнил.

В адрес ответчика стороной истца неоднократно направлялись уведомления об истечении срока действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнении мероприятий по технологическому присоединению и необходимости обращения в ООО «Севастопольэнерго» для урегулирования вопроса по исполнению данного договора.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика ФИО2 

<

данные изъяты> было направлено уведомление о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с неисполнением со стороны ответчика условий договора. Указано на необходимость предоставления ответа в тридцатидневный срок, при отсутствии ответа ООО «Севастопольэнерго» вынуждено будет обратиться в суд с требованиями о расторжении договора и возмещении затрат, связанных с исполнением указанного договора.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г.№ 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила № 861).

В силу п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 16 Правил № 861 предусмотрено, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Согласно п. 16.3 Правил № 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу пп. "г" п. 18 названных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно пункту 2 статьи 782 Гражданского кодекса РФ исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Таким образом, действующим законодательством не допускается отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг.

По смыслу п. п. 2 - 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Как указано в п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Представленными стороной истца документами подтверждается, что по заявлению ответчика были проведены работы по разработке и выдаче технических условий и договора на технологическое присоединение к электросетям ООО «Севастопольэнерго» (мощность от 11 до 100 кВт), в сумме 4773,09 руб.

Учитывая, что работы по разработке и выдаче технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям были выполнены стороной истца в полном объеме, а ответчик, ранее обратившийся с заявкой на присоединение к электросетям, впоследствии отказался от технологического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении в одностороннем порядке, то суд приходит к выводу о законности и обоснованности заявленных истцом требований.

С ответчика ФИО2 в пользу истца ООО Севастопольэнерго» подлежат взысканию фактически понесенные расходы по договору № 25017-0078 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17 августа 2017 года в сумме 4773,09 руб. 

В соответствии с п. 1. ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1. ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (п. 17 Договора).

Истцом представлен расчет неустойки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ее размер составляет 

<

данные изъяты> (за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата истечения срока выполнения мероприятий) по ДД.ММ.ГГГГ, но не более 

<

данные изъяты>).

Так как ответчиком нарушены условия договора о сроках исполнения обязательства, то имеются основания для взыскания неустойки.

Учитывая компенсационную природу неустойки, которая направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, принимая во внимание все обстоятельства дела, период неисполнения обязательств, суд находит заявленный истцом ко взысканию размер неустойки обоснованным.

Каких-либо иных доводов, которые могли бы повлиять на решение суда стороной ответчика не представлено.

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В связи с удовлетворением исковых требований суд взыскивает с ответчика в пользу истца понесенные им расходы по уплате госпошлины в сумме 

<

данные изъяты>.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 98, 196, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 

<

данные изъяты> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» 

<

данные изъяты>., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Заочное решение в окончательной форме принято 09.09.2020.

Судья –