КОПИЯ

Дело № 2-290/2017 г. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

09 февраля 2017 года 

Московский районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Вольтер Г.В.,

при секретаре Школиной Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО6 к ООО «Формула дома» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, которым просит взыскать с ООО «Формула дома» неустойку 540 000 рублей, денежные средства по договору 120 000 рублей, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф и судебные расходы, указав, что 03 августа 2016 года между ним и ответчиком был заключен договор подряда на строительство деревянной бани по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Исполнитель должен был завершить работы в срок не позднее 30 сентября 2016 года, однако, в указанный срок работы в полном объеме закончены не были. Кроме того, согласно спецификации на строение из бревна предусмотрена установка лежаков (полок) в кабине сауны. До настоящего времени данный материал ответчик так и не поставил. Кроме того, ответчик поставил брус без обработки специальным раствором, что делает непригодной баню для эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Не уложена и не поставлена керамическая плитка в душевой, что также исключает ее использование по прямому назначению.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому:

ООО «Формула дома» обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения, выполнить следующие работы: установить полог 50 см. х 2,0 м. – 1 шт. и лавку 40 см. х 1,5 м. – 1 шт.; произвести отделку откосов окна – 1 шт. и двери – 1 шт. вагонкой хвоя; произвести установку плинтусов в душевой – 4 м.; заменить двери в душевую – деревянная 1 шт.

ФИО1 ФИО7 отказывается от исковых требований в полном объеме.

Расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Стороны подтверждают, что не имеют иных претензий по исполнению договора подряда № 1 от 03 августа 2016 года. 

Так как данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд находит возможным утвердить его на указанных выше условиях. 

В соответствии с требованиями ст. 173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения сторон, суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Сторонам также разъяснено, что в случае отказа стороны от выполнения условий мирового соглашения оно будет обращено к принудительному исполнению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 220-221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску ФИО1 ФИО8 к ООО «Формула дома» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда согласно которому:

ООО «Формула дома» обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения, выполнить следующие работы в деревянной бане по адресу: 

<

адрес>, 5-7: установить полог 50 см. х 2,0 м. – 1 шт. и лавку 40 см. х 1,5 м. – 1 шт.; произвести отделку откосов окна – 1 шт. и двери – 1 шт. вагонкой хвоя; произвести установку плинтусов в душевой – 4 м.; заменить двери в душевую – деревянная 1 шт.

ФИО1 ФИО9 отказывается от исковых требований в полном объеме.

Расходы по оплате услуг представителей и любые иные расходы сторон, связанные прямо или косвенно с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Стороны подтверждают, что не имеют иных претензий по исполнению договора подряда № 1 от 03 августа 2016 года. 

Производство по делу прекратить.

Сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Московский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней.

Судья: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>