Дело № 2-2880/2020

(34RS0002-01-2020-005458-02)

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июля 2020 года город Волгоград

Дзержинский районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Землянухиной Н.С.,

помощника судьи Корневой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Жукатовой Э.А.,

с участием представителя ответчика ФИО1 по ордеру на основании ст. 50 ГПК РФ – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» обратился в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

В обоснование исковых требований истец указал, что между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее - Исполнитель, Сетевая организация) и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Договор). Основанием для заключения договора послужила заявка ответчика, в которой указаны цель заключения договора, наименование энергопринимающих устройств, контакты ответчика и другое.

С ДД.ММ.ГГГГ истец в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ переименован в публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». С ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» переименовано в ПАО «Россети Юг», о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения.

В соответствии с условиями договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения жилого дома ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, а ответчик обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям Договора.

Согласно разделу 2 Договора ФИО1 обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по оплате услуг по Договору, выполнить технические условия в части мероприятий, возлагаемых на него, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и др.

Технические условия действительны в течение 2 лет (п. 4 Договора).

Пунктом 5 Договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения Договора.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 года № 861, действовавшими на момент подписания и исполнения договора (далее - Правила технологического присоединения) установлено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для данной категории потребителей не может превышать 6 месяцев.

Соглашениями сторон срок исполнения мероприятий по договору был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сторонами договора на технологическое присоединение должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 18 Правил технологического присоединения (для данной категории заявителей):

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией;

- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- выполнение технологического присоединения и др.

До настоящего времени уведомления о выполнении технических условий от Заявителя в адрес Исполнителя так и не поступало. Доказательство о выполнении раздела указанных технических условий ПАО «Россети Юг» также не имеется. Срок исполнения обязательств по договору истек.

Осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя при отсутствии таковых (при невыполнении заявителем технических условий), объективно невозможно.

Таким образом, обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.

Неисполнение условий Договора ответчиком влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом. При этом у ПАО «Россети Юг» как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом.

При таких обстоятельствах ПАО «Россети Юг» считает необходимым обратиться в суд с требованием о расторжении договора технологического присоединения.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлялось уведомление № об исполнении договора со стороны сетевой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлялось письмо № об истечении срока выполнения мероприятий по Договору.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Юг» направило заказным письмом в адрес ответчика соглашение о расторжении договора (исх. №). Ответа на вышеуказанное соглашение в адрес Сетевой организации не поступало.

По указанным основаниям истец просит суд расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного сторонами, взыскать с ФИО1 в пользу публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» расходы по оплате государственной пошлины.

Представитель истца ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, в исковом заявлении просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, причины неявки суду не сообщил.

Представитель ответчика ФИО1 по ордеру на основании ст. 50 ГПК РФ - ФИО2 в судебное заседание возражает против удовлетворения исковых требований ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго». 

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав письменные доказательства по делу, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим ГК РФ, другими законами или договором.

В силу ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как следует из ч. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице начальника Городского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» ФИО3 и ФИО1 именуемый в дальнейшем заявителем, заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор). Основанием для заключения договора послужила заявка ФИО1, в которой указаны цель заключения договора, наименование энергопринимающих устройств, контакты ФИО1 и другое.

С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» переименован в ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» переименовано в ПАО «Россети Юг», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоедините) жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 (кВт), в т.ч. по категориям надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 (кВ); ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 Договора, мощность – -- кВТ; в т.ч. по категориям надежности --. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 8 Договора заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнить указанные в разделе III Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения Договора.

В силу п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п. 3 Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора (п. 4 Договора).

В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз. 3 п. 6 Договора, с соблюдением срока, установленного п. 5 Договора осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фаткичемкий прием (пдачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно п. 10.1 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ мероприятий, необходимых к выполнению по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов, не требуется.

Пунктом 13 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что срок их действия составляет два года со дня заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (далее - Правила).

В силу п. 12 Правил в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

До настоящего времени уведомления о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика в адрес истца не поступало. Доказательств исполнения в полном объеме мероприятий, предусмотренных Договором и Техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком суду представлено не было, материалы дела не содержат. Срок исполнения обязательств по договору истек.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлялось уведомление о выполнении № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора со стороны сетевой организации.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлялось письмо № об истечении срока выполнения мероприятий по Договору.

Как указывает в исковом заявлении истец, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 при невыполнении ответчиком технических условий невозможно.

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст. 328 ГК РФ, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

Таким образом, в соответствии со ст. 328 ГК РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического присоединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия.

Неисполнение условий договора ФИО1 влечет невозможность для сетевой организации исполнить Договор в целом. При этом у ПАО «Россети Юг» как у публичной стороны возникает риск наступления негативных последствий в виде гражданско-правовой, административной и иной ответственности за неисполнение договоров технологического присоединения в целом.

ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Юг» направило заказным письмом в адрес ответчика соглашение о расторжении договора технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №). Ответа на вышеуказанное соглашение от ответчика в адрес истца не поступало.

Часть 1 статьи 56 ГПК РФ предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком ФИО1 не представлено суду доказательств, подтверждающих факт надлежащего исполнения им обязательств по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

В этой связи, учитывая, что ответчиком не проведены мероприятия, указанные в Договоре и в Технических условиях № от ДД.ММ.ГГГГ, указанное является существенным нарушением условий Договора, что влечет последствия, предусмотренные п. 2 ч. 1 ст. 450 ГК РФ, исковые требования ПАО «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при подаче искового заявления в суд уплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице филиала – «Волгоградэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – удовлетворить.

Расторгнуть договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинский районный суд города Волгограда.

Мотивированное решение составлено машинописным текстом с использованием технических средств 04 августа 2020 года. 

Судья Н.С. Землянухина