Дело № 2-90/2026

УИД 75RS0013-01-2025-001628-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 января 2026 г. п.Карымское

Карымский районный суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Базаржаповой А.Б.,

при секретаре Полторановой Е.О.,

с участием истца ФИО3 ФИО1 представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности ФИО4 ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 ФИО1 обратился в суд с указанным исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь», ссылаясь на то, что 13.03.2025 между ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» и ФИО3 ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (увеличения присоединенной мощности на 5 кВт) №, объектами которого являются энергопринимающие устройства, расположенные по адресу

<

адрес> Ответчиком в рамках заключенного договора обязанность по увеличению присоединенной мощности на 5 кВт в установленный договором срок не исполнена, что повлекло нарушение прав заказчика. С учетом уточнений просит обязать ответчика исполнить договор в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 14.09.2025 по 22.12.2025 в размере 3 957,03 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. (л.д. 4-6, 26-28).

В судебном заседании истец ФИО3 ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности ФИО4 ФИО2 направила отзыв на исковое заявление, в судебном заседании исковые требования признала в части. Указала, что выполнение работ по договору потребует крупных финансовых вложений со стороны сетевой организации. Однако общество находится в трудной финансовой ситуации, в обстоятельствах острого дефицита денежных средств, имеет большую кредиторскую задолженность. Реальный срок для исполнения решения суда будет составлять не менее 6 месяцев. Рассчитанный истцом размер неустойки многократно превышает средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленные нефинансовым организациям. Неустойка, исходя из двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения обязательства, составит 1 821,31 руб. Выразила несогласие с размером компенсации морального вреда, просила уменьшить ее размер до 3 000 руб. Также просила снизить размер государственной пошлины на 50%.

Выслушав истца, позицию представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу ст. 309 и п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 13.03.2025 между ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» и ФИО3 ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (увеличения присоединенной мощности на 5 кВт) № объектами которого являются энергопринимающие устройства, расположенные по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №.

Максимальная мощность ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств – 10 кВт.

В соответствии с пунктом 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (пункт 21 договора).

Согласно пункту 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размер платы за каждый день просрочки.

Истцом осуществлена плата за технологическое присоединение 12.03.2025 в сумме 15 828,12 руб. (л.д. 15).

Технологическое присоединение должно было быть выполнено ПАО «Россети Сибирь» в срок по 13.09.2025.

На момент рассмотрения дела технологическое присоединение (увеличение присоединенной мощности на 5 кВт) энергопринимающих устройств истца не выполнено, что сторонами не оспаривалось.

Согласно расчету истца размер неустойки за период с 14.09.2025 по 22.12.2025 составляет 3 957,03 руб.

Расчет неустойки судом признается верным и ответчиком не оспаривается.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, учитывая нарушение со стороны ответчика договорных обязательств, суд находит требования истца о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности исполнить договор, осуществив технологическое присоединение (увеличение присоединенной мощности на 5 кВт) энергопринимающих устройств заказчика ФИО3 ФИО1 обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Требования о взыскании неустойки надлежит удовлетворить и взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 3 957,03 руб. Размер неустойки представляется соразмерным нарушенному обязательству, и оснований для ее снижения по ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

С учетом ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, требований разумности, справедливости и выполнимости, суд устанавливает срок по исполнению заявленной истцом обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заказчика в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ссылки ответчика на отсутствие финансовой возможности осуществить технологическое присоединение являются несостоятельными и не освобождают ответчика от исполнения возложенной на него законом и договором обязанности.

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно правовой позиции, отраженной в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку при рассмотрении спора по существу факт нарушения прав истца как потребителя со стороны ответчика, выразившийся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, нашел свое подтверждение, суд с учетом приведенных положений закона и разъяснений, фактических обстоятельств причинения морального вреда, в том числе принимая во внимание период неисполнения обязательства, учитывая принцип разумности и справедливости, приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации в счет возмещения причиненного морального вреда в размере 3 000 руб.

Таким образом, требования истца подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно пункту 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая, что требования истца в добровольном порядке ответчиком удовлетворены не были, суд, руководствуясь пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», взыскивает с ответчика в пользу ФИО3 ФИО1 штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в сумме 3 478, 51 руб., из расчета: (3 957,03 + 3 000)/2.

Поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины как потребитель, с ответчика в силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина.

Государственная пошлина при подаче иска подлежала уплате в размере 10 000 руб., из расчета: 3000 руб. – за неимущественное требование о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение; 3 000 руб. – за неимущественное требование о взыскании компенсации морального вреда; 4 000 руб. – за имущественное требование о взыскании неустойки.

В силу ч. 2 ст. 333.20 НК РФ, исходя из имущественного положения плательщика, суд вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по рассматриваемым делам, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.

Представителем ответчика ФИО4 ФИО2 заявлено ходатайство об уменьшении оплаты государственной пошлины на 50 % от общей суммы, подлежащей взысканию с ответчика по решению суда при удовлетворении исковых требований.

Принимая во внимание представленные ответчиком сведения о размере кредиторской задолженности, суд полагает возможным уменьшить государственную пошлину, подлежащую уплате в соответствии с положениям статьи 333.19 НК РФ на 50%, и взыскать с ответчика в доход Карымского муниципального округа Забайкальского края государственную пошлину в размере 5 000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение (увеличение присоединенной мощности на 5 кВт) энергопринимающих устройств заказчика – ФИО3 ФИО1, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 13.03.2025 в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ФИО3 ФИО1 (паспорт: серия № №) неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 3 957,03 руб., компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб., штраф в размере 3 478,51 руб., всего 10 435,54 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» государственную пошлину в доход Карымского муниципального округа Забайкальского края в сумме 5 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Карымский районный суд Забайкальского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья А.Б. Базаржапова

Решение изготовлено в окончательной форме 03.03.2026.