Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2020 года г.Симферополь 

Симферопольский районный суд Республики Крым в составе:

Председательствующего, судьи : Родькиной Л.А.

при секретаре : Кузьмищеве Р.И.

с участием прокурора : Щедриной О.В.

представителя ответчика: ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Симферопольского района в защиту прав, свобод и законных интересов малолетних ФИО5, ФИО6 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о понуждении осуществить технологическое присоединение жилого дома к электрическим сетям по условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

27.04.2020 года заместитель прокурора Симферопольского района Республики Крым обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов малолетних ФИО5, ФИО6 о возложении на ГУП РК «Крымнэнерго» обязанности в срок не позднее 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к электрическим сетям, по условиям договора от 07.03.2018 года №443/45/005-369-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенному между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО4 Требования мотивированы тем, что между ГУП РК «Крымэнерго» и законным представителем несовершеннолетних ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 07.03.2018 года заключен договор №443/45/005-369-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п.1 Договора сетевая организация приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п.4.5 Договора, технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, и срок их действия составляет 2 года. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (т.е. до 07.09.2018). В дальнейшем между сторонами Договора 16.09.2019 года заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым мероприятия по технологическому присоединению подлежали выполнению до 31.12.2019 года. При этом в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что заявителем условия Договора, изложенные в пункте 8, исполнены; уведомление о выполнении технических условий направлено в адрес сетевой организации 16.04.2018 года, однако до настоящего времени сетевой организацией технологическое присоединение не выполнено, что свидетельствует о невыполнении обязательств, предусмотренных Договором.

В судебном заседании 20.07.2020 года прокурор исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в иске, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО1, действующая на основании доверенности, против удовлетворения иска не возражала. 

Законный представитель ФИО5, ФИО6 – ФИО7 в судебное заседание не явилась, извещена в установленном законом порядке о времени и месте судебного разбирательства ( л.д. 107), конверт на имя ФИО7 возвращен в суд с отметкой организации почтовой связи «Истек срок хранения». Суд, в соответствии со ст.ст. 113,116, 118 ГПК РФ, считает судебную повестку врученной, а ФИО7, - извещенной о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. ФИО7 причины неявки суду не сообщила, ходатайства об отложении судебного разбирательства от последней в суд не поступало. Суд, в соответствии со ст.167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившегося законного представителя.

Суд, заслушав пояснения прокурора, представителя ответчика, исследовав материалы дела, считает требования заместителя прокурора обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Судом установлено, что право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес> зарегистрировано за ФИО7, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 25.06.2020 года. Земельному участку присвоен кадастровый № (л.д.109-114).

Согласно ответу ОАСР УВМ МВД по Республике Крым от 25.06.2020 года №481/13486, ФИО7, ФИО6, ФИО5 с 04.07.2018 года зарегистрированы по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; ФИО8 с 30.07.2018 года зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес> (л.д.115).

Судом так же установлено, что 07.03.2018 года между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» (ГУП РК «Крымэнерго»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Начальника Департамента технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго» ФИО10 с одной стороны, и ФИО7, именуемой в дальнейшем заявителем, с другой стороны, заключен договор № 443/45/005-369-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п.1 указанного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение) электроустановки индивидуального жилищного строительства, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 (кВт); категория надежности третья (15,0 кВт); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение (0,38 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 

Согласно п.2 Договора, Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения индивидуального жилищного строительства, расположенного в 

<

адрес>, кадастровый №. 

Согласно п.6.2. договора, в течении десяти рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий сетевая организация обязуется осуществить проверку выполнения технических условия заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно п.6.3 договора, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 6.2, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (л.д.48-54).

16.09.2019 года между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО7 заключено дополнительное соглашение, согласно которому в вышеуказанный договор внесены изменения; срок проведения мероприятий по технологическому присоединению определено осуществить до 31 декабря 2019 года.

В соответствии со ст.799 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Указанный порядок утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". 

В соответствии с п.3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с п. 16(3) Правил ( в редакции, действовавшей на момент возникновения правоотношений между сторонами) обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Учитывая изложенное, требования истца о возложении на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности исполнить обязательства по договору путем осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановки индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в соответствии с условиями договора и технических условий, подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, учитывая требования законодательства и условия договора, такое присоединение возможно при условии выполнения заказчиком технических условий, в связи с чем суд полагает возможным возложить на ответчика обязанность в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения осуществить проверку выполнения ФИО7 технических условий для присоединения к электрическим сетям №443/45/005-369-18 от 07.03.2018 года.

В соответствии со ст.ст.98, 103 ГПК РФ с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» подлежит взысканию в бюджет государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 3,9,55-56, 59-61, 67, 88, 98, 167, 194-195 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Иск заместителя прокурора Симферопольского района в защиту прав, свобод и законных интересов малолетних ФИО5, ФИО6 удовлетворить. 

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения осуществить проверку выполнения ФИО7 технических условий для присоединения к электрическим сетям №443/45/005-369-18 от 07.03.2018 года и в случае выполнения их заявителем в срок не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу решения исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.03.2018 года №443/45/005-369-18, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств электроустановки индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>,, кадастровый №, в соответствии с условиями договора и технических условий.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в бюджет государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Симферопольский районный суд Республики Крым в течение одного месяца в порядке, предусмотренном ст.ст. 320-321 ГПК Российской Федерации.

Судья: 

Мотивированное решение суда составлено 24 июля 2020 года.

Судья: