Дело № 2-4778/2023

39RS0002-01-2023-004286-46

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26 октября 2023 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Холониной Т.П.

при помощнике ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к АО «Россети Янтарь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском, указывая, что он является собственником двух смежных земельных участков, расположенного по адресу: 

<

 адрес > КН №, площадью 698 кв.м., и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

 адрес > КН №, площадью 610 кв.м. 14.04.2022 с ответчиком был заключен типовой договор №3551/04/22 от 14.04.2022 об осуществлении технологического присоединения, неотъемлемой частью которого являются технические условия №В-3551/22. Оплату по договору произвел своевременно в полном объеме. В дальнейшем по его решению земельные участки были перераспределены по площади и образованы новые участки: земельный участок, расположенный по адресу: 

<

 адрес >, КН №, площадью 1008 кв.м. и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

 адрес >, КН №, площадью 300 кв.м. Согласно пункту 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. До настоящего времени ответчиком договор не исполнен. Просит обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 3551/04/22 от 14.04.2022г. в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

 адрес >, кадастровый №, взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 3551/04/22 от 14.04.2022 за период с 15.04.2023 по 31.07.2023 в размере 2970 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 20000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере 11485рублей.

В судебное заседание истец не явился, извещен о рассмотрении дела, представил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала, представила письменный отзыв по иску, указала, что АО «Россети Янтарь» предпринимает все возможные и необходимые меры для исполнения обязательств по договору технологического присоединения, разработано и передано в работу техническое задание по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 21-26, организация системы учета электроэнергии в г. Гусеве, СОТ «Луч», проводились конкурентные процедуры по выбору организации на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ, каких-либо доказательств причинения истцу морального вреда не представлено.

Выслушав пояснения представителя ответчика, изучив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и дав им оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 14.04.2022 между ФИО2 и АО «Янтарьэнерго» заключен договор №3551/04/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям договора АО «Янтарьэнерго» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальной мощностью 15 кВт, третьей категории надежности, классом напряжения электрической сети - 0,4 кВ для энергоснабжения принадлежащего ФИО2 жилого дома, располагающегося на земельном участке по адресу: 

<

 адрес > КН №. Неотъемлемой частью договора являются технические условия №В-3551/22, в силу которых АО «Янтарьэнерго» для осуществления технологического присоединения приняло на себя обязанность выполнить строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 21-26 в сторону участка заявителя, тип и трассу определить проектной документацией, протяженность 0,11 км, при строительстве ВЛИ 0,4 кВ применить провод СИП-4 сечением согласно расчету, опоры ж.б., климатические условия: район по ветру – 3, район по гололеду – 2, максимальное рабочее значение температуры наружного воздуха +35град., в случае применения КЛ 0,4 кВ у земельного участка заявителя установить СП, оснащенный рубильниками, с монтажом группы предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью, при строительстве ВЛИ 0,4 кВ, щит учета установить на ближайшей опоре ВЛИ 0,4 кВ, новая от ТП 21-26 расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, от зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре произвести монтаж СИП или КЛ расчетного сечения, тип прибора учета определить техническим заданием, при строительстве КЛ 0,4 кВ в СП Новый 0,4 кВ от ТП 21-26 смонтировать систему учета электроэнергии с автоматическими выключателями, расположенной не далее 15 метров во внешнюю стороны от границы участка заявителя, тип приборов учета определить техническим заданием.

Заявитель осуществляет монтаж электросети от точки присоединения до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП соответствующей пропускной способности.

Во исполнение условий договора ФИО2 оплатил расходы на технологическое присоединение в размере 550 руб. 14.04.2022.

16.05.2023 ФИО2 обратился в АО «Янтарьэнерго» с претензией, технологическое присоединение не было произведено. 

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно статье 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. 

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю. 

Порядок технологического присоединения регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее Правила).

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Согласно п.16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Поскольку право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям, судом установлено, что предусмотренный договором срок осуществления технологического присоединения ответчиком нарушен, исковые требования о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение согласно установленным техническим условиям являются обоснованными, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.204 ГПК РФ суд устанавливает ответчику срок, в течение которого он должен осуществить технологическое присоединение – 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 19 заключенного сторонами договора предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Порядок технологического присоединения регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 16 указанных Правил договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, с также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Абзацем третьим подпункта "в" пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее - Правила технологического присоединения) предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Неустойка за период с 15.04.2023 по 31.07.2023 составляет 2970 рублей, исходя из расчета: 550Х5%х108дней+=2970 рублей. С учетом изложенного, суд находит заявленные истцом требования о взыскании неустойки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Статьей 9 ФЗ от 26.01.1996 №15-ФЗ «О введении в действие части второй ГК РФ» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с п.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен.

В силу п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

На момент вынесения решения суда ответчиком свои обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям не исполнены. Учитывая вышеизложенное, когда ответчиком были нарушены права потребителя на своевременное исполнение договора, суд приходит к выводу, что последнему был причинен моральный вред, выразившийся в перенесенных им нравственных страданиях. С учетом степени характера допущенного непосредственно ответчиком нарушения, степени его вины, длительности и характера нарушения прав потребителя, нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 3000 рублей.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Размер штрафа составляет (3000+2970)х50%=2985 рублей. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 2985 рублей.

На основании ч. 1 ст.98 ГПК РФ с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета подлежат взысканию расходы на уплату госпошлины в размере 700 руб. 

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, расположенного п адресу: 

<

 адрес > КН № в соответствии с договором № 3551/04/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.04.2022 и технических условий № В-3551/22 в месячный срок с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» ИНН №, ОГРН № в пользу ФИО2 паспорт 

<

 ИЗЪЯТО >, неустойку в сумме 2970 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в сумме 2985 рублей, 

Взыскать с АО «Россети Янтарь» ИНН №, ОГРН № в доход местного бюджета расходы по госпошлине в сумме 700 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 02.11.2023.

Судья: Т.П.Холонина