УИД 78RS0001-01-2023-001907-53

№ 2-4121/2023 07 сентября 2023 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Дерягиной Д.Г., 

при секретаре Александровой И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании совершить определённые действия, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Северо-Запад», в котором просил обязать ПАО «Россети Северо-Запад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в разумный срок осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

данные изъяты>

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что заключил с ответчиком договор о технологическом присоединении к электрическим сетям, выполнил со своей стороны обязательства по подготовке энергопринимающих устройств, однако ответчик в установленный договором срока свои обязательства по присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не исполнил, в связи с чем истец обратился в суд с вышеназванными требованиями. 

Представитель истца по доверенности ФИО2 в судебное заседание явился, поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, представил отзыв на исковое заявление. 

Руководствуясь положениями ст.ст. 113, 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как усматривается из материалов дела, 

<

данные изъяты> между ФИО1 и ПАО «Россети Северо-Запад» заключен договор 

<

данные изъяты> присоединения к электрическим сетям с техническими условиями 

<

данные изъяты>, согласно которым ответчик обязался осуществить технологическое присоединение электропринимающих устройств истца по адресу: 

<

данные изъяты> к электросети. 

Максимальная мощность 15 кВт, вид питания – основной, категория надежности третья. 

Источник питания (наименование питающих линий) – 

<

данные изъяты>.

Описание точки присоединения – контактные соединения прибора учета на проектируемой опоре 

<

данные изъяты>. 

Истец обязался выполнить монтаж электроустановок от точки присоединения до энергопринимающих устройств. 

Ответчик обязался запроектировать и построить отпайку ВЛИ-0,4 кВ.

Также ответчик обязался в течение 10 дней после уведомления потребителя проверить выполнение потребителем технологических условий присоединения, и не позднее 10 дней со дня проведения указанного осмотра осуществить фактическое присоединение электроустановок заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности. 

Стоимость технологического присоединения – 550 руб., уплачена истцом в полном объеме XX.XX.XXXX, что подтверждается платежным поручением. 

Срок технологического присоединения согласно типовым условиям договора составляет 6 месяцев и истек XX.XX.XXXX.

В феврале 2022 года, марте 2022 года истец выражал готовность к технологическому присоединению электроустановок, однако ответчиком выполнение подключения не произведено. 

XX.XX.XXXX ответчиком ПАО «Россети Северо-Запад» в адрес ФИО1 направлен ответ на обращение, согласно которому в связи с неблагоприятной экономической обстановкой срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению необходимо продлить до XX.XX.XXXX. 

XX.XX.XXXX ответчиком ПАО «Россети Северо-Запад» в адрес ФИО1 направлен ответ на обращение, согласно которому в связи с неблагоприятной экономической обстановкой срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению необходимо продлить до XX.XX.XXXX. 

Постановлением Управления антимонопольной службы по Новгородской области от 

<

данные изъяты> ответчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> руб. за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выразившегося в нарушении ответчиком установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям по договору с ФИО1

Разрешая заявленные исковые требования, суд, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, приходит к выводу об их обоснованности, поскольку в нарушение т. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчиком не представлено доказательств исполнения договора 

<

данные изъяты> от XX.XX.XXXX, заключённого с ФИО1

При этом доводы ответчика о финансовом положении общества не могут быть приняты во внимание и положены в основу освобождения ответчика об договорных обязательств или для изменения сроков исполнения обязательств, установленных сторонами в договоре. 

При таких обстоятельствах, поскольку срок исполнения обязательств по договору истек XX.XX.XXXX, следует обязать ПАО «Россети Северо-Запад» в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу за свой счет осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

данные изъяты>

На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в сумме 300 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу за свой счет осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

данные изъяты>.

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья: Д.Г. Дерягина

Мотивированное решение изготовлено 22 сентября 2023 года.