Копия УИД №--

Дело №--

2.219

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

27 июня 2024 года город Казань

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Зубковой Ю.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов,

у с т а н о в и л:

публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов.

В обоснование исковых требований указано, что --.--.---- г. между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1 на основании заявки ответчика, которая была подана через личный кабинет заявителя на http://портал-тп.pф, был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №--.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика - ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения склада, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 130 кВт; категория надежности - III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 0 кВт; расположенных по адресу: ... ..., кадастровый номер земельного участка №--.

Ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению.

Bo исполнение договора ответчику были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Пунктами 11.1 - 11.10 технических условий определено, что ответчик должен осуществить:

- проектирование и строительство ВЛ - 10кВ от поры № 138 ВЛ-1006 ПС 110 кВ Памъялы;

- монтаж ТП-10/0,4 кВ. Тип ТП-10/0,4 кВ, место установки, установки защитно-коммутационной аппаратуры определить проектом;

- проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемого ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта;

- разработку проектной документации на электроснабжение объекта Заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) на объекте электроснабжения в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (тип ВРУ-0,4 кВ, тип и объем оснащения устройствами релейной защиты, изоляции и зашиты от перенапряжения, установки защитно-коммутационной аппаратуры);

- запроектировать и реализовать необходимый объем РЗА для вновь устанавливаемого оборудования. Выполнить расчет установок вновь устанавливаемых устройств РЗА на объекте и их привязку к устройствам РЗА питающих центров;

- запроектировать и реализовать схему электроснабжения энергопринимающих устройств на объекте заявителя на напряжении 0,4 кВ, обеспечивающую надежность электроснабжения в соответствии с заявленной категорией надежности электроснабжения;

- нa устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя;

- проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с сетевой организацией от нормативных вследствие подключения электроустановок заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей;

- после проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» для осмотра.

Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ своего участка (пункт 11.9 технических условий).

В силу пункта 8 договора ответчик обязался надлежащим образом исполнить свои обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях, и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора.

Истец указывает, что ответчик не исполнил возложенные на него обязательства по договору, не осуществил в установленный срок и вплоть до настоящего времени мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка. Технологическое присоединение может быть окончено сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств самого ответчика.

Неисполнение ответчиком пункта 8 договора, пунктов 11.1-11.10 технических условий является существенным нарушением договора, поскольку сетевая организация фактически лишается возможности осуществить подключение энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям истца для последующей передачи электрической энергии.

--.--.---- г. в адрес ответчика было направлено требование о расторжении договора. Ответ в установленный срок не получен.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от --.--.---- г. №--, заключенный между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1; взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины.

В судебное заседание стороны не явились, извещены.

Согласно частям 1 и 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

В силу части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Учитывая, что ответчик ФИО1, извещенная надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, не сообщила об уважительности причин неявки и не просила об отложении рассмотрения дела, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Как предусмотрено статьёй 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что --.--.---- г. между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1 на основании заявки ФИО1 от --.--.---- г. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №--, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения склада, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 130 кВт; категория надежности - III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 0 кВт; расположенных по адресу: ... ..., кадастровый номер земельного участка №--.

Пунктом 4 договора предусмотрено, что неотъемлемой частью договора являются технические условия. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Из содержания пункта 8 договора следует, что заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическиму присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации.

В соответствии с пунктами 11.1 - 11.10 технических условий для присоединения к электрическим сетям от --.--.---- г. к договору №-- от --.--.---- г., заявитель осуществляет:

- проектирование и строительство ВЛ - 10кВ от поры № 138 ВЛ-1006 ПС 110 кВ Памъялы;

- монтаж ТП-10/0,4 кВ. Тип ТП-10/0,4 кВ, место установки, установки защитно-коммутационной аппаратуры определить проектом;

- проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемого ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта;

- разработку проектной документации на электроснабжение объекта Заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) на объекте электроснабжения в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (тип ВРУ-0,4 кВ, тип и объем оснащения устройствами релейной защиты, изоляции и зашиты от перенапряжения, установки защитно-коммутационной аппаратуры);

- запроектировать и реализовать необходимый объем РЗА для вновь устанавливаемого оборудования. Выполнить расчет установок вновь устанавливаемых устройств РЗА на объекте и их привязку к устройствам РЗА питающих центров;

- запроектировать и реализовать схему электроснабжения энергопринимающих устройств на объекте заявителя на напряжении 0,4 кВ, обеспечивающую надежность электроснабжения в соответствии с заявленной категорией надежности электроснабжения;

- нa устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя;

- проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с сетевой организацией от нормативных вследствие подключения электроустановок заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей;

- после проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» для осмотра.

Пунктом 11.9 технических условий определено, что указанные мероприятия по реализации технических условий заявитель должен исполнить в пределах границ своего участка.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору, истцом --.--.---- г. направлено адрес ответчика соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от --.--.---- г. №-- (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80094593489539).

Какого-либо ответа от ФИО1 не последовало.

Разрешая спор по существу, суд исходит из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в соответствии со статьями 21 и 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом «г» пункта 25 (1) Правил присоединения установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Допустимых и относимых доказательств совершения каких-либо действий по исполнению договора ответчиком не представлено.

При отсутствии встречного исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №-- со стороны ответчика, ПАО «Россети Центр и Приволжье» лишено возможности осуществить подключение электропринимающих устройств ответчика к электрическим сетям истца для последующей передачи электрической энергии.

Срок для выполнения технических условий истек.

В связи с изложенным, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, условия заключенного между сторонами договора, с учетом того, что обязательство по договору ответчиком не исполнено, суд полагает исковые требования о расторжении договора технологического присоединения к электрическим сетям №-- от --.--.---- г. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании статьей 88, 94, 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., несение которых подтверждено платежным поручением №-- от --.--.---- г..

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

исковые требования публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов удовлетворить. 

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от --.--.---- г. №--, заключенный между публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 (паспорт: ---) в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: подпись Ю.Н. Зубкова 

Копия верна. 

Судья Ю.Н. Зубкова

Мотивированное заочное решение изготовлено 4 июля 2024 года.