Дело №2-299/2025

10RS0013-01-2025-000002-74

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

27 февраля 2025 года город Петрозаводск

Прионежский районный суд Республики Карелия в составе:председательствующего судьи Овсовой Л.В.,при секретаре Галашовой А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Амперия» о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд по тем основаниям, что хх.хх.хх г. между истцом и ООО «Амперия» был заключен договор строительного подряда №, согласно условий которого ответчик обязался выполнить комплекс работ по строительству индивидуального одноэтажного каркасного дома на земельном участке с кадастровым номером №, местонахождение земельного участка: Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок по генплану № расположен в юго-восточной части кадастрового квартала №. Стороны определили сроки выполнения работ по договору в дополнительном соглашении № от хх.хх.хх г. к договору. Стоимость работ по договору сторонами определена в сумме 7611280 руб. Истец выполнил свои обязательства по договору, частично оплатив работы ответчика хх.хх.хх г. в размере 2177450 руб., хх.хх.хх г. в размере 1316700 руб. Ответчик свои обязательства по договору подряда в установленные сроки не выполняет. На основании обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, ФИО1, со ссылкой на положения Закона РФ «О защите прав потребителя» просит взыскать с ООО «Амперия» неустойку по договору подряда в размере 6832167,32 руб.

В ходе рассмотрения дела истец требования уточнил, просил взыскать с ответчика неустойку по договору подряда в сумме 7611280 руб.

В судебное заседание истец и его представитель не явились, извещались судом о времени и месте судебного разбирательства, ходатайствовали о рассмотрении дела в свое отсутствии, не возражали против вынесения по делу заочного решения.

Ответчик в судебное заседание своего представителя не направил, извещался судом о времени и месте рассмотрения дела.

Поскольку судом были предприняты предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) меры уведомления о рассмотрении дела и возможности его разбирательства в присутствии ответчика, а последним не было принято должных мер к реализации процессуальных прав, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ, суд, принимая во внимание положения ст.ст. 167, 233-235 ГПК РФ, ст. 165.1 ГПК РФ, отсутствие уважительных причин неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, приходит к выводу о рассмотрении дела заочно, по имеющимся доказательствам, с тем, чтобы отсутствующая сторона при наличии обоснованных возражений имела возможность обратиться с заявлением об отмене заочного решения и представить свои доводы и доказательства, их подтверждающие, и считает возможным рассмотреть данное дело в порядке заочного производства.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 425 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Согласно ст. 703 Гражданского кодекса РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В силу ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1). Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (п.2). Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п.3).

Судом установлено, что хх.хх.хх г. между ФИО1 (заказчик) и ООО «Амперия» (подрядчик) был заключен Договор строительного подряда №, согласно условий которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству индивидуального одноэтажного каркасного дома на земельном участке с кадастровым номером №, местонахождение земельного участка: Республика Карелия, Прионежский район, земельный участок по генплану № расположен в юго-восточной части кадастрового квартала №, из своих материалов своими силами или с привлечением третьих лиц в объеме по перечню работ, перечисленном в Приложении № к Договору, и в соответствии с Проектной документацией (Приложение №), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям Договора.

Пунктом 2.1 договора установлено, что подрядчик обязан приступить к выполнению работ после подписания сторонами Акта приема-передачи строительной площадки, Акта согласования размещения объекта на земельном участке заказчика при условии внесения заказчиком платежей, предусмотренных п.4.1 договора.

Срок выполнения работ по договору установлена 11 месяцев с даты начала исчисления срока выполнения работ подрядчиком, определяемой в соответствии с п.2.1 Договора (п.2.2 Договора).

Пунктом 4 договора установлена цена работы, предусмотренной договором, определена в сумме 7 611 280 руб.

Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: Заказчик осуществляет авансовый платеж за Домокомплект, оплачивая пункты п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, указанные в Приложению №, от стоимости Договора в течение 3 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, Заказчик производит оплату авансового платежа от стоимости работ определенной в п. 4.1. настоящего Договора, в сумме 2 177 450 руб.; оплата очередного авансового платежа в сумме 1 316 700 руб. осуществляется Заказчиком в срок до хх.хх.хх г.; оплата очередного авансового платежа в сумме 1 758 834 руб. осуществляется Заказчиком в срок до хх.хх.хх г.; оплата очередного авансового платежа в сумме 1 094 271 руб. осуществляется Заказчиком в срок до хх.хх.хх г.; оплата очередного авансового платежа в сумме 564 102 руб. осуществляется Заказчиком в срок до хх.хх.хх г.; в течение 3 рабочих дней с даты подписания между Сторонами Актов приемки выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору, а также дополнительных работ, Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком в сумме 699 923 руб.

Приложением № к Договору строительного подряда № от хх.хх.хх г. установлен перечень работ, необходимых произвести подрядчику по Договору подряда:

Перечень работ 

Дом индивидуальный каркасный, площадь 185,37 м2 

№п/п 

Наименование и техническая характеристика оборудованияи видов работ 

Комплект (стены, кровля) 

1 

Монтаж панелей 

2 

Панель доска 195*45 

3 

Панель доска 95*45 

4 

Панель доска 145*45 

5 

Монтаж ферм-балок 

6 

Фермы стропильные 

2177450 

СтеныО 

7 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных 

8 

Утеплитель 

9 

Монтаж пароизоляционного материала (рулонного) 

10 

Пароизоляционный материал (рулонный) 

11 

Обшивка каркасных стен плитами ветро-влагоизоляционными 

12 

Ветро-влагоизоляционная плита ’Белтермо 25мм 

13 

Устройство обрешётки внутренней 

14 

Рейка 20*40 

15 

Устройство обрешётки наружной 

16 

Рейка 25*40 

Итого 

1282644 

Кровля 

17 

Устройство покрытия кровли металлочерепицей 

18 

Металлочерепица 

19 

Монтаж фасонных изделий 

20 

Конёк 

21 

Ветровая планка 

22 

Капельная планка 

23 

Устройство обрешетки с прозорами из досок или брусков под кровлю 

24 

Доска 100*25 (100x32) 

25 

Устройство контробрешетки с прозорами из досок или брусков под кровлю 

26 

Брусок 45*45 (50x50) 

27 

Устройство ветро-влагозащиты 

28 

Ветро-влагозащита мембранная 

29 

Устройство карнизов, свесов 

30 

Простая окраска (антисептическими, укрывными составами по дереву) карнизов, свесов/7 

31 

Тikkunilavinha 9 л или аналог ( RAL по проекту) 

32 

Планкен 95*20 

Итого 

1036338 

Перекрытие 

33 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных 

34 

Утеплитель КоскигооШайтБаттсСкандик, либо аналог по характеристикам 

35 

Устройство пароизоляции перекрытия и кровли (рулонной) 

36 

Пароизоляция (рулонная) 

37 

Устройство обрешётки внутренней 

38 

Рейка 20*40 

Итого 

476190 

Проемы 

Окна 

39 

Монтаж окон 

40 

Окна, двери ПВХ (согласно спецификации в проекте) 

41 

Расходные материалы для монтажа 

42 

Облицовка оконных и дверных откосов 

43 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали сполимерным покрытием 

44 

Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

1061271 

Двери 

45 

Монтаж входной двери 

46 

Дверное полотно 2050x960 

47 

Расходные материалы для монтажа 

Итого 

33000 

Внутренняя отделка 

48 

Монтаж листов ГКЛ в два слоя, стены 

49 

Гкл 12,5мм, стены 

Итого 

498779 

Инженерные сети 

Водопровод 

50 

Прокладка трубопроводов водоснабжения труб 

51 

Материалы 

Итого 

122100 

Электромонтажные работы 

52 

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты кабелей 

53 

Протяжка провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2 

54 

Кабель 3*1,5 ВВГ 

55 

Кабель 3*2,5 ВВГ 

56 

Кабель ВВГнг 1_$ 5x4 

57 

Трубы гибкие гофрированные... /1.. .. V/.. ... . 

58 

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм 

59.. 

Монтаж подрозетников /7 

60 

Подрозетмики 

61 

Коробка распределительная настенная для кабеля с пластмассовой оболочкой 

62 

Короба 

63 

Щиток с 1 вводным автоматом 

64 

Монтаж элетрощитка 

Итого 

442002 

Терраса 

Столбы 

65 

Установка элементов каркаса из доски 

66 

доска 95*45 

Полы 

67 

брус 50*50 

68 

уголок усиленный 105*105*90*2 

69 

опора бруса раскрытая 107*76*50 

70 

опора бруса раскрытая 160*76*100 

71 

Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 

72 

Доска террасная вельвет(хвоя) 

Итого 

273121 

Водосточная система 

73 

Устройство желобов подвесных пластиковых, труб водосточных цвет графит 

74 

Материалы 

Итого 

208385 

Итого: 

7611280 

Дополнительным соглашением № от хх.хх.хх г. к договору строительного подряда № от хх.хх.хх г. стороны договорились изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Срок выполнения работ по Договору складывается из этапов выполнения работ. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п. 6 Приложения № к Договору в срок до хх.хх.хх г.:

- Подрядчик выполняет работы, указанные в п.7,.п.8, п.9, п.10, п. 11, п.12, п. 13, п.14, п.15, п. 16 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.;

- Подрядчик выполняет работы, указанные в п.17, п. 18, п.19, п.20, п. 21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п. 30, п.31, п,32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.38 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.:

- Подрядчик выполняет работы, указанные в п.39, п.40, п.41, п. 42, п.43, п. 44. п. 45, п. 46, п.47 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.;

- Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п.53, п.54, п. 55, п.56, п.57, п.58, п.59, п. 60, п. 61, п.62, п. 63, п.64 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.;

- Подрядчик выполняет работы, указанные в п.65, п. 66. п.67, п. 68, п.69, п.70, п. 71. п.72, п.73, п. 74 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.».

Стороны договорились изложить п. 4.3.3 Договора в следующей редакции: «оплата очередного авансового платежа в сумме 1758834 руб. осуществляется заказчиком в срок до хх.хх.хх г. при условии поставки и монтажа домокоплекта в срок до хх.хх.хх г. При нарушении срока поставки и монтажа домокомплекта, указанного в настоящем пункте соглашения, оплата авансового платежа в сумме 1758834 руб. осуществляется заказчиком со сдвигом срока платежа (хх.хх.хх г.) на количество дней просрочки с хх.хх.хх г. до момента подписания сторонами акта выполненных работ по поставке и монтажу домокомплекта».

3. Стороны договорились изложить п. 4.3.4 Договора в следующей редакции: «оплата очередного авансового платежа в сумме 1094271 руб. осуществляется Заказчиком в срок до хх.хх.хх г.

Стороны договорились изложить п.4.3.4 договора в следующей редакции: оплата очередного авансового платежа в сумме 564102 осуществляется заказчиком в срок до хх.хх.хх г.

Дополнительным соглашением № от хх.хх.хх г. к договору строительного подряда № от хх.хх.хх г. стороны договорились изложить п. 4.3.4 Договора в следующей редакции: «оплата очередного платежа в сумме 1094271 руб. осуществляется заказчиком в срок до хх.хх.хх г. при условии выполнения и сдачи Подрядчиком работ, указанных в п.7, п.8, п.9, п.10, п. 11, п.12, п. 13, п.14, п.15, п.16 Приложения № к Договору в срок до хх.хх.хх г.; указанных в п.17, п. 18, п. 19, п.20, п. 21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п. 30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.38 Приложения № к Договору в срок до хх.хх.хх г.; указанных в п.39, п.40, п.41, п. 42, п.43, п. 44, п. 45, п. 46, п.47 Приложения № к Договору в срок до хх.хх.хх г.. При нарушении сроков выполнения и сдачи подрядчиком указанных в настоящем пункте работ, оплата в сумме 1094271 руб. осуществляется заказчиком со сдвигом срока платежа (хх.хх.хх г.) на количество дней просрочки с хх.хх.хх г. до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ/части работ, указанных в п.39, п.40, п.41, п. 42, п.43, п. 44, п.45, п. 46, п.47 Приложения № к Договору». Стороны договорились изложить п. 4.3.5 Договора в следующей редакции: «оплата очередного платежа в сумме 564102 руб. осуществляется заказчиком в срок до хх.хх.хх г. при условии выполнения и сдачи подрядчиком работ, указанных в и. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п.53, п.54, п. 55, п.56, п.57, п.58, п.59, п. 60, п. 61, п.62, п. 63, п.64 Приложения № в срок до хх.хх.хх г.. При нарушении сроков выполнения и сдачи подрядчиком указанных в настоящем пункте работ, оплата в сумме 564102 руб. осуществляется заказчиком со сдвигом срока платежа (хх.хх.хх г.) на количество дней просрочки с хх.хх.хх г. до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ/части работ, указанных в п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п.53, п.54, п. 55, п.56, п.57, п.58, п.59, п.60, п. 61, п.62, п. 63, п.64 Приложения № к Договору».

По Акту приема-передачи строительной площадки для выполнения строительно-монтажных работ от хх.хх.хх г., при осмотре строительной площадки на земельном участке с кадастровым номером №, сторонами было установлено, что строительная площадка отвечает всем необходимым требованиям для производства работ, предусмотренных Договором Подряда № от хх.хх.хх г. на выполнение комплекса работ от хх.хх.хх г.. С момента подписания Акта ООО «Амперия» приняло на себя полную ответственность за использование строительной площадки. Претензий к состоянию и доступу к строительной площадке у ООО «Амперия» к ФИО1 не имелось.

Истец выполнил свои обязательства по частичной оплате цены работы, предусмотренной Договором, в установленные сторонами сроки (п.4.1, 4.3 Договора, Дополнительное соглашение № от хх.хх.хх г., Дополнительное соглашение № от хх.хх.хх г.), оплатив ответчику хх.хх.хх г. сумму 2000000 руб., хх.хх.хх г. сумму 177450 руб., хх.хх.хх г. сумму 1316700 руб., что подтверждается кассовыми чеками, в материалах дела.

При этом ответчиком свои обязательства по договору выполнены не были.

хх.хх.хх г. ФИО1 направил в адрес ООО «Амперия» претензию с требованием о предоставлении информации об этапах выполнения работ.

Письмом от хх.хх.хх г. ООО «Амперия» ответило истцу, что в период с хх.хх.хх г. по хх.хх.хх г. будет осуществлен монтаж наружных и внутренних стен, с хх.хх.хх г. по хх.хх.хх г. ожидается поставка ферм и их последующий монтаж на объекте, до хх.хх.хх г. планируется приступить к монтажу кровли.

хх.хх.хх г. ФИО1 вновь направил в адрес ответчика претензию с требование начать производство работ по договору.

В ответ на претензию от хх.хх.хх г. ООО «Амперия» указало, что выполнит свои обязательства по строительству индивидуального каркасного дома в срок, установленный договором в полном объеме, т.е. до хх.хх.хх г. без претензий со стороны истца в части возможных финансовых санкций к ООО «Амперия» либо ООО «Амперия» выполнит работы согласно приложению № к Договору до пункта 28 включительно, после чего ООО «Амперия» готово расторгнуть с ФИО1 строительного подряда по соглашению сторон с выплатой 5% от цены договора согласно п.8.2.

Часть 1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Согласно ч.1 ст.67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Ответчиком, на которого возложено соответствующее бремя доказывания в соответствии со статьями 56 и 57 ГПК РФ не представлены доказательства, свидетельствующие об исполнении своих обязательств по договору подряда от хх.хх.хх г.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Положениями ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" установлено, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором (п. 1).

Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором (п. 2).

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем (п. 3).

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 4).

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1, Закон О защите прав потребителей) в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Таким образом, на основании выше изложенных норм права, поскольку судом установлено, что обязательства по договору ответчиком надлежащим образом не исполнены, суд приходит к выводу об удовлетворении требований потребителя и взыскании с ответчика в пользу истца суммы неустойки. 

Согласно расчету истца, проверенному судом, размер неустойки на дату хх.хх.хх г. составляет в сумме 7611280 руб.

Принимая во внимание просрочку исполнения обязательства по договору в отсутствие оснований для освобождения ответчика от гражданской правовой ответственности, суд считает возможным взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, вместе с тем, поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, суд приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании с ответчика неустойки в части в размере, не превышающем оплаченной суммы работ 3494150 руб.

В соответствии с п. 42 постановления Пленумов Верховного Суда РФ N 6 и Высшего Арбитражного Суда РФ N 8 от 1 июля 1996 года при разрешении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда первой инстанции и производится им по правилам ст. 67 ГПК РФ, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По смыслу нормы статьи 333 ГПК РФ уменьшение неустойки является правом, а не обязанностью суда. При этом к выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки суд приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и непосредственном их исследовании.

В пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).

При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

В соответствии с п. 73 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ бремя доказывания несоразмерности неустойки возлагается на ответчика.

С учетом изложенного, поскольку ответчиком о несоразмерности размера взыскиваемой неустойки не заявлено, у суда не имеется оснований для снижения размера штрафных санкций.

В силу п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Истец в соответствии с под.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ освобождена от уплаты государственной пошлины, ответчик от уплаты судебных расходов в соответствии с налоговым законодательством не освобожден, в связи с чем, с него подлежит в бюджет Прионежского муниципального района взысканию государственная пошлина в размере 48459,05 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-197, 234 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амперия» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) сумму неустойки по договору строительного подряда № от хх.хх.хх г. в размере 3494150 руб., штраф в размере 1747075 руб.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амперия» (ИНН 

<

***>) в бюджет Прионежского муниципального района государственную пошлину в размере 48459,05 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Л.В.Овсова 

Решение принято судом в окончательной форме 28.02.2025.