Дело №2-5234/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 декабря 2019 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Холониной Т.П.,

при секретаре Козловой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Янтарьэнерго» о возложении обязанности выполнить условия договора, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд, указывая, что 30.03.2015 г. заключила с АО «Янтарьэнерго» договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств ЩВУ объекта – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

 адрес >. Произвела оплату по договору в размере 550 рублей. В 2015 году 

<

 ИЗЪЯТО > по её заказу был разработан рабочий проект электроснабжения принадлежащего ей жилого дома. Обратилась в АО «Янтарьэнерго» с уведомлением об исполнении своей части технических условий. 30.03.2019 обратилась в АО «Янтарьэнерго» с претензией об осуществлении технологического присоединения жилого дома. Ответчик свои обязательства не выполнил.

С учетом уточненных исковых требований просит обязать АО «Янтарьэнерго» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома, взыскать неустойку в сумме 869,65 рублей за период с 01.10.2015 по 01.07.2019, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей, штраф в размере 50% от денежной суммы, присужденной судом.

В судебное заседание истица не явилась, извещена о рассмотрении дела надлежащим образом, просит рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель истицы по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала, представила письменный отзыв по иску, пояснила, что АО «Янтарьэнерго» предпринимает все возможные и необходимые меры для исполнения обязательств по договору технологического присоединения, причиной длительного невыполнения технологического присоединения со стороны ответчика является отсутствие возведенных электросетевых объектов по указанному титулу строительства и неисполнение своих обязательств подрядчиком. В целях выполнения обязательств по договору от 30.03.2015 № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств ИЖД ФИО1, расположенного по адресу: 

<

 адрес > со стороны АО «Янтарьэнерго» разработано и утверждено техническое задание 

<

 ИЗЪЯТО >. После проведения конкурентных процедур был заключен договор подряда № от 17.07.2017 с 

<

 ИЗЪЯТО > на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования сроком 90 дней с момента подписания договора. Кроме того, срок исполнения договора 6 месяцев с момента подписания договора, однако уведомление о выполнении своей части ТУ в АО»Янтарэнерго» истица предоставила 18.07.2019 с просрочкой 1387 дней, истцом не представлены доказательства исполнения своих обязательств по договору в срок поэтому неустойка может быть рассчитана с 30.03.2019 с даты подачи уведомления по 01.07.2019 за 93 дня согласно п.17 договора. Доказательств причинения морального вреда также истицей не представлены.

Выслушав стороны, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства и дав им оценку в соответствии с требованиями ст.67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что истица ФИО1 является собственником индивидуального жилого дома, общей площадью 

<

 ИЗЪЯТО > расположенного по адресу: Калининградская 

<

 адрес >, и земельного участка, площадью 

<

 ИЗЪЯТО > расположенного по адресу: 

<

 адрес >

30.03.2015 г. между АО «Янтарьэнерго» и ФИО1 заключен договор 

<

 ИЗЪЯТО > об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ЩВУ объекта – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

 адрес > неотъемлемой частью договора являются технические условия 

<

 ИЗЪЯТО >

По условиям договора и технических условий АО «Янтарьэнерго» обязалось для электроснабжения индивидуального жилого дома осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ЩВУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, 

- категория надежности – третья, 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, 

- точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям зажим провода на опоре № ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ПС 41.

В соответствии с п.5 договора, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

ФИО1 обязалась оплатить расходы за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора в размере 550 рублей, выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. 

Согласно техническим условиям на заявителя возложена обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения через (через ЩВУ) до ВРУ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. На вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью, установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройства, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. 

Срок действия технических условий - 5 лет со дня заключения договора.

Сетевая организация в целях присоединения нового потребителя обязалась группу в РУ 0,4 кВ ПС В 41 оборудовать предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью, от ПС В 41 до участка застройки заявителя построить ВЛИ с СИП 0,4 кВ (трассу ВЛИ, марку и сечение определить проектом, протяженность 420м).

ФИО1 произвела оплату по договору в размере 550 рублей. В 2015 году по заказу ФИО1 

<

 ИЗЪЯТО >» был разработан рабочий проект электроснабжения принадлежащего ей жилого дома, который был согласован в АО «Янтарьэнерго» 14.08.2015.

03.03.2019 ФИО1 обратилась в АО «Янтарьэнерго» с заявлением по вопросу об осуществления технологического присоединения в рамках заключенного договора, на что получила ответ от 04.03.2019 года, в котором указано, что в рамках выполнения обязательств по указанному договору со стороны АО «Янтарьэнерго» разработано техническое задание по титулу: разработано и утверждено техническое задание 

<

 ИЗЪЯТО > После проведения конкурентных процедур был заключен договор подряда № от 17.07.2017 с 

<

 ИЗЪЯТО > на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования сроком 90 дней с момента подписания договора. Планируемый срок завершения мероприятий по договору II квартал 2019 года. 

18.07.2019 ФИО1 обратилась в АО «Янтарьэнерго» с уведомлением об исполнении технических условий.

До настоящего времени технологическое присоединение индивидуального жилого дома согласно договора № от 30.03.2015, технических условий №, АО «Янтарьэнерго» не осуществлено.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение требований федерального законодателя постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 утверждены Правила (действуют в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. N 682).

Нормативный правовой акт опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 27 декабря 2004 г., N 52 (часть 2), "Российской газете" 19 января 2005 г.

Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации (пункт 1 Правил).

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. 

Согласно п.16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению. 

Согласно п. 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

В соответствии с п.п. «д» п.18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В соответствии с положениями п.85 раздела IX указанных Правил, введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 №130, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

В силу п.86 раздела IX указанных Правил документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

После получения уведомления и необходимой документации, подтверждающей выполнение технических условий, сетевая организация в соответствии с п.87 указанных Правил рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.

В силу п. 6 договора, заключенного между сторонами, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Подпунктом "г" пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Как следует из материалов дела, ответчиком в сроки, установленные договором, не были проведены работы в соответствии с пунктом 10 вышеназванных технических условий, где должна располагаться точка присоединения, что не позволяет осуществить истцу подвод кабеля к ней и установить необходимое электрооборудование.

Таким образом, из положений технических условий и рабочей документации с учетом специфики спорного правоотношения следует, что исполнение истцом принятых на себя в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения обязательств возможно только после исполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных пунктом 10 технических условий.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих АО "Янтарьэнерго" от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежала именно на ответчике, однако таких доказательств им представлено не было и суд такие обстоятельства не устанавливал.

Из ответа АО "Янтарьэнерго" следует, что неисполнение обязательств по договору вызвано необходимостью того, что в рамках выполнения обязательств по указанному договору со стороны АО «Янтарьэнерго» разработано и утверждено техническое задание 

<

 ИЗЪЯТО >. После проведения конкурентных процедур был заключен договор подряда № от 17.07.2017 с 

<

 ИЗЪЯТО > на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования сроком 90 дней с момента подписания договора. Планируемый срок завершения мероприятий по договору II квартал 2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

На неполучение встречного предоставления в виде исполнения ФИО1 своей части обязательства по заключенному договору и на приостановление в связи с этим исполнения по правилу пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации до обращения истца в суд за защитой нарушенного права ответчик не ссылался, таких доказательств суду не предоставлено.

С момента подачи истцом уведомления об исполнении его части технических условий АО «Янтарьэнерго» обязано осуществить проверку исполнения заявителем технических условий, далее в течение 10 рабочих дней ответчик обязан осуществить технологическое присоединение жилого дома. Поскольку на момент вынесения решения суда данное обязательство ответчиком не исполнено, постольку исковые требования об обязании осуществить технологическое присоединение жилого дома являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Учитывая фактические обстоятельства дела, суд полагает, что технологическое присоединение должно быть осуществлено в течение 2-х месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Неустойкой (штрафом, пеней) в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Определяя существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, пункт 16 Правил предусматривает, что договор должен содержать положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки).

Согласно п. 17 договора технологического присоединения, заключенного между сторонами, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в срок, предусмотренный договором, в течение 10 дней обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 % ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Договор технологического присоединения является публичным договором. Наличие публичного элемента в гражданско-правовых отношениях свидетельствует о том, что стороны отношений не в полной мере свободны в установлении своих прав и обязанностей, в определении условий договора. Такое ограничение может влиять и на возможность выбора альтернативных способов разрешения спора из таких отношений. Однако участники гражданских правоотношений в силу их диспозитивной природы должны иметь явное и однозначное представление о наличии такого ограничения (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 г.).

Размер неустойки, предусмотренной абзацем третьим пункта 16 Правил, не устанавливается сетевой организацией, является одинаковым для каждой из сторон технологического присоединения, зависит от количества дней, при которых имело место нарушение срока присоединения, поэтому суд полагает, что применению подлежит размер неустойки исходя из пункта 16 Правил. Размер неустойки за период с 01.10.2015 по 01.07.2019 составляет: 550 рублей х 5% х1370 дней=37675 рублей.

В силу ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Истцом заявлены требования о взыскании неустойки в сумме 869,65 рублей. При таких обстоятельствах суд полагает, что исковые требования о взыскании неустойки обоснованны и подлежат удовлетворению. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме 869,65 рублей.

Из абзаца первого преамбулы Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" о защите прав потребителей следует, что данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребителем согласно абзацу третьему преамбулы признается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем услуги прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. На момент вынесения решения суда ответчиком свои обязательства по осуществлению технологического присоединения жилого дома истца к электрическим сетям не исполнены. Учитывая вышеизложенное, когда ответчиком были нарушены права потребителя на своевременное исполнение договора, суд приходит к выводу, что последнему был причинен моральный вред, выразившийся в перенесенных им нравственных страданиях. 

С учетом степени характера допущенного непосредственно ответчиком нарушения, степени его вины, длительности и характера нарушения прав потребителя, нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 2000 рублей.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Размер штрафа составляет (2000+869,65) х 50% = 1434,82 рублей. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 1434,82 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме 700 рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать АО «Янтарьэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям индивидуальный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

 адрес >, в соответствии с договором № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.03.2015 года, технических условий № № в 2-х месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Янтарьэнерго» в пользу ФИО1 неустойку в сумме 869,65 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей, штраф в сумме 1434,82 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с АО «Янтарьэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г.Калининграда в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 10 декабря 2019 года.

Судья: Т.П. Холонина