Дело 2-1334/2023 

УИД 91RS0019-01-2023-000881-09

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 мая 2023 года г. Симферополь

Симферопольский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Сердюк И.В., 

при участии секретаря судебного заседания Петровой Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 Кизи к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

В марте 2023 года в Симферопольский районный суд Республики Крым поступило исковое заявление ФИО1 Кизи к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия. 

Исковые требования мотивированы тем, что 21 октября 2019 между сторонами заключен договор №460/45/005-3448-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому мероприятия по технологическому присоединению по настоящему договору осуществить в срок до 21 апреля 2020 года. 

В соответствии с условиями договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» обязалось произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на принадлежащем истцу земельном участке для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> кадастровый №, к электрическим сетям. Согласно условиям договора и Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 16.10.2019 указанные работы ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» должно выполнить в течение 6 месяцев. 

Истцу были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» от 16.10.2019, произведена оплата услуги технологического присоединения.

До настоящего времени ответчиком не выполнены обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям, что послужило поводом для обращения в суд с настоящим иском.

Истец в судебное заседание не явилась. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом, причин неявки суду не сообщила, заявлений об отложении дела слушанием не подавала.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, заявленные требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании указала, что ГУП РК «Крымэнерго» возражала против удовлетворения исковых требований, указав, строительно-монтажные работы выполнены, истцу предлагали заключить дополнительное соглашение для осуществления техприсоединения, просила установить 2 месяца для осуществление технологического соединения и подписания акта. 

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, и оценив в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению на основании следующих обстоятельств.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить уплатить эти услуги.

В силу статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35 - ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 (далее – Правила технологического присоединения).

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истцом ответчику подана заявка на технологическое присоединение №73127, разработаны технические условия для присоединения к электрическим сетям № 460/45/005-3448-19 от 16.10.2019, место нахождение объекта в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: индивидуальное жилищного строительство по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (л.д.8).

Между сторонами заключен договор № 460/45/005-3448-19, вступивший в силу 21 октября 2019 года, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно пункту 5 которого срок выполнения мероприятий по техприсоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (л.д.5-6).

Как усматривается из копии квитанции №126, ФИО4 15.03.2021 на счет ответчика перечислена сумма в размере 550 рублей за технологическое присоединение по договору №460/45/005-3448-19 от 21.10.2019, плательщик ФИО1 (л.д.7). 

Как усматривается из письма Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым от 21 марта 2023 года, в соответствии с постановлением администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 13 апреля 2021 года №69/02-07/21 «Об аннулировании и присвоении адреса объектам адресации – земельному участка №, площадью 600 кв.м. жилому дому №, площадью 236.9 кв.м.» адрес вышеуказанных земельного участка и здания изменены на з/у 

<

адрес> и 

<

адрес> соответственно (л.д.21).

Согласно выписке из ЕГРН, правообладателем объекта недвижимости - земельного участка с кадастровым номером №, площадью 600+/-9 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> является ФИО1 Энверкизи (л.д.26-29).

Учитывая вышеизложенное, требования истца подлежат удовлетворению. Суд полагает необходимым возложить на ответчика обязанность исполнить обязательство в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 98, частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика полежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины, от уплаты которой истец был освобожден, в доход бюджета Симферопольского муниципального района. Согласно положениям статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер подлежащий взысканию государственной пошлины составляет 300 рублей 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 Кизи к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия, удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору № 460/45/005-3448-19 от 21 октября 2019 года, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение устройств: индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес> (до принятия постановления Администрации Мирновского сельского поселения от 13 апреля 2021 года №69/02-07/21 «Об аннулировании и присвоении адреса объектам адресации – земельному участку №, площадью 600 кв.м., жилому дому №, площадью 236,9 кв.м» - 

<

адрес>), кадастровый №. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Симферопольского муниципального района расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами, прокурором и другими лицами, участвующим в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Крым через Симферопольский районный суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья И.В. Сердюк

Мотивированное решение суда составлено и подписано 03 мая 2023 года