Дело №2-719/25

УИД 18RS0006-01-2024-002773-41

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июня 2025 года г. Ижевск

Индустриальный районный суд г. Ижевска УР

под председательством судьи Суворовой В.Ю.

при секретаре судебного заседания Москвиной Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Ижевск» о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском о взыскании с ответчика АО «Газпром газораспределение Ижевск» (с учетом заявления об изменении исковых требований) неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 115 741,88 рублей, компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей, убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работ, в размере 36 657,05 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Требования мотивированы тем, что 14 марта 2023 года истцом заключен договор №01-23 (ТП)/1127 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, исполнителем пор договору является АО «Газпром газораспределение Ижевск». По указанному договору в рамках догазификации (далее по тексту – договор о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков. В соответствии с приложением №23-дгз-1203/2023 к договору №01-23(ТП)/1127 от 14 апреля 2023 года исполнитель осуществляет, в том числе мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка заявителя, поставке и установке газоиспользующего оборудования, поставке и установке прибора учета газа. Плата за подключение согласно договору и дополнительному соглашению №1 от 29 августа 2023 года составила 115 741,88 рублей. Все работы оплачены полностью и в срок в соответствии с договором. В ходе исполнения договора исполнитель нарушил сроки исполнения договора. Кроме того, нарушены сроки поставки и установки газоиспользующего оборудования с 30 декабря 2023 года по 16 января 2024 года (18 дней). Само подключение (технологическое присоединение) осуществлено 07 марта 2024 года, что подтверждается подписанным актом о подключении от указанной даты. При этом размер убытков составляет 36 657,05 рублей, из которых 29 299,20 рублей - дополнительные, незапланированные расходы (убытки) на отопление жилого дома с помощью электрического котла, на приготовление пищи с помощью электрической варочной панели и расходы на подогрев воды с помощью электрического водонагревателя, 4 357,85 рублей - пени, начисленные АО «ЭнергосбыТ Плюс» за просроченную оплату счетов с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года в размере 5 357,85 рублей, 3 000 рублей - оплата за восстановление электроснабжения. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, который истец оценивает в 15 000 рублей. 25 марта 2024 года истец обратился к ответчику с претензией о возмещении убытков и неустойки, которая ответчиком оставлена без удовлетворения. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. 

В судебное заседание не явился представитель третьего лица, извещался надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. 

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал с учетом уточнений по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика ФИО2, действующий на основании доверенности, исковые требования признал частично, не оспаривая срок нарушения обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, поддержал приобщенные к материалам дела письменные возражения на исковое заявление, согласно которым полагал, что для определения факта наличия убытков необходимо установить размер платы, которую истец уплачивал бы при наличии системы газоснабжения за отопление и горячее водоснабжение, а также размер платы при использовании для этих целей электрокотла с подогревом воды, без учета иных электроприборов в доме. Расчет убытков, представленный истцом, является некорректным, поскольку в своем расчете убытков истец сравнивает размер оплаченной электроэнергии в спорный период с нормативами потребления электроэнергии для освещения дома, потребления газа для приготовления пищи, отопления. Указанный расчет носит вероятностный характер и не может являться надлежащим доказательством несения истцом убытков. Также считал необоснованным включение в состав убытков истца платы за восстановление электроснабжения (отключение/подключение), а также начисленных пеней по оплате электроэнергии, поскольку несение истцом указанных расходов не находится в прямой причинно-следственной связи с действиями ответчика. Ответчик не несет ответственность за платежную дисциплину истца по оплате принятой им электроэнергии. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В силу ст. 2 Федерального закона от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабжении) система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа; газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

В ст. 6 Закона о газоснабжении определено, что единая система газоснабжения представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, и находится в собственности организации, образованной в установленных гражданским законодательством организационно-правовой форме и порядке, получившей объекты указанного комплекса в собственность в процессе приватизации либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Единая система газоснабжения является основной системой газоснабжения в Российской Федерации, и ее деятельность регулируется государством в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 8 указанного закона установлено, что Правительство Российской Федерации, в том числе, утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям; устанавливает принципы формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по газотранспортным и газораспределительным сетям.

Одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности (ст. 4 Закона о газоснабжении).

В силу ст. 23.2 Закона о газоснабжении государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения, урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (далее – Правила №1547). 

Согласно п. 2 Правил №1547 догазификация - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. 

В соответствии с п. 53 Правил №1547 для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

Указанным разделом VII определены особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации. 

В силу п. 121 Правил №1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

В соответствии с п. 122 Правил №1547, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 123 Правил №1547, в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 5 Правил №1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с подп. «б» п. 52 Правил №1547 договор о подключении должен содержать условие о сроках осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), а также положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами (подп. «ж» п. 52 Правил №1547).

Порядок разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций урегулирован Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года №903 (далее – Правила №903). 

В соответствии с п. 3 Правил №903 разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с организацией - собственником Единой системы газоснабжения и единым оператором газификации (региональным оператором газификации).

Пунктом 7 Правил №903 установлено, что программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации (руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела:

ФИО1 на праве собственности принадлежит жилой дом, расположенный по адресу .... 

08 декабря 2022 года между АО «Газпром газораспределение Ижевск» и ФИО1 заключен договор №01-23(ТП)/5626 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении домовладения по адресу ... согласно которому АО «Газпром газораспределение Ижевск» обязалось на безвозмездной основе осуществить строительство сети газораспределения до границы земельного участка, принадлежащего ФИО1, осуществить технологическое присоединение, в свою очередь, строительство сети газопотребления внутри границ земельного участка, а также в домовладении лежало на ФИО3 

24 января 2023 года Государственным Советом Удмуртской Республики принят закон Удмуртской Республики «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Удмуртской Республики, в виде компенсации расходов на выполнение мероприятий по строительству газопровода внутри границ земельного участка и (или) на приобретение газоиспользующего оборудования», согласно которому определенным категориям граждан компенсируются расходы на строительство сети газопотребления внутри границ земельного участка в размере 100 000 рублей. 

10 марта 2023 года ФИО1 в адрес АО «Газпром газораспределение Ижевск» направлено письмо о расторжении договора подключения №01-23(ТП)/5626 от 08 декабря 2022 года в связи с намерением заключить новый комплексный договор подключения, включающий как строительство сети газораспределения до границы земельного участка, так и внутри границ земельного участка, тем самым получить возможность на реализацию своего права на получение субсидии в размере 100 000 рублей, поскольку обладал статусом члена многодетной семьи. 

15 марта 2023 года подписано соглашение о расторжении указанного договора подключения по соглашению сторон. 

14 апреля 2023 года между АО «Газпром газораспределение Ижевск» (исполнителем) и ФИО1 (заявителем) заключен договор №01-23(ТП)/1127 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков либо газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилом дом (ИЖС), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п. 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»), расположенного УР, ..., а единый оператор газофикации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п.1). 

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства и пуску газа составляет 29 декабря 2023 года со дня заключения настоящего договора (п.3). 

Исполнитель обязан, в том числе: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы, осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного п.2 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий), осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом подключении) (п.4). 

Заявитель обязан, в том числе: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства, внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, в соответствии с разделом III настоящего договора, подписать акт о готовности в день его составления (п.6). 

Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку приборов учета газа (п.11). 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (Минстрой УР) от 06 ноября 2022 года №25/302 и составляет 125 169,48 рублей, в том числе НДС 20 861,58 рублей, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа (п.12). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.15). 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (п.16). 

По результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнителем составляется акт о готовности (п.22). 

Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра (п.23). 

Согласно дополнительному соглашению №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 14 апреля 2023 года плата по договору догазификации на основании стандартизированных тарифных ставок газопотребления объекта: жилой дом (ИЖС) по адресу ... (заказчик ФИО1) составляет 115 741,88 рублей. 

Платежным поручением от 05 мая 2023 года Минфином Удмуртии на счет АО «Газпром газораспределение Ижевск» перечислена денежная сумма в размере 62 584,74 рублей (назначение платежа - подключение газоиспользующего оборудования к сети в рамках догазификации в целях социального обеспечения граждан по договору №01-23(ТП)/1127 от 14 апреля 2023 года за ФИО1). 

Платежным поручением от 21 марта 2024 года Удмуртским отделением ПАО Сбербанк на счет Филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» перечислена денежная сумма в размере 37 415,26 рублей (назначение платежа - платеж по аккредитиву № от 24 октября 2023 года, перечисление второй части субсидии по договору №01-23(ТП)/1127 от 14 апреля 2023 года, ФИО1). 

Истец оплатил оставшуюся сумму ответчику по договору №01-23(ТП)/1127 от 14 апреля 2023 года в размере 15 741,88 рублей. 

29 декабря ФИО1 в адрес АО «Газпром-Газораспределение Ижевск» направлено заявление-претензия, согласно которому ФИО1 просил поставить и установить ему газовый котел в кратчайшие сроки, предоставить сведения о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), продлить срок действия технических условий поставки и установки газового котла. 

06 февраля 2024 года ФИО1 в адрес АО «Газпром газораспределение Ижевск» направлено заявление-претензия, согласно которому ФИО1 просил предоставить информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому подключению), возвратить денежные средства в размере 15 741,88 рублей в течение трех рабочих дней. 

07 марта 2024 года ФИО1 в адрес АО «Газпром газораспределение Ижевск» направлено заявление-претензия по срокам, согласно которому услуги по договору №01-23(ТП)/1127 от 14 апреля 2023 года выполнены полностью и в полном объеме, услуги выполнены не в срок, срок выполнения подключения по договору – 29 декабря 2023 года, по акту они выполнены 07 марта 2024 года.

07 марта 2024 года АО «Газпром газораспределение Ижевск» и ФИО1 подписан акт о подключении (технологическом присоединении), согласно которому в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 14 апреля 2023 года №01-23(ТП)/1127 произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу ..., к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю, газопровод-ввод. Газопровод от границы разграничения имущественной принадлежности до газоиспользующего оборудования жилой дом (ИЖС) по адресу ..., принадлежит заявителю. Стоимость работ по договору составляет 115 741,88 рублей, включая ДС 20% - 19 290,31 рублей.

11 марта 2024 года АО «Газпром газораспределение Ижевск» в адрес ФИО1 направлен ответ на претензию, согласно которой работы по пуску газа в газоиспользующее оборудование жилого дома, расположенного по адресу ..., выполнены 07 марта 2024 года. Вопрос о компенсации дополнительных затрат будет рассмотрен позже. 

25 марта 2024 года ФИО1 в адрес АО «Газпром газораспределение Ижевск» направлена досудебная претензия, согласно которой ФИО1 просил удовлетворить требования претензии на сумму 44 341,43 рублей, выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Претензия оставлена без удовлетворения. 

Разрешая требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, суд руководствуется следующим. 

В силу ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Статьей 424 ГК РФ (ч. 1) предусмотрено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В силу ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ч.1). 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (ч.1). 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (ч.2). 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (ч.3). 

Как предусмотрено п.п. «и» п. 52 Правил №1547 договор о подключении должен содержать, в частности, существенное условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил), то есть за исключением договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 

Между сторонами возникли правоотношения в связи с подключением (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Данные обстоятельства подтверждаются содержанием заключенного между сторонами договора.

В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в п. 3 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.

Вопреки позиции ответчика, и исходя из того, что заключенный между сторонами договором носит возмездный характер, договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома заключен истцом для личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением истцом предпринимательской деятельности, правоотношения сторон регулируются Законом РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей». 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги) (абзац четвертый пункта 5 указанной статьи).

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что сторонами договора от 14 апреля 2023 года №01-23(ТП)/1127 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации был согласован срок исполнения обязательств по договору (29 декабря 2023 года), в указанный срок обязательства по договору ответчиком не исполнены. Фактически работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по договору №01-23(ТП)/1127 выполнены 07 марта 2024 года, что подтверждается актом о подключении (технологическом присоединении) от указанной даты. 

В силу ч.1 ст.314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно расчету истца, произведенного на основании ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за период просрочки с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года за 69 дней размер неустойки составляет: 115 741,88 рублей х 69 дней х 3% = 239 585,69 рублей. Поскольку размер неустойки не может превышать сумму договора, истец самостоятельно снизил ее размер до 115 741,88 рублей. 

Расчет неустойки суд находит арифметически верным, соответствующим периоду просрочки, не превышает размеров ответственности, установленных законодательством. Суд соглашается с расчетом истца.

Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В абз.2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Аналогичные положения, предусматривающие инициативу ответчика в уменьшении неустойки (штрафа) на основании данной статьи, содержатся в п. 72 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в котором также разъяснено, что заявление ответчика о применении положений ст.333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

Помимо самого заявления о явной несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательства, ответчик в силу положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ обязан представить суду доказательства, подтверждающие такую несоразмерность, а суд - обсудить данный вопрос в судебном заседании и указать мотивы, по которым он пришел к выводу об удовлетворении указанного заявления.

Ответчиком не представлено каких-либо доказательств наличия исключительных обстоятельств, свидетельствующих о явной несоразмерности взыскиваемых сумм последствиям нарушения обязательств.

Оснований для уменьшения размера неустойки за нарушение сроков выполнения работ в ходе рассмотрения дела не установлено.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работ в размере 36 657,05 рублей, суд руководствуется следующим. 

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ и мерой ответственности за нарушение обязательств. 

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу указанных положений закона, лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер убытков, причинную связь между допущенным правонарушением и возникшими убытками. Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков.

Согласно разъяснениям, данным в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Заявляя требования о взыскании убытков, истец ссылался на то обстоятельство, что в связи с нарушением сроков исполнения договора им были понесены дополнительные, незапланированные расходы (убытки) на отопление жилого дома с помощью электрического котла, на приготовление пищи с помощью электрической варочной панели и расходы на подогрев воды с помощью электрического водонагревателя. 

Так, согласно расчету истца АО «ЭнергосбыТ Плюс» в период с 30 декабря 2023 года по 08 марта 2024 года начислена сумма в размере 41 786,28 рублей: 12 897 кВт*ч (потребление согласно акту филиала «Удмуртэнерго» ПАО «России Центр и Приволжья» от 25 марта 2024 года) * 3,24 рублей (тариф за 1 кВт*ч). За основу расчета взято среднее потребление электрической энергии и газа за полный календарный месяц за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года (аналогичные периоды 2024-2025 г.г. периоду нарушения сроков по подключению в 2023-2024 г.г.). 

Согласно справке АО «ЭнергосбыТ плюс» о расчетах жилищно-коммунальных услуг за период с 01 ноября 2022 года по 31 марта 2025 года (дата формирования отчета 14 марта 2025 года) потребление электроэнергии составило за три месяца – 1 223,83 рублей. Среднее потребление электроэнергии в день за три месяца – 13,6 кВт (1 223,83 рублей/90 дней за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года). Среднее потребление электроэнергии за 69 дней в период с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года составило 3 040,42 рублей (13,6 кВт х 69 дней). 

Согласно квитанциям ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по лицевому счету № объем потребления газа за три месяца составил 1 940 куб.м. Среднее потребление газа в день = 21,55 куб.м. (1 940/90 дней за период с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года). Среднее потребление газа за 69 дней в период с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года составило 9 446,66 рублей (21,55 куб.м. х 69 дней). 

Таким образом, согласно расчету истца, размер понесенных убытков составляет 29 299,20 рублей (41 786,28 рублей - 3 040,42 рублей - 9 446,66 рублей), где 41 786,28 рублей - начислено АО «ЭнергосбыТ Плюс» за период с 30 декабря 2023 года по 08 марта 2024 года, 3 040,42 рублей - среднее потребление электроэнергии за 69 дней за период с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года, 9 446,66 рублей - среднее потребление газа за 69 дней за период с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года. Итого 29 299,20 рублей - дополнительные, незапланированные расходы (убытки) на отопление жилого дома с помощью электрического котла, на приготовление пищи с помощью электрической варочной панели и расходы на подогрев воды с помощью электрического водонагревателя. 

Так, для определения факта наличия убытков необходимо установить размер платы, которую истец уплачивал бы при наличии системы газоснабжения за отопление и горячее водоснабжение, а также размер платы при использовании для этих целей электрокотла с подогревом воды, без учета иных электроприборов в доме. 

Суд приходит к выводу о том, что расчет убытков, представленный истцом, является некорректным, поскольку в расчете убытков истец сравнивает размер оплаченной электроэнергии в спорный период с нормативами потребления электроэнергии для освещения дома, потребления газа для приготовления пищи, отопления. Указанный расчет носит вероятностный характер и не может являться надлежащим доказательством несения истцом убытков. 

В нарушение требований ст. 56 ГПК РФ истцом не представлены доказательства существования причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими для истца негативными последствиями в виде восстановление электроснабжения (отключение/подключение), а также начисленных пеней по оплате электроэнергии. 

Кроме того, размер расходов на отопление истцом документально не подтвержден, в договоре электроснабжения нет указания на электропринимающее устройство в качестве отопительного прибора, отсутствуют доказательства учета представленных затрат отдельно на отопление с использованием электроэнергии. 

Также истец просит взыскать в качестве убытков пени, начисленные АО «ЭнергосбыТ Плюс» за просроченную оплату счетов с 30 декабря 2023 года по 07 марта 2024 года в размере 4 357,85 рублей, оплату за восстановления электроснабжения в размере 3 000 рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Статьей 544 ГК РФ предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Частью 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.

Частью 14 названной статьи предусмотрена обязанность лиц, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги, уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

Как следует из материалов дела, пояснений истца, в спорный период обязательства по оплате поставленной и использованной для бытовых нужд электроэнергии истцом надлежащим образом не исполнялись, что явилось основанием начисления пени, обоснованность и размер которых истцом не оспаривается.

Таким образом, несение истцом расходов по оплате пени вызвано не действиями ответчика по несвоевременному исполнению обязательств по договору подключения, в связи с нарушением истцом договорных обязательств по оплате потребленной электроэнергии, что не является убытками в понимании ст. 15 ГК РФ, подлежащими взысканию с ответчика.

В связи с чем, доводы истца о несении им убытков в виде оплаты за электроснабжение в виду несвоевременного по вине ответчика подключения к системе газоснабжения своего подтверждения не нашли. 

Требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 года №33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права (например, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных и семейных связей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения, право авторства, право автора на имя, другие личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности и др.) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

При определении размера компенсации морального вреда суд исходит из требований разумности и справедливости, степени нравственных и физических страданий, оцениваемых судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей истца. 

Принимая во внимание, что факт нарушения прав потребителя ответчиком нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, с учетом степени вины нарушителя АО «Газпром газораспределение Ижевск», с учетом требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей. 

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года №17 применительно к п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

По смыслу вышеприведенных положений взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя является не правом, а обязанностью суда.

Таким образом, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Для определения суммы штрафа учитывается размер законных требований потребителя, которые не были удовлетворены в добровольном порядке. Таким образом, размер штрафа рассчитывается из суммы удовлетворенных требований, составляет 120 741,88 рублей (115 741,88 + 5 000/2). 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как указывалось выше, по смыслу нормы ст. 333 ГК РФ и разъяснений по ее применению, основанием для снижения размера взыскиваемой неустойки является ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства, уменьшение неустойки является правом суда, а наличие оснований для снижения и определения критериев соразмерности определяется судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Как разъяснено в абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Учитывая несоразмерность предъявленного к взысканию штрафа последствиям нарушенного обязательства, а также природу взыскиваемого штрафа как предусмотренного законом особого способа обеспечения исполнения обязательства в гражданско-правовом смысле, в соответствии со ст.333 ГК РФ суд полагает возможным уменьшить размер штрафа до 18 500 рублей и взыскать его в пользу потребителя.

Указанный размер штрафа, по мнению суда, в полной мере соответствует характеру допущенного нарушения обязательства, периоду просрочки, соразмерен последствиям нарушения обязательства, не нарушает принципы равенства сторон и недопустимости неосновательного обогащения одной стороны за счет другой стороны, свидетельствует о соблюдении баланса интересов сторон. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, 339.19 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 815 рублей, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска в суд. 

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 (паспорт №, выдан -Дата- ОУФМС России по ...) к АО «Газпром газораспределение Ижевск» (ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда – удовлетворить частично. 

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 115 741,88 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа за неудовлетворение требования потребителя в размере 18 500 рублей. 

Исковые требования ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Ижевск» о взыскании убытков, причиненных в связи с нарушением сроков выполнения работ, в размере 36 657,05 рублей – оставить без удовлетворения. 

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Ижевск» в доход бюджета МО «Город Ижевск» государственную пошлину в размере 3 815 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи жалобы через суд, вынесший решение.

Мотивированное решение изготовлено 11 июля 2025 года.

Судья В.Ю. Суворова