Дело №

Решение

 

Именем Российской Федерации

г. Исилькуль 24 июля 2018 года 

Исилькульский городской суд Омской области

в составе председательствующего судьи Н.Д. Боронко

при секретаре В.В. Моляк

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» к ФИО1 о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

установил:

В суд с указанным иском обратился истец, из которого следует, что между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная Распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.16. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона №235-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. 

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27. 12.2004 №. В соответствии с пунктом 6 Правил №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами №. 

Последним абзацем пункта 15 Правил № предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию. 

В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.16 стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электроустановок склада для хранения сельскохозяйственной продукции, расположенного по адресу: 

<

адрес>, № Ж, кадастровый номер земельного участка 55:33:220201 :2711. 

Согласно пункту 2.3 Договора Заявитель обязался выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях (пункт 11 технических условий), оплатить расходы на технологическое присоединение и уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил №, пунктом 1.5 Договора составляет 1 год со дня заключения договора. Между тем мероприятия по технологическому присоединению Ответчиком до настоящего времени не исполнены. Период просрочки исполнения обязательств составил 262 дня (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). 

Согласно п. 4.4 Договора, в случае нарушения одной из Сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, такая Сторона обязуется уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за неисполнение Заявителем обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составляет: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ = 262 дня просрочки Х 686 557,40 руб. (общий размер платы по договору) Х 0,014 % Х 10,5% = 264 428,42 руб. 

Таким образом, с Ответчика подлежит взысканию по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.261 0.16 неустойка в размере 264 428,42 руб. за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с неисполнением Заявителем обязательств по договору ПАО «МРСК Сибири» направило в адрес ФИО1 претензию от ДД.ММ.ГГГГ №.5/0815/1590-исх об оплате неустойки. Данная претензия получена Ответчиком, что подтверждается уведомлением о вручении. 

В нарушение условий договора обязательства ФИО1 по оплате неустойки по договору до настоящего времени не исполнены, в связи с чем ПАО «МРСК Сибири» вынуждено обратиться в суд за защитой нарушенных прав. 

Поскольку ответчик не исполнил надлежащим образом в установленный срок принятые в соответствии с указанным выше договором обязательства (мероприятия по осуществлению технологического присоединения), а начисление неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрено данным договором, полагают обоснованным взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательств.

В связи с чем просят взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 264 428,42 руб. неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.165 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного. общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.16, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора и общего размера платы по договору в размере 686 577,40 руб., за каждый день просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 844 рублей, уплаченной за рассмотрение настоящего заявления.

В судебное заседание представитель истца на основании доверенности ФИО2 не явилась, просила дело рассмотреть в её отсутствие, заявленные исковые требования поддерживает в полном объёме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о дате и времени рассмотрения настоящего дела, что подтверждается почтовыми уведомлениями, заявлений от него об отложении судебного заседания по уважительным причинам, не поступило.

Суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствии ответчика.

Из договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.16. следует, что между Публичным акционерным обществом «Межрегиональная Распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Ч. 1 статьи 26 Закона №235-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. 

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27. 12.2004 №.

П. 6 Правил предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. 

В п. 15 Правил предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию. 

Из договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.16 следует, что стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электроустановок склада для хранения сельскохозяйственной продукции, расположенного по адресу: 

<

адрес>, № Ж, кадастровый номер земельного участка 55:33:220201 :2711. 

Согласно п. 2.3 Договора ответчик обязался выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях (пункт 11 технических условий), оплатить расходы на технологическое присоединение и уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил № 861, пунктом 1.5 Договора составляет 1 год со дня заключения договора. 

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861, пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Указанный договор является публичным.

Правилами № 861 предусмотрены существенные условия договора на технологическое присоединение, к которым относятся перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. Поскольку договор от 22.07.2016 № 20.5500.2610.16 заключенный между ПАО "МРСК Сибири " и ФИО1 содержит согласование всех существенных условий, предусмотренных Правилами № 861, указанный договор является специальной разновидностью обязательств - договором технологического присоединения. В соответствии с предусмотренными нормативными требованиями, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (пункт 8 Правил № 861).

В силу ст. 309 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В силу ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Ответчиком суду не предоставлены документы, подтверждающие, что мероприятия по технологическому присоединению исполнены.

Из чего следует, что период просрочки исполнения обязательств составил 262 дня (с 25.07.2017 по 12.04.2018). 

п. 4.4 Договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из Сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, такая Сторона обязуется уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за неисполнение Заявителем обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составляет: с 25.07.2017 по 12.04.2018 = 262 дня просрочки Х 686 557,40 руб. (общий размер платы по договору) Х 0,014 % Х 10,5% = 264 428,42 руб. 

Исходя из изложенного суд считает, что с ответчика подлежит взысканию по договору от 22.07.2016 №-20.5500.261 0.16 неустойка в размере 264 428,42 руб. за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 25.07.2017 по 12.04.2018. 

Также подлежит взысканию с ответчика неустойка за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.07.2016 № 20.5500.2610.16, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора и общего размера платы по договору в размере 686 577,40 руб., за каждый день просрочки за период с 13.04.2018 по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно п. 6.1 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.06.2016 №20.5500.2610.16. следует, что настоящий договор вступает в силу с даты получения Сетевой организацией подписанного с обеих сторон экземпляра Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27. 12.2004 № 861 предусмотрено, что договор считается заключённым с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию.

Ответчиком также не предоставлено доказательств того обстоятельства, что обязательства по договору не исполнены в результате действия непреодолимой силы, также истцу не было направлено письменных извещений о невозможности исполнить обязательства в результате непредвиденных обстоятельств.

При вынесении решения суд считает необходимым в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика взыскать государственную пошлину в пользу истца в размере 5 844,00 рублей, которая была оплачена при обращении с настоящим иском в суд.

Руководствуясь ст. 194 -198 ГПК РФ, суд 

Решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 264 428,42 руб. неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.165 за период с 25.07.2017 по 12.04.2018. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного. общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.5500.2610.165, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора и общего размера платы по договору в размере 686 577,40 руб., за каждый день просрочки за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 844 рублей, уплаченной за рассмотрение настоящего заявления.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путем подачи жалобы через Исилькульский городской суд в течение месяца.

Судья Н.Д. Боронко