Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июля 2023 года г. Шилка

Шилкинский районный суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Цукерман С.Ю.,

при секретаре ФИО4,

с участием истца ФИО2 и его представителя ФИО5,

представителя ответчика ФИО6, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» о понуждении к исполнению условий договора,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям чабанской стоянки на земельном участке, находящимся в собственности истца по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям. Во исполнение условий договора, ДД.ММ.ГГГГ истец двумя платежами произвел оплату услуг по технологическому присоединению в общей сумме 22176,30 руб. Договором дата технологического присоединения определена 1 год с момента заключения договора. В силу форс-мажорных обстоятельств, озвученных исполнителем, по заключенному сторонами дополнительному соглашению, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени условия договора ответчиком не выполнены. Просит суд обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ исполнить условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям чабанской стоянки, расположенной на земельном участке, принадлежащем истцу ФИО2 на праве собственности по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

В судебном заседании истец ФИО2 и его представитель ФИО5 поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика ФИО6, поддержала позицию, изложенную в письменном отзыве на иск, дополнительно пояснила, что со стороны истца условия договора выполнены, однако в связи с финансовым положением общества, возможности в ближайшее время исполнить условия договора, не имеется. Считает, что в случае удовлетворения иска, разумным будет срок для исполнения договора в течении года, с момента вступления решения суда в законную силу, о чем обращается с просьбой к суду.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с требованиями ст.56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с требованиями ст.309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В п.3 ст.401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со ст.26 ФЗ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В силу п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в редакции, действующей на момент заключения между сторонами договора присоединения, далее - Правила N 861), Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п.6 Правил N 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу подп. "б" п.16 Правил N 861 (в редакции, действующей на момент заключения договора), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (п.4 ст.23.1, п.2 ст.23.2, п.1 ст.26 Закона об электроэнергетике, подп. "е" п.16, п.16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

Таким образом, потребитель электрической энергии имеет право обратиться на прямую в сетевую организацию для заключения договора технологического присоединения своих энергопринимающих устройств, с разграничением балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в границах своего земельного участка, а сетевая организация, в свою, очередь, обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

При этом из подп."б" п.25 и подп."б" п.25(1) Правил N 861 следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подп."б" п.25 и подп."б" п.25(1) Правил N 861 с п.28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, приводит к выводу о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил N 861 обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, составлены технические условия, которыми предусмотрены мероприятия, обязательные для исполнения сторонами.

В соответствии с пунктом 2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения чабанской стоянки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №

Пунктом 5 договора определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 1 год со дня заключения договора.

Дополнительным соглашением к договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 произведена оплата услуг по монтажу СИП ТП в сумме 4242 руб., а также услуг по договору технологическому присоединения в сумме 17934,30 рублей, что подтверждается представленными в материалы дела банковскими чеками-ордерами.

Из пояснений сторон установлено, что на момент рассмотрения дела технологическое присоединение не осуществлено.

Из пояснений представителя ответчика следует, что основной причиной неисполнения договора является сложное финансовое положение общества, поскольку истец относится к льготной категории граждан, при этом у общества имеется много аналогичных договоров, подлежащих исполнению.

Разумным сроком для исполнения договора представитель ответчика считает один год с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему спору.

Оценив предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что на ПАО "Россети Сибирь" лежит обязанность по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, по совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе, выполнению необходимых технических и строительных работ, что следует из требований законодательства, регулирующего правоотношения в рассматриваемой сфере. 

Принимая во внимание длительность неисполнения условий договора, суд усматривает в действиях общества виновное поведение по непринятию мер в рассматриваемой части правоотношений.

По мнению суда, истец не должен находиться в зависимом положении от экономического положения общества, оплатив услуги по договору, истец вправе требовать исполнения обязательств, в связи с чем требования истца обязать ответчика исполнить условия договора являются законными и обоснованными.

Вместе с тем, суд считает правильным определить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в течение четырех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, что приведет к соблюдению баланса интересов сторон.

С учетом изложенного, заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» о понуждении к исполнению условий договора удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь»- «Читаэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям чабанской стоянки, расположенной на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в 

<

адрес>вой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Шилкинский районный суд 

<

адрес>.

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий С.Ю. Цукерман