Дело № 2 -1554/2024

УИД 75RS 0002 -01 -2024 -003314 -41 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации 

10 сентября 2024 г. г.Чита

Ингодинский районный суд города Читы

в составе председательствующего судьи Порошиной Е.В.,

при секретаре Цырельниковой Е.М.,

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ФИО1,представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в интересах ФИО3 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа

У С Т А Н О В И Л:

Представитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обратился в суд в интересах ФИО3 с вышеназванным заявлением, ссылаясь на то, что ФИО3 была подана заявка через электронный портал услуг ПАО «Россети», ДД.ММ.ГГГГ с нею заключен договор № № на технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка №, приложением к договору являются технологические условия, цена договора сумма ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение в течение 6 месяцев, то есть до 06.10.2023г. Им была оплачена сумма по договору 06.04.2023г. в размере 40 709,55 руб. Ответчик же нарушил все сроки и ее права как потребителя, никаких работ не выполнил.. истец обратился с претензией к ответчику о необходимости выполнения обязательств, требования о выполнении работ не исполнены. Был получен ответ, в котором ответчик ссылается на наличие сложностей с реализацией мероприятий по договорам технологического присоединения в связи недостаточностью финансирования. Просил с учетом уточнения исковых требований обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № №, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда 10 000 руб., неустойку за нарушение сроков технологического присоединения за период с 07.10.2023г. по 09.07.2024г. в размере 28 089,59 руб., штраф. 

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора ФИО1 доводы уточненного искового заявления поддержал.

Истец ФИО3 надлежаще извещенная о месте и времени проведения судебного заседания, не явилась.

Представитель ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 исковые требования не признала по основаниям, изложенным в отзыве, указала, что для выполнения технических условий нужны большие затраты. Денежных средств в таком количестве у ПАО «Россети Сибирь» не имеется, заключены кредитные договоры, которые в настоящее время не погашены. Инвестиционная программа, заложенная на 2023г., уже исполнена, просила установить срок для исполнения договора на девять месяцев, уменьшить размер неустойки в связи с трудным имущественным положением ответчика. Указала, что размер компенсации морального вреда и факт его наличия не доказан.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, суд приходит к следующему.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО3 был заключен договор № на технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, приложением к договору являются технологические условия, цена договора 40 709,55 руб. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5)

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению ( включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (п.6).

Согласно п. 8 договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Во исполнение условий договора были выданы Технические условия.

Свои обязательства по договору истцом выполнены, ФИО3 оплачена работа по договору 40 709,55 руб. 06.05.2023г.

ПАО «Россети Сибирь» доказательств выполнения каких -либо работ по договору не представлено. 

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных Правительством Российской Федерации от 27.12.2004 г. N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Положениями ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с подп. "б" п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. "б" п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу пункта 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 6 заключенного между сторонами договора, срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Указанный срок истек ДД.ММ.ГГГГ

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности доводов истца в части нарушения ответчиком условий договора, нарушении прав потребителя. 

В соответствии с п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статьей 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего исполнения заключенного между сторонами договора, исходя из объема нарушений и его длительности, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости в размере 5 000 руб.

Согласно п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такое неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки. 

Согласно расчету истца, расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. составляет 28 089,59руб. Данный расчет суд находит арифметически верным. 

Ответчик просит в соответствии со ст. 333 ГК РФ уменьшить размер неустойки в связи с несоразмерностью ее размера последствиям нарушения обязательства. Данной несозразмерности судом не установлено, оснований для уменьшения размера неустойки судом не установлено. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителя" в пользу истца с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 16 544,8 руб.: (28 089,59 +5000:2).

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Суд полагает возможным установить для исполнения решения суда срок три месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Данный срок устанавливается с учетом имущественного положения ответчика, наличием кредиторской задолженности ПАО «Россети Сибирь», необходимостью сохранения баланса интересов сторон.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина 1 342,68.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194 - 198 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО3, паспорт № выдан №., для электроснабжения объекта индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО3 компенсацию морального вреда 5 000 руб., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 28 089,59руб., штраф 16 544,8 руб., всего 44 636,39 руб. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в бюджет городского округа «Город Чита» расходы по уплате госпошлины 1 342,68 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья Порошина Е.В. 

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ