Решение

 изготовлено в окончательном виде 13.03.2017.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 марта 2017 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга

в составе председательствующего судьи Мурзагалиевой А.З.,

при секретаре Шарафулиной А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по иску открытого акционерного общества «

<

иные данные>» к 

<

ФИО>1 об обязании исполнить обязательства по договору,

УСТАНОВИЛ:

Представитель открытого акционерного общества «

<

иные данные>» обратился с указанным иском, в обоснование которого пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

иные данные>» и 

<

ФИО>2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения №, неотъемлемым приложением которого являются технические условия № №. Технологическое присоединение необходимо заявителю для электроснабжения фермы, находящейся по адресу: 

<

адрес>, по уровню напряжения 10 кВ, с максимальной мощностью 15 кВт. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен в 6 месяцев со дня заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ сторонами было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлён на 6 месяцев со дня заключения соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение о том, что мероприятия по техприсоединению должны быть осуществлены сторонами в течение 6 месяцев со дня заключения соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий продлен на один год со дня заключения дополнительного соглашения.

Истец выполнил свои обязательства по договору, но по настоящее время истец не имеет возможности произвести фактическое подключение энергопринимающих устройств, принадлежащих ответчику, ввиду их отсутствия и уклонения 

<

ФИО>3 от выполнения своей части технических условий.

Истец уведомлял ответчика о выполнении условий договора и готовности осуществить фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям путём направления писем.

Однако, до настоящего времени ответчик уклоняется от исполнения своих обязательств по договору.

В исковом заявлении представитель истца ОАО «

<

иные данные>» просит обязать (понудить) 

<

ФИО>4 в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и обязательства, установленные п. 11 Технических условий, а именно: 

- для обеспечения безопасности объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и согласовать с ПО ЗЭС;

- осуществить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором не более 16 кВА., Тип и место установки определить проектом;

- питание ТП-10,0,4 кВ выполнить ответвлением от ВЛ-10 кВ «

<

иные данные>» (согласно п.10.1. технических условий). При воздушном исполнении рекомендуем применить самонесущий изолированный провод – СИП;

- на концевой опоре ВЛ-10 кВ у ТП установить разъединитель с приводом, ОПН-10 кВ.

При организации учета электроэнергии предусмотреть:

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии выполнить в ТП на вводе 0,4 кВ, тип которого утвержден федеральным органом по регулированию и метрологии и внесен гос. реестр средств измерений:

- классом точности 0,5;

- позволяющий обеспечивать измерение э/энергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени;

- предусмотреть установку трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ ТП, классом точности не ниже 0,5;

- коэффициент трансформации и тип трансформаторов тока определить проектом с рекомендацией установить GSM-модем, позволяющий передавать данные с приборов учета э/энергии потребителю и на сервер АСКУЭ ПО ЗЭС по GSM-связи;

- обеспечить компенсацию влияния нагрузок Заказчика на качество э/энергии (по уровням высших гармоник, нессимметрии и колебаниям напряжений) в питающей сети, соответствующих требованиям ГОСТ 134109-97;

- обеспечить режим потребления реактивной мощности в точках присоединения с tgf не выше 0,4;

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемого энергопринимающего устройства сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организации фактического присоединения энергопринимающего устройства к сетям ОАО «

<

иные данные>» и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в течение 5 рабочих дней подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

Также представитель истца просит взыскать с 

<

ФИО>5 в пользу ОАО «

<

иные данные>» государственную пошлину, уплаченную за подачу искового заявления в размере 

<

иные данные>. (л.д. 2-6).

Представитель истца 

<

ФИО>6 действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала по предмету и основаниям.

Ответчик 

<

ФИО>7 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила.

Представитель ответчика 

<

ФИО>8., действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме, порядок и последствия признания иска представителю ответчика судом разъяснены и понятны, о чем имеется ее подпись в протоколе судебного заседания.

Заслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

иные данные>» и 

<

ФИО>9 заключен договор об осуществлении технологического присоединения № №, неотъемлемым приложением которого являются технические условия №, согласно которому ОАО «

<

иные данные>» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

<

ФИО>10. в отношении впервые вводимых в эксплуатацию ТП-10/00,4кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

<

ФИО>11 обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен в 6 месяцев со дня заключения договора (л.д. 9-14).

В соответствии с дополнительным соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению неоднократно продлялся, впоследствии в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ срок был продлен на 1 год со дня заключения дополнительного соглашения (л.д. 17-19).

Согласно п.6 договора об осуществлении технологического присоединения и п.10 технических условий, для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям истец принял на себя обязательства по созданию точки присоединения, расположенной не далее 25 метров от границ земельного участка Заявителя, при этом, в случае необходимости осуществить строительство новых или реконструкцию существующих энергообъектов.

В целях исполнения своих обязательств по договору истцом были выполнены следующие работы.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «

<

иные данные>» разработана проектно-сметная документация, что подтверждается договором № от ДД.ММ.ГГГГ, актом выполненных работ № за ДД.ММ.ГГГГ года, стоимость работ – 

<

иные данные> руб. с НДС (л.д. 20-33, 34).

По договору подряда с ООО «

<

иные данные>» № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен комплекс работ по отводу земельных участков для объекта заявителя (л.д. 36-42). В соответствии с акт № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ составила 

<

иные данные> руб. (л.д. 35)

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

иные данные>» осуществлены работы по проектированию лесного участка и подготовке проектной документации для выполнения работ для строительства объекта заявителя, что подтверждается актом № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ составила 

<

иные данные> руб. (л.д. 43-45).

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

иные данные>» разработан проект освоения лесов для строительства объекта заявителя, что подтверждается актом № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ составила 

<

иные данные> руб. (л.д. 46-48).

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

иные данные>» выполнен комплекс работ по изготовлению Технического плана и постановки на гос. кадастровый учет объекта заявителя, что подтверждается актом № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ составила 

<

иные данные> руб. (л.д. 49-55).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хозяйственным способом (силами Первоуральского района электрических сетей (ПРЭС) ПО «

<

иные данные>») выполнено строительство ответвления от ВЛ-10 кВ «

<

иные данные>» до границ участка заявителя, что подтверждается актами о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 56-65).

В соответствии с п. 8 договора об осуществлении технологического присоединения и п.11 технических условий, для присоединения к электрическим сетям ответчик обязан:

- объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований НПА, действующих на территории РФ и согласовать с ПО ЗЭС;

- осуществить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором не более 16 кВА., Тип и место установки определить проектом;

- питание ТП-10,0,4 кВ выполнить ответвлением от ВЛ-10 кВ «

<

иные данные>»;

- на концевой опоре ВЛ-10 кВ у ТП установить разъединитель с приводом, ОПН-10 кВ,

При организации учета электроэнергии предусмотреть:

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии выполнить в ТП на вводе 0,4 кВ, тип которого утвержден федеральным органом по регулированию и метрологии и внесен гос. реестр средств измерений:

- классом точности 0,5;

- позволяющий обеспечивать измерение э/энергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени;

- предусмотреть установку трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ ТП, классом точности не ниже ).5;

- коэффициент трансформации и тип трансформаторов тока определить проектом с рекомендацией установить GSM-модем, позволяющий передавать данные с приборов учета э/энергии потребителю и на сервер АСКУЭ ПО ЗЭС по GSM-связи;

- обеспечить компенсацию влияния нагрузок Заказчика на качество э/энергии (по уровням высших гармоник, нессимметрии и колебаниям напряжений) в питающей сети, соответствующих требованиям ГОСТ 134109-97;

- обеспечить режим потребления реактивной мощности в точках присоединения с tgf не выше 0,4;

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемого энергопринимающего устройства сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организации фактического присоединения энергопринимающего устройства к сетям ОАО «

<

иные данные>» и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в течение 5 рабочих дней подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Однако, в связи с отсутствием энергопринимающих устройств, уклонения 

<

ФИО>12 от выполнения своей части технических условий (п. 11), у истца отсутствует произвести фактическое подключение энергопринимающих устройств и исполнить договор в полном объеме, что не оспорено представителем ответчика в судебном заседании.

С учетом изложенного, суд удовлетворяет исковые требования открытого акционерного общества «

<

иные данные>» к 

<

ФИО>13 об обязании исполнить обязательства по договору и обязывает 

<

ФИО>14 в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и обязательства, установленные п. 11 Технических условий, а именно: 

- для обеспечения безопасности объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и согласовать с ПО «ЗЭС»;

- осуществить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором не более 16 кВА., Тип и место установки определить проектом;

- питание ТП-10/0,4 кВ выполнить ответвлением от ВЛ-10 кВ «Березовая» (согласно п.10.1. технических условий) с рекомендацией при воздушном исполнении применить самонесущий изолированный провод – СИП;

- на концевой опоре ВЛ-10 кВ у ТП установить разъединитель с приводом, ОПН-10 кВ;

- при организации учета электроэнергии предусмотреть:

коммерческий учет потребляемой электроэнергии выполнить в ТП на вводе 0,4 кВ, тип которого утвержден федеральным органом по регулированию и метрологии и внесен гос. реестр средств измерений:

классом точности 0,5;

позволяющий обеспечивать измерение э/энергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени;

- предусмотреть установку трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ ТП, классом точности не ниже 0,5;

- коэффициент трансформации и тип трансформаторов тока определить проектом с рекомендацией установить GSM-модем, позволяющий передавать данные с приборов учета электроэнергии потребителю и на сервер АСКУЭ ПО ЗЭС по GSM-связи;

- обеспечить компенсацию влияния нагрузок Заказчика на качество электроэнергии (по уровням высших гармоник, нессимметрии и колебаниям напряжений) в питающей сети, соответствующих требованиям ГОСТ 134109-97;

- обеспечить режим потребления реактивной мощности в точках присоединения с tgf не выше 0,4;

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемого энергопринимающего устройства сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организации фактического присоединения энергопринимающего устройства к сетям ОАО «

<

иные данные>» и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в течение 5 рабочих дней подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

Удовлетворяя исковые требования, суд принимает признание иска ответчиком, так как такое признание не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика 

<

ФИО>15 в пользу истца открытого акционерного общества «

<

иные данные>» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб. 00 коп.

Иных требований на рассмотрение суда не заявлено.

Руководствуясь ст. ст. 13, 194-198, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление открытого акционерного общества «

<

иные данные>» к 

<

ФИО>16 об обязании исполнить обязательства по договору – удовлетворить.

Обязать 

<

ФИО>17 в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу исполнить обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и обязательства, установленные п. 11 Технических условий, а именно: 

- для обеспечения безопасности объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании требований нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и согласовать с ПО «ЗЭС»;

- осуществить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором не более 16 кВА., Тип и место установки определить проектом;

- питание ТП-10/0,4 кВ выполнить ответвлением от ВЛ-10 кВ «Березовая» (согласно п.10.1. технических условий) с рекомендацией при воздушном исполнении применить самонесущий изолированный провод – СИП;

- на концевой опоре ВЛ-10 кВ у ТП установить разъединитель с приводом, ОПН-10 кВ;

- при организации учета электроэнергии предусмотреть:

коммерческий учет потребляемой электроэнергии выполнить в ТП на вводе 0,4 кВ, тип которого утвержден федеральным органом по регулированию и метрологии и внесен гос. реестр средств измерений:

классом точности 0,5;

позволяющий обеспечивать измерение э/энергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени;

- предусмотреть установку трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ ТП, классом точности не ниже 0,5;

- коэффициент трансформации и тип трансформаторов тока определить проектом с рекомендацией установить GSM-модем, позволяющий передавать данные с приборов учета электроэнергии потребителю и на сервер АСКУЭ ПО ЗЭС по GSM-связи;

- обеспечить компенсацию влияния нагрузок Заказчика на качество электроэнергии (по уровням высших гармоник, нессимметрии и колебаниям напряжений) в питающей сети, соответствующих требованиям ГОСТ 134109-97;

- обеспечить режим потребления реактивной мощности в точках присоединения с tgf не выше 0,4;

- уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемого энергопринимающего устройства сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организации фактического присоединения энергопринимающего устройства к сетям ОАО «

<

иные данные>» и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в течение 5 рабочих дней подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с ответчика ФИО1 в пользу истца открытого акционерного общества «

<

иные данные>» государственную пошлину в размере 

<

иные данные>. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца, с момента изготовления решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционных жалобы или представления через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Председательствующий