Дело № 2-4088/2025

УИД 39RS0002-01-2025-003859-98

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 августа 2025 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Сараевой А.А.,

при секретаре Дождёвой В.К.,

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 ФИО5 к АО «Россети Янтарь» о взыскании неустойки по договору технологического присоединения, штрафа, 

УСТАНОВИЛ:

19.09.2023 между ФИО3 и АО «Россети Янтарь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № в соответствии с которым АО «Россети Янтарь» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению для энергоснабжения в течение 1 года со дня заключения договора. Обязательства оплаты технологического присоединения ФИО3 исполнены в полном объеме. Технологическое присоединение осуществлено с нарушением срока. 

Ссылаясь на истечение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии Правилами технологического присоединения 19.03.2024, осуществление технологического присоединения после истечения срока договора, ФИО3 обратился в суд к АО «Россети Янтарь» о взыскании неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на объекте – малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес > за период с 20.03.2024 по 16.05.2025 в размере 113311,22 рублей, с последующим взысканием по дату фактического исполнения обязательств, штрафа.

Истец ФИО3,, извещенный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

В судебном заседании представитель истца – ФИО1 заявленные исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении, по основаниям и доводам, изложенным в иске, уточнив, что датой фактического исполнения обязательств является 25.08.2025, что следует из информации, размещенной в личном кабинете. 

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» - ФИО2 в судебном заседании возражал против удовлетворения требований иска, указав, что ответчиком договор исполнен 22.08.2025 в полном объеме, что подтверждается соответствующим уведомлением. Просила применить положения статьи 333 ГК РФ к заявленной сумме неустойки, полагая ее завышенной. Кроме того, договором установлен срок 1 год для исполнения обязательств, изменения в условия договора по срокам исполнения обязательств не вносились. 

Выслушав доводы лиц участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подп. «б» пункта 16 вышеуказанных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В силу положений статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно выписке из ЕГРН, ФИО3 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

 адрес >, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

19.09.2023 между ФИО3 и АО «Россети Янтарь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта – малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

 адрес > выданы технические условия №, сроком действия два года со дня заключения договора, в которых приведены обязательства сторон по осуществлению технологического присоединения, а также определена точка присоединения к электрической сети.

Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до 19.09.2024. 

Размер платы и порядок ее внесения платы за технологическое присоединение установлены в пунктах 10, 11 договора. 

Обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение в размере 107407,50 рублей ФИО3 исполнены 19.09.2023 в полном объеме, что подтверждается соответствующими сведениями ПАО Сбербанк от 20.09.2023. 

Поскольку в соответствии с условиями договора, технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривалось в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт включительно, следовательно, истец относится к категории заявителей, указанных в пункте 14 вышеуказанных Правил и тем самым, мероприятия по технологическому присоединению принадлежащего ему объекта к электрическим сетям не могут превышать 6 месяцев со дня заключения договора, срок окончания работ по технологическому присоединению объекта истца истекал 19.03.2024.

Доводы стороны ответчика об определении договором сроков выполнения мероприятий в течение 1 года со дня заключения договора, противоречат вышеуказанным Правилам.

Кроме того, неправомерное установление АО «Россети Янтарь» годичного срока исполнения обязательств по договору №, установлено в ходе рассмотрения УФАС России по Калининградской области материалов дела об административном правонарушении№№. 

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области №№ от 06.11.2024 АО «Россети Янтарь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 рублей, за нарушение сроков исполнения обязательств по договору технологического присоединения №, заключенному с ФИО3

Как следует из доводов стороны ответчика и представленных им доказательств, АО «Россети Янтарь» исполнило обязательства по договору №7716/09/23, что подтверждается актом допуска прибора учета в эксплуатацию №2116/7 от 14.08.2025, уведомлением заказчика об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 22.08.2025.

Согласно данным личного кабинета ФИО3 на портале-тп.рф АО «Россети Янтарь», информация об исполнении обязательств по договору датирована 25.08.2025. По состоянию на 22.08.2025 были подготовлены акты ТП, сведений о размещении уведомления 22.08.2025 суду не представлено. 

Поскольку технологическое присоединение осуществлено 25.08.2025, то есть в период рассмотрения дела, с нарушением установленных законом сроков, суд приходит к выводу, что в результате виновного бездействия ответчика нарушены права истца, как потребителя услуги.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с положениями пункта 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также в силу абзаца третьего подпункта «в» пункта 16 Правил №861, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Таким образом, за период, заявленный стороной истца, с 20.03.2024 (дата, следующая за днем истечения установленного законом срока для исполнения обязательств) по 25.08.2025 (дата фактического исполнения обязательств по договору) неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая начислению ответчику, составляет 140 699,24 рублей (107407,50 рублей х 0,25% х 524 дня).

Оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и снижения размера договорной неустойки по доводам стороны ответчика, у суда не имеется. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» во взаимосвязи с пунктом 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 70 349,62 рублей (140 699,24х50%), оснований для снижения которого по доводам стороны ответчика, суд не усматривает.

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 ФИО6 удовлетворить.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ИНН №) в пользу ФИО3 ФИО7, 

<

 Дата > года рождения (СНИЛС № неустойку за период с 20.03.2024 по 25.08.2025 в размере 140699,24 рублей, штраф в размере 70349,62 рублей, а всего 211048,86 рублей. 

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья А.А. Сараева

Мотивированное решение изготовлено 10 сентября 2025 года.