Дело № 2-2238/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 июня 2017 года г. Новосибирск

Октябрьский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Заботиной Н.М.,

при секретаре Зинченко А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» о взыскании денежных средств по договор подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» о взыскании денежных средств по договор подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом, направил в суд своего представителя по доверенности Кучерявую И.Л.

В судебном заседании от представителя ответчика ФИО2 поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, по которому стороны договорились о нижеследующем: 

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» обязуется в срок до /дата/ выполнить поэтапно для ФИО1 года строительные работы по жилому дому по адресу: 

<

адрес>:

- 1 этап: разбор второго этажа построенного дома;

- 2 этап: кладка трех новых венцов второго этажа жилого дома;

- 3 этап: полностью собрать второй этаж жилого дома;

- 4 этап; монтаж стропил, монтаж холодной и теплой кровли;

- 5 этап: покрытие всей крыши жилого дома черепицей.

2. Истец ФИО1 обязуется представить ответчику ООО «СибСтройРесурс» для завершения строительства жилого дома материалы: оцилиндрованое бревно диаметром 240 мм. для установки трех венцов второго этажа жилого дома, межвенцовый утеплитель, шканты, черепица для покрытия всей крыши, саморезы.

3. Ответчик ООО «СибСтройРесурс» обязуется за свой счет предоставить истице ФИО1 следующие материалы: обрешетка на крышу, контробрешетку, теплоизоляционный материал для обустройства теплой крыши.

4. Ответчик ООО «СибСтройРесурс» обязуется приступить к работе не позднее, чем за десять дней до даты поставки истцом ФИО1 оцилиндрованного бревна. Дату поставки истец ФИО1 обязуется сообщить ответчику ООО «СибСтройРесурс».

5. Истец ФИО1 обязуется за выполнение указанных в пункте « мирового соглашения строительных работ выплатить ответчику ООО «СибСтройРесурс» сумму в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей. Оплата производится поэтапно в течение трех дней с даты заверешения каждого этапа работы, указанного в п. 2 мирового соглашения. Оплата за каждый этап составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей.

6. Стороны не возмещают друг другу все связанные с делом судебные расходы, такие расходы лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

ФИО1 отказывается от своих исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» о взыскании денежных средств по договор подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с заключением сторонами мирового соглашения. 

Судом разъяснено сторонам, что в случае неисполнения сторонами условий мирового соглашения, они вправе обратиться в суд за получением исполнительного листа, для принудительного исполнения обязательств.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.

Учитывая, что условия мирового соглашения не противоречат закону, мировое соглашение заключено в интересах сторон, не нарушает прав и интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить указанное мировое соглашение.

В случае утверждения мирового соглашения производство по делу прекращается.

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком Обществом с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс», по которому: 

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» обязуется в срок до /дата/ выполнить поэтапно для ФИО1 года строительные работы по жилому дому по адресу: 

<

адрес>:

- 1 этап: разбор второго этажа построенного дома;

- 2 этап: кладка трех новых венцов второго этажа жилого дома;

- 3 этап: полностью собрать второй этаж жилого дома;

- 4 этап; монтаж стропил, монтаж холодной и теплой кровли;

- 5 этап: покрытие всей крыши жилого дома черепицей.

2. Истец ФИО1 обязуется представить ответчику ООО «СибСтройРесурс» для завершения строительства жилого дома материалы: оцилиндрованое бревно диаметром 240 мм. для установки трех венцов второго этажа жилого дома, межвенцовый утеплитель, шканты, черепица для покрытия всей крыши, саморезы.

3. Ответчик ООО «СибСтройРесурс» обязуется за свой счет предоставить истице ФИО1 следующие материалы: обрешетка на крышу, контробрешетку, теплоизоляционный материал для обустройства теплой крыши.

4. Ответчик ООО «СибСтройРесурс» обязуется приступить к работе не позднее, чем за десять дней до даты поставки истцом ФИО1 оцилиндрованного бревна. Дату поставки истец ФИО1 обязуется сообщить ответчику ООО «СибСтройРесурс».

5. Истец ФИО1 обязуется за выполнение указанных в пункте « мирового соглашения строительных работ выплатить ответчику ООО «СибСтройРесурс» сумму в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей. Оплата производится поэтапно в течение трех дней с даты заверешения каждого этапа работы, указанного в п. 2 мирового соглашения. Оплата за каждый этап составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей.

6. Стороны не возмещают друг другу все связанные с делом судебные расходы, такие расходы лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

ФИО1 отказывается от своих исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» о взыскании денежных средств по договор подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, в связи с заключением сторонами мирового соглашения. 

В случае неисполнения обязательств по мировому соглашению, истец может обратиться в суд с заявлением о получении исполнительного листа о принудительном исполнении обязательств по мировому соглашению. 

Производство по гражданскому делу по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройРесурс» о взыскании денежных средств по договор подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, прекратить, в связи с заключением сторонами мирового соглашения. 

На определение может быть подана частная жалоба в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати дней через Октябрьский районный суд г. Новосибирска.

Судья /подпись/