№ 2-1877-2020 года ( публиковать ). 

УИД 18RS0002-01-2020-001333-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2020 года. 

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Обуховой М.А. 

при секретаре Смирновой А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Стройград» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании аванса, процентов,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском к ответчику ФИО1 о расторжении договора, взыскании аванса, процентов. В обоснование требований указано, что

29.05.2019г. между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №.

В соответствии с п.п. 1.1. и 3.1. договора подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту промсклада № по адресу УР, 

<

адрес> срок начала работ от 2-х дней с момента заключения договора с окончанием работ 30.07.2019г.

В соответствии с разделом 5 договора стоимость работ по указанному договору составляет 320 000,00 рублей без материалов.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс по расходным кассовым ордерам в размере: 29.05.2019г. - 25 000,00 рублей, 24.06.2019г. - 50 000,00 рублей, 26.06.2019г. - 25 000,00 рублей.

Ответчик не выполнил работы, акт приема-передачи не подписан. Сумму аванса не верн

<

адрес>:

Расторгнуть договор подряда № от 29.05.2019г.

2. Взыскать с ФИО1, 

<

дата> года рождения, в пользу ООО «Стройград» уплаченный аванс в размере 100 000,00 рублей.

3. Взыскать с ФИО1, 

<

дата> года рождения, в пользу ООО «Стройград» сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.07.2019г. по 10.03.2020г. в размере 4 055,68 рублей.

4. Взыскать с ФИО1, 

<

дата> года рождения, в пользу ООО «Стройград» с 11.01.2020г. сумму процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, на сумму задолженности за каждый день просрочки (с последующим уменьшением задолженности по мере исполнения обязательства) по день фактической уплаты суммы долга.

5. Взыскать с ФИО1, 

<

дата> года рождения, в пользу ООО «Стройград» сумму уплаченной госпошлины.

Истец, ответчик в суд не явились, извещены надлежащим образом.

В порядке ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие сторон.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

Согласно ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1).

В соответствии с ч.1 ст. 420, ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422) (п. 4).

Судом установлено, что 

<

дата> между сторонами – физическими лицами заключен договор выполнения работ (оказания услуг), в соответствии с которым ООО «Стройград» поручает, а ФИО1 принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту промсклада № по адресу: УР, 

<

адрес>, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику (п.1.1 договора). Начало работ: в течении 2(двух) дней с момента подписания договора, окончание работ: 

<

дата> (п.3.1.1, 3.1.2 договора)

Согласно п. 5.1 договора стоимость работ составляет 320000 рублей. Оплата производится в 2 этапа: 

- аванс в размере 50000 рубле в течении 10 дней после подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным путем не нарушающим действующее законодательство;

- окончательный расчет в течении трех дней после выполнения всех видов работ по данному Договору и подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным путем не нарушающим действующее законодательство.

Истец оплатил ответчику аванс по расходным кассовым ордерам в размере: от 29.05.2019г. в сумме 25 000,00 рублей, от 24.06.2019г. в сумме 50 000,00 рублей, от 26.06.2019г. в сумме 25 000,00 рублей.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал на то, что обязательства по договору подряда ответчиком не были исполнены. Денежные средства, уплаченные по договору, ответчиком в добровольном порядке не возвращаются.

Доказательств исполнения принятых на себя по договору подряда от 

<

дата> перед ООО «Стройград» обязательств ФИО1 суду не представлено, как и не представлено доказательств возврата уплаченных истцом денежных средств по договору в размере 100000 руб.

Отношения, связанные с договором подряда, регулируются главой 37 ГК РФ. В силу ч.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (ст. 720 ГК РФ).На основании п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Стороны договорились, что работы должны быть начаты в течение 2 рабочих дней с момента подписания договора (п.3.1.1). 

В соответствии с ч.1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст.310 ч.1 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с п.9.4 договора подряда, договор может быть расторгнут по основаниям и порядке установленным действующим законодательством.

В исковом заявлении и в судебном заседании истец указывает на то, что работы не выполнены, в связи с этим просит расторгнуть договор.

Учитывая вышеизложенное, суд находит подлежащим удовлетворению требование истца о расторжении договора подряда. Соответственно с ответчика подлежат взысканию денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу в размере стоимости оплаченных работ -100000 рублей в договоре подряда. 

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом представлен расчет, согласно которому проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

<

дата> по 

<

дата> составляют 4055,68 руб.

Возражений относительно представленного истцом расчета ответчиком не представлено.

Судом указанный выше расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен и признан верным.

Период начисления процентов: с 

<

дата> по 

<

дата> (224 дн.)

Сумма долга на начало периода: 100 000,00 ?

Период

Дней в периоде

Ставка, %

Дней в году

Проценты, ?

<

дата> – 08.09.2019

40

7,25

365

794,52

<

дата> – 27.10.2019

49

7

365

939,73

<

дата> – 15.12.2019

49

6,5

365

872,60

<

дата> – 31.12.2019

16

6,25

365

273,97

<

дата> – 09.02.2020

40

6,25

366

683,06

<

дата> – 10.03.2020

30

6

366

491,80

Сумма процентов: 4 055,68 

Кроме того, с ответчика в пользу истца следует взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга в размере 100000 рублей (с учетом платежей, поступающий в его погашение) в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды просрочки, начиная с 

<

дата> до фактического погашения задолженности.

В данной части требования истца подлежат удовлетворению частично, поскольку расчет процентов за пользование чужими денежными средствами сделан по 

<

дата>, а потому и указание на взыскание процентов на будущий период с 

<

дата>, а не с 

<

дата>. 

С учетом удовлетворения требований истца в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в пользу истца в размере 3281,11 руб. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.194-199; 237-238 ГПК РФ, суд

решил:Исковые требования ООО «Стройград» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании аванса, процентов, - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда № на выполнение работ заключенный 

<

дата> между ООО «Стройград» и ФИО1 

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Стройград» денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу в размере 100000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4055,68 рублей за период с 

<

дата> по 

<

дата>. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Стройград» проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга в размере 100000 рублей (с учетом платежей, поступающий в его погашение) в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды просрочки, начиная с 

<

дата> до фактического погашения задолженности.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Стройград» сумму государственной пошлины в размере 3281,11 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Удмуртской Республики в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения через Первомайский районный суд г.Ижевска.

Мотивированное решение изготовлено : 

<

дата>.

Судья : М.А. Обухова