78RS0007-01-2023-005613-63

Дело № 2-452/2024 14 февраля 2024 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: Председательствующего судьи Воробьевой С.А.,

при секретаре Гомалеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО», просит взыскать с ответчика сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 404 105 рублей, сумму компенсации морального вреда в размере 10000 рублей, сумму штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В обоснование иска истец указала, что между ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор бытового подряда на изготовление и установку мебели № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ответчик взял на себя обязательство изготовить индивидуальные предметы мебели, а также оснастить помещение истца товарами в соответствии с условиями договора, а истец обязуется принять и оплатить работы. Общая стоимость договора составляет 404 105 рублей. Истцом обязанность по оплате полностью исполнена ДД.ММ.ГГГГ, в эту же дату истцом обеспечен доступ в помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Ответчик обязан был исполнить свои обязательства по изготовлению и монтажу мебели и иных товаров в соответствии с договором не позднее чем через 35 рабочих дней со дня полной оплаты и обеспечения доступа в помещение, а именно ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик нарушил сроки выполнения работ и сдал результат работ только ДД.ММ.ГГГГ с недостатками, которые были устранены ДД.ММ.ГГГГ,

Сумма неустойки за весь период просрочки составляет 933 482,5 руб.: 404 105 (общая стоимость работ) х 3% = 12123,15 руб. - неустойка за каждый день нарушения срока;12123,15 х 77 (дней просрочки). Сумма взысканной неустойки не может превышать цену (стоимость) услуг, постольку сумма неустойки составляет 404 105 руб.

Представитель ответчика просит в иске отказать, указывая, что ответчик по договору подряда изготавливает и собирает мебель для истца с использованием импортного оборудования, изготовленного и применяемого в Европе, в том числе детали и комплектующие. Политические решения повлекли за собой отказ от использования станка европейского производства. Возникшие обстоятельства ответчик считает обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими ответственность за нарушение сроков договора.

Выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 27, Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила с ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» договор бытового подряда на изготовление и установку мебели № №. Согласно договору подрядчик обязуется после получения доступа или ключей на объект заказчика подготовить на основе результата проведенного замера своими силами и пожеланий заказчика, (Приложение № (Эскиз и план расстановки мебели) и Приложение № (Спецификация), согласовать их с заказчиком, изготовить индивидуальные предметы мебели, а также оснастить помещение заказчика товарами в соответствии с Приложением № (Эскиз и план расстановки мебели) и Приложением № (Спецификация) к договору, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям договора по оплате. Также подрядчик оказывает услуги по доставке, подъему и установке заказа по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Общая стоимость договора составляет 404105 рублей. Согласно п.3.8 срок изготовления изделия составляет 25 рабочих дней и исчисляется с момента согласования и подписания необходимых приложений к договору: Окончательного эскиза, замерного листа и иной информации, определяемой сторонами при необходимости, поступления от заказчика технической документации по бытовой технике; поступления от заказчика полной (предварительной) оплаты по договору в размере, предусмотренном п.2.3 настоящего договора. Согласно п.3.9 срок доставки и окончательного монтажа изделия составляет не более 10 рабочих дней с момента изготовления при условии полной оплаты изделия и уведомления заказчиком о готовности принять изделие (п.8.5) и о готовности помещения к монтажным работам (п.4.2) В случае необходимости (особенностей помещения, объема мебели, графика допуска на объект, отсутствия подрядчика ид р.) срок монтажа может составлять до 25 рабочих дней. 

Согласно о п.6.2 договора за нарушение сроков выполнения работ заказчик вправе потребовать у

подрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от цены недопоставленных изделий и товаров, указанной в п.2.3. настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленных изделий и товаров.

Согласно п.6.4 сроки выполнения работ считаются нарушенными в случае, если к согласованному в 

договоре времени подрядчик не готов предоставить изделие, пригодное к его нормальной эксплуатации, при условии соблюдения зазимком всех договорных обязательств в полном объеме.

Оплата по договору произведена истцом ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 предоставила ключи от квартиры, что следует из акта от ДД.ММ.ГГГГ приема-

передачи ключей. ФИО4 предусмотренные договором обязательства выполнила. 

ДД.ММ.ГГГГ подписан акт приема-передачи товара, работ, услуг по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>. В акте отражено нарушение сроков выполнения работ и недостатки выполненных работ.

ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 направила в ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» претензию о 

выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ. В ответе на претензию ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» сослался на обстоятельства непреодолимой силы.

Нарушение сроков выполнения работ по договору ответчиком не оспорено. Приведенные ответчиком доводы основанием для освобождения от уплаты неустойки не являются. В представленных ответчиком документах в подтверждение своих доводов речь идет о событиях, имевших место до заключения договора с истцом, либо после его заключения. Обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих ответчика от ответственности, судом не установлено. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ подлежит взысканию с ответчика. 

При определении размера неустойки суд руководствуется положениями п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», которая не предусматривает установление в договоре более низкого размера неустойки. 

Размер неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ составляет 933 482,5 руб. :

404 105 (общая стоимость работ) х 3% = 12123,15 руб. - неустойка за каждый день нарушения срока;

12123,15 х 77 (дней просрочки) = 933 482,5 руб. Цена неустойки не может превышать цену договора.

Согласно ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, отсутствие значительных негативных последствий нарушения обязательства, период просрочки, а также компенсационную природу неустойки, суд усматривает несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств и считает необходимым уменьшить ее размер до 200000 рублей. Взыскание неустойки в указанном размере суд считает достаточным для восстановления нарушенных права истца 

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая, что факт нарушения прав истца как потребителя нашел подтверждение в ходе рассмотрен6ия дела, требование истца о взыскании компенсации морального вреда в размере 10000 рублей суд находит подлежащим удовлетворению.

Согласно п. 6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Требования истца в добровольном порядке ответчиком удовлетворены не были. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 105000 рублей. (200000+10000)/2.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлине в размере 5500 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» (ИНН № в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 200000 рублей, компенсацию морального вреда 10000 рублей, штраф в размере 105000 рублей

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО «КОМПЛЕКТ-СТУДИО» госпошлину в доход государства в размере 5500 рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца с даты его изготовления в окончательном виде путем подачи апелляционной жалобы через Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья 

Решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.