Дело №

УИД 75RS0№-09

РЕШЕНИЕ

 

ИФИО1

<

адрес> 8 

<

данные изъяты> года 

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Гусмановой И.С.,

при секретаре ФИО3,

с участием:

представителя истца ФИО4,

представителя ответчика ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

истец обратилась в суд с вышеуказанным иском, мотивируя следующим. Между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №.№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта заявителя для энергоснабжения «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного по адресу: 

<

адрес>, Читинский р-он, Верхнечитинское лесничество, Учебно-Опытное участковое лесничество, квартал 3 части выделов 2,3, кадастровый номер земельного участка № размер платы за технологическое присоединение составляет 60000 руб., в том числе НДС (20%) в размере 10000 руб. Сумма по договору была оплачена в полном объеме. ФИО2 относится к льготной категории лиц, предусмотренных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. В соответствии с п. 5 условий договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В установленный срок ответчиком обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не исполнены в связи с чем в адрес ответчика была направлена претензия. В ответе от ДД.ММ.ГГГГ ответчик указал, что принимаются все возможные, зависящие от общества меры, направленные на исполнение обязательства, при этом не указал ориентировочный срок выполнения мероприятий. Согласно договору за каждый день просрочки исполнения стороной обязательства начисляется неустойка в размере 0,25% от общей суммы оплаты (60000 руб.*0,25%) – 150 руб. в день. Период начисления неустойки ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Истец просила обязать филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ №.№. Взыскать с ответчика в пользу ФИО2 неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору в размере 39000 руб., неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору, исходя из ставки 0,25%, с ДД.ММ.ГГГГ по момент исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., расходы на оплату услуг представителя 22000 руб. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО4 исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ФИО5, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал. В письменном отзыве указал, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям был заключен с ФИО2 В соответствии с п. 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета за технологическое присоединение. Оплата по договору поступила ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о заключении договора именно ДД.ММ.ГГГГ. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть заканчивается ДД.ММ.ГГГГ при условии, что потребитель готов к технологическому присоединению. Таким образом, расчет истцом неустойки с ДД.ММ.ГГГГ является неверным. В соответствии с проектом для осуществления технологического присоединения истца ПАО «Россети Сибирь» должно осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 170 м. Стоимость капительных затрат сетевой организации при исполнении договора составляет 1 447 111,12 руб. Помимо значительных материальных затрат, причиной несвоевременного исполнения договора является поставка материалов для строительства линий электропередач. Заключение договоров поставки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Конкурсная процедура занимает 3-4 месяца, срок поставки товара от 1 до 6 месяцев. Учитывая указанные обстоятельства, а также климатические условия 

<

адрес>, исполнение договора с истцом в установленный срок осуществить невозможно по объективным причинам. Строительство линии электропередач и исполнение договора с истцом запланировано на начало IV квартала 2024 года. В случае удовлетворения исковых требований ПАО «Россети Сибирь» считает разумным срок для исполнения договора не менее 6 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. Основания для компенсации морального вреда отсутствуют, поскольку истцом не представлены надлежащие доказательства факта причинения ей нравственных и физических страданий, наличия взаимосвязи между ними и действиями ответчика, а также разумность размера компенсации морального вреда. Требования о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 22 000 руб. полагали чрезмерно завышенными, поскольку дело не относится к категории повышенной сложности, объем оказанным услуг не является значительным. Разумными ответчик полагал судебные расходы в размере 5000 руб., с учетом объема и сложности проведенной представителем истца работы, а также сложившихся цен на правовые услуги.

Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами, к числу которых относятся Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Правила №).

Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статьей 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 6 Правил №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками. В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ и пп. 16, 17 Правил №).

В соответствии с п. 3 Правил №, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу пп. "б" п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В перечень существенных условий договора, установленный Правилами, входит, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.№, установлено, что сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Малоэтажная жилая застройка» (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимаюших устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1). 

Пунктом 2 договора предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> части выделов 2,3, кадастровый номер земельного участка №.Точка присоединения указана в технологических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 1,5 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п. 4 договора).

Пунктом 6 предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Договор считается заключённым со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора). 

Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить их проверку, провести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока, установленного п. 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (п. 6). 

В п. 8 договора предусмотрены обязанности заявителя, а именно: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией, подписать акт осуществления технологического присоединения, надлежащим образом исполнить обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-НПА и составляет 60000 руб., в том числе НДС 10%. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. 

В технических условиях указаны обязанности, которые должна осуществить сетевая организация (п. 10), а также указаны обязанности, которые должен осуществить заявитель (п. 11). 

Таким образом, между сторонами возникли взаимные обязательства, которые в соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Истец свои обязательства по внесению платы за технологическое присоединение исполнила надлежащим образом ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждено платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.____). 

ПАО «Россети Сибири» принятые на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения объекта, собственником которого является истец, не исполнены, обстоятельств, которые могли бы быть признаны основанием для освобождения от ответственности за неисполнение договора, ответчиком в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ не приведено. При заключении договора ПАО «Россети Сибири» обладало сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по договору присоединения, приняло обязательства по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимаюших устройств, следовательно, при заключении договора с ФИО2 сетевая организация должна была принять во внимание все обстоятельства, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых на себя договорных обязательств. Между тем, заключая договор №.7500.1000.23 от ДД.ММ.ГГГГ с истцом сетевая организация не поставила заказчика в известность о наличии каких-либо препятствий для своевременного исполнения обязательств по договору. 

Таким образом, требования истца в части возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, кадастровый номер земельного участка 75№ в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ являются обоснованными и подлежат удовлетворению. При этом суд полагает возможным установить срок исполнения данного обязательства в соответствии со ст. 206 ГПК РФ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, не усматривая оснований для установления иного срока, поскольку ответчик является юридическим лицом, в рамках договора, а значит более сильной стороной, фактически является монополистом в указанной области, тогда как истец является потребителем, имеет необходимость в подключении своего дома к энергоносителям в установленном законом и договором порядке. 

В силу ст. 330 ГК РФ и п. 17 договора требования истца о взыскании с ответчика неустойки также является обоснованным. 

Пунктом 17 договора №.№ от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке, за год просрочки. 

В соответствии с условиями договора №.№ от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Начисление неустойки в соответствии с положениями ст. 191 ГК РФ необходимо производить со следующего дня после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (131 день) размер неустойки составит 19650 руб. (60000 х 0,25% х 131). Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 19650 руб. В дальнейшем неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, надлежит начислять ответчику, исходя из ставки 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки (150 руб. в день), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, но не более чем за год просрочки. 

Согласно ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. "б" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике». 

Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

В соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Разрешая спор, учитывая, что в добровольном порядке ответчик не исполнил условия договора, нарушив права истца, как потребителя, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает степень нравственных страданий истца в результате нарушения его прав как потребителя, требования разумности и справедливости.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчик, зная о требованиях истца, не удовлетворил их в добровольном порядке, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» с него подлежит взысканию штраф в размере 14825 руб. (19650+10000х50%).

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не предоставляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с неё расходов. Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

По смыслу статьи 100 ГПК РФ суд может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя критерии разумности понесенных расходов. При этом неразумными могут быть сочтены значительные расходы, не оправданные ценностью подлежащего защите права либо не сложностью дела.

Кроме того, обязанность суда взыскать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных на реализацию требований ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Истцом ФИО2 понесены расходы по оплате услуг представителя в размере 22000 руб., что подтверждается договором об оказании правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.____). 

Ответчиком заявлено о снижении представительских расходов до 5000 руб., как существенно завышенных, не соответствующих характеру спора и объему оказанных юридических услуг. 

Принимая во внимание характер исковых требований, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, продолжительность рассмотрения дела, а также цены, которые обычно устанавливаются за юридические услуги в месте жительства истца, суд полагает требование ФИО2 о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя подлежащими удовлетворению полностью в размере 22000 руб.

Поскольку истец освобождена от оплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, в силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований имущественного характера в сумме 1234,25 руб., а также требований неимущественного характера 600 руб., всего 1834,25 руб.

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, Верхне-№ кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за №.7500.1000.23 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (№ в пользу ФИО2 (паспорт № №) неустойку в размере 19650 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, компенсацию морального вреда 10 000 руб., штраф 14825 руб., судебные расходы 22000 руб. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (№) в пользу ФИО2 (паспорт № №) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, исходя из ставки 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, но не более чем год просрочки. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» (№) в доход местного бюджета госпошлину в сумме 1834,25 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд 

<

адрес>.

Судья: И.С. Гусманова 

Решение суда принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.