<

данные изъяты> 

Дело № 2-2780/2023 УИД: 66RS0044-01-2023-002887-81

мотивированное 

решение

 составлено 26 октября 2023 года (с учетом выходных дней 21,22 октября 2023 года)

Решение

именем Российской Федерации

19 октября 2023 года Первоуральский городской суд Свердловской области 

в составе: председательствующего Кукушкиной Н.А.,

при секретаре Бивзюк К.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Облкоммунэнерго» к ФИО2 о взыскании расходов за технологическое присоединение, неустойки, расходов по оплате государственной пошлины, 

установил:

Акционерное общество «Облкоммунэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании расходов за технологическое присоединение в сумме 

<

данные изъяты>, неустойки в размере 

<

данные изъяты>, расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>. 

В обоснование иска указано, что между АО «Облкоммунэнерго» и ФИО1 заключен договор №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора истец принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к объектам электросетевого хозяйства истца, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Согласно условиям договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Обязанность по надлежащему выполнению мероприятий по технологическому присоединению возложена на заявителя. Уведомление о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика не поступало. В соответствии с п. 17 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Неустойка составила 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию с требованием оплатить начисленную неустойку. Претензия осталась без ответа и без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ со стороны ответчика в адрес истца было направлено письмо о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ. Истец направил ответчику соглашение о расторжении настоящего договора, которое ответчик до сих пор не вернул в адрес истца. В период выполнения мероприятий по технологическому присоединению у сетевой организации возникли организационные затраты, связанные с исполнением договора, в силу ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ. Сумма организационных затрат составила 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 

<

данные изъяты>, что соответствует решению РЭК 

<

адрес>. Сумма за монтаж ПКУ составила 

<

данные изъяты>, в том силе НДС (20%) 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию №/И-75 с требованием оплатить понесенные сетевой организацией затраты, однако, претензия осталась без удовлетворения. 

Представитель истца АО «Облкоммунэнерго» ФИО3, действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Суду пояснила, что без получения уведомления от ответчика, они не могли приступить к выполнению работ. Не дождавшись от ответчика уведомления, истец по своей инициативе приступил к выполнению работ. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии был составлен ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ответчика данный акт был направлен в октябре 2022 года, так как ответчик сам должен был подойти за подписанием акта. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие, с участием его представителя.

Представитель ответчика ФИО4, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования не признал. Суду пояснил, что истец не исполнил свои обязательства в установленный договором срок, поэтому ответчик самостоятельно смонтировал оборудование. Необходимости устанавливать оборудование, аналогичное уже имеющемуся у ответчика, спустя два года не было, второй прибор учета ответчику не нужен. 

Информация о времени и месте рассмотрения дела своевременно размещена на сайте Первоуральского городского суда 

<

адрес>.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определил о рассмотрении дела при данной явке.

Суд, заслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об электроэнергетике», Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 861 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Правила технологического присоединения). Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии с п. 18 Правил, 18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности);

Пунктом 24 Правил установлено, что срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. В случаях если в соответствии с абзацами восемнадцатым и девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 настоящих Правил договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, превышающие сроки, которые предусмотрены указанным подпунктом, срок действия технических условий может превышать 5 лет.

На основании п. 27 Правил, при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе внести изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д. 44).

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Облкоммунэнерго» и ФИО1 был заключен договор №-ЛК об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ объекта «жилой дом индивидуального типа со служебными постройками», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. (л.д. 12-14).

Пунктом 4,5 договора предусмотрено, что срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

На основании п. 6 договора, сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение десяти дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее трех рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Пунктом 8 договора предусмотрено, что заявитель обязуется: надлежащим образом исполнять обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническим условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В силу п. 16 договора заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

В соответствии с п. 17 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Истец, обращаясь в суд, с исковым требованием к ФИО1, указывает на неисполнение ФИО1, по мнению истца, обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка.

Из обращения ФИО1 в АО «Облкоммунэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ответчик уведомил истца о выполнении технических условий по телефону (л.д.15). Данные обстоятельства истцом не опровергнуты.

Кроме того, в этом же обращении ответчик просил считать договор №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым в виду нарушения сроков технологического присоединения, указанных в п. 5 в одностороннем порядке в соответствии с п. 16 договора №-ЛК от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15).

Руководствуясь статьями 309, 310, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», принимая во внимание условия договора, суд приходит к выводу о том, что ответчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения договора, который считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении; оснований считать договор прекращенным с иной даты не имеется.

Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ, акту о приеме-сдаче от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками АО «Облкоммунэнерго» были проведены работы по установке АИИС КУЭ – 

<

адрес> на объекте по адресу: 

<

адрес>. (л.д. 25,26).

В Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ – 

<

адрес> дата составления акта указана «октябрь 2022 года», при этом, период ремонта фактический указан - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.26). Таблица учета рабочего времени приложена за октябрь 2022 года (л.д.27).

Таким образом, работы по установке АИИС КУЭ – 

<

адрес> на объекте по адресу: 

<

адрес> были выполнены сотрудниками АО «Облкоммунэнерго» после получения уведомления от ответчика о расторжении договора, и по истечению срока действия технических условий, который составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Формальное непредоставление ответчиком уведомления именно в письменном виде о выполнении с его стороны технических условий не может являться основанием для освобождения истца от исполнения своих обязательств по договору и не свидетельствует о невозможности исполнения истцом технических условий по договору от ДД.ММ.ГГГГ в установленный договором срок.

Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии вины ответчика в неисполнении условий договора об осуществлении технологического присоединения, а, следовательно, и об отсутствии оснований для взыскания с ответчика в пользу АО «Облкоммунэнерго» убытков, причиненных неисполнением договора и неустойки.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск Акционерного общества «Облкоммунэнерго» к ФИО1 о взыскании расходов за технологическое присоединение, неустойки, расходов по оплате государственной пошлины -удовлетворить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловском областном суде через Первоуральский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: 

<

данные изъяты>ФИО5 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>