УИД 74RS0№-44 

Дело №

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(адрес) 30 октября 2025 года

Калининский районный суд (адрес) в составе:

председательствующего Лебедевой В.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании оплаченных по договору денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, взыскании штрафа, возмещении почтовых расходов, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о защите прав потребителя, о взыскании денежных средств в части неисполненных подрядчиком по договору подряда №.05-24 от (дата) работ - 2307450 рублей, неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору подряда №.05-24 от (дата) в размере 1221129 рублей за период с (дата) по (дата), а также в счёт стоимости необходимых расходов для устранения недостатков фактически построенного (адрес) 102 рубля, неустойку в размере 3% от суммы 501 102 рубля или её остатка, за каждый день просрочки, начиная с (дата) до фактического исполнения решения суда, но не свыше суммы 501102 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф, в возмещение расходов по оплате услуг специалистов 45000 рублей, почтовых расходов - 2124 рубля 24 копейки (л.д.6-9).

В обоснование иска указала, что между сторонами (дата) между ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор подряда №.05-24, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство в установленные настоящим договором сроки по монтажу жилого дома на земельном участке, расположенном в д. (адрес) (ориентир п. 1.1 договора). В соответствии с условиями договора, ответчик обязуется в установленные договором срок выполнить строительные работы по строительству жилого дома, указанные в Приложении № договора, по адресу: РФ, (адрес), район Сосновский, д. Малиновка (ПО «Полёт»), уточненная площадь 1004 кв.м., погрешность 11,0 кв.м., КН:№, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, а истец - создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить ответчику обусловленную договором цену. Согласно п. 1.2 договора сроки выполнения соответствующих работ по договору не превышают 6 месяцев с даты заключения договора. На момент подписания договора дата окончания работ не позднее истечения 12 месяцев, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. Исходя из условий договора, работы по договору должны быть окончены ИП ФИО2 в срок (дата). Стоимость работ по договору составляет 8590000 рублей (п. 4.1 договора). Согласно п.4.3 договора цена договора уплачивается ФИО1 в следующем порядке: сумма в размере 2590000 рублей уплачивается за счет собственных средств ФИО1; сумма в размере 6000000 рублей уплачивается истцом за счет кредитных средств, предоставляемых ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору 

<

***> от (дата), заключенному между ПАО «Сбербанк России» и истцом. Оплата по договору производится в следующем порядке: оплата кредитных денежных средств в размере 6000000 рублей производится истцом ответчику в безналичной форме по этапам: 1 этап 35% от суммы кредита, что составляет 2100000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика: по предоставлении зарегистрированного договора купли-продажи земельного участка, указанного в п.1.1 от (дата), выписки из ЕГРН на Истца с пометой о регистрации залога (ипотеки) в пользу банка; 2й этап 55% от суммы кредита, что составляет 3300000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика после подписания сторонами промежуточного акта приема выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам; 3йэтап 10% от суммы кредита, что составляет 600000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика после подписания сторонами финального акта приема выполненных работ и подтверждения объема и качества выполненных работ по исполнению договора по фото/видеоматериалам. Во исполнение обязательств по договору истец произвела оплату ответчику в сумме 7990000 рублей: 2590 000 рублей - за счет собственных средств заказчика; 2100000 рублей кредитных средств ПАО «Сбербанк России» (дата) (чек-ордер №); 2300000 рублей кредитных средств ПАО «Сбербанк России» (дата). В нарушение установленных договором подряда сроков, до настоящего времени вышеуказанные работы ответчиком не выполнены. Поскольку обязательства по договору не исполнены, истцом направлена претензия, содержащая требование о расторжении договора и соглашений к нему и возврате уплаченных по договорам денежных средств.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежащим образом, просила о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Ответчик ИП ФИО2 в судебном заседании участия не принимал, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом.

Третье лицо ПАО «Сбербанк России», Следственное управление Следственного комитета РФ по (адрес) судебном заседании участия не принимали, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд в силу ч. 2.1 ст. 113, ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Сведения о дате, времени и месте судебного разбирательства доведены до всеобщего сведения путём размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.kalin.chel.sudrf.ru.

Суд, исследовав письменные материалы дела, оценив и проанализировав их по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признаётся соглашение двух, или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно положениям п.1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом, действующим в момент его заключения.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учётом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Согласно положениям статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 3 указанной статьи, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Как следует из материалов дела, между сторонами (дата) между ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор подряда №.05-24, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство в установленные настоящим договором сроки по монтажу жилого дома на земельном участке, расположенном в д. (адрес) (ориентир п. 1.1 договора).

В соответствии с условиями договора, ответчик обязуется в установленные договором срок выполнить строительные работы по строительству жилого дома, указанные в Приложении № договора, по адресу: РФ, (адрес), район Сосновский, д. Малиновка (ПО «Полёт»), уточненная площадь 1004 кв.м., погрешность 11,0 кв.м., КН:№, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, а истец - создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить ответчику обусловленную договором цену.

Согласно п. 1.2 договора сроки выполнения соответствующих работ по договору не превышают 6 месяцев с даты заключения договора. 

На момент подписания договора дата окончания работ не позднее истечения 12 месяцев, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

Исходя из условий договора, работы по договору должны быть окончены ИП ФИО2 в срок (дата).

Стоимость работ по договору составляет 8590000 рублей (п. 4.1 договора).

Согласно п.4.3 договора цена договора уплачивается ФИО1 в следующем порядке: сумма в размере 2590000 рублей уплачивается за счет собственных средств ФИО1; сумма в размере 6000000 рублей уплачивается истцом за счет кредитных средств, предоставляемых ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору 

<

***> от (дата), заключенному между ПАО «Сбербанк России» и истцом.

Оплата по договору производится в следующем порядке: оплата кредитных денежных средств в размере 6000000 рублей производится истцом ответчику в безналичной форме по этапам: 1 этап 35% от суммы кредита, что составляет 2100000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика: по предоставлении зарегистрированного договора купли-продажи земельного участка, указанного в п.1.1 от (дата), выписки из ЕГРН на Истца с пометой о регистрации залога (ипотеки) в пользу банка; 2й этап 55% от суммы кредита, что составляет 3300000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика после подписания сторонами промежуточного акта приема выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам; 3йэтап 10% от суммы кредита, что составляет 600000 рублей кредитных средств в безналичном порядке на расчетный счет ответчика после подписания сторонами финального акта приема выполненных работ и подтверждения объема и качества выполненных работ по исполнению договора по фото/видеоматериалам.

Во исполнение обязательств по договору истец произвела оплату ответчику в сумме 7990000 рублей: 2590 000 рублей - за счет собственных средств заказчика; 2100000 рублей кредитных средств ПАО «Сбербанк России» (дата) (чек-ордер №); 2300000 рублей кредитных средств ПАО «Сбербанк России» (дата).

В нарушение установленных договором подряда сроков, до настоящего времени вышеуказанные работы ответчиком не выполнены.

Поскольку обязательства по договору не исполнены, истцом направлена претензия, содержащая требование о расторжении договора и возврате уплаченных по договору денежных средств.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п.3 ст.123 Конституции Российской Федерации и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие заказчиком результата выполненных работ является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности его к сдаче. При этом сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Ответчик свои обязательства по указанным договорам к указанному сроку не исполнил.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предоставленное данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения указанного уведомления, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом каких-либо дополнительных соглашений о назначении и согласовании новых сроков исполнения обязательств к настоящему договору и дополнительных соглашений, представленных стороной истца в материалы дела, не представлено.

(дата) ИП ФИО2 был предоставлен промежуточный акт приема выполненных работ по договору по возведению фундамента на сумму 1142000 рублей согласно ведомости работ по строительству дома (приложение № к договору).

(дата) в адрес ответчика истцом направлено уведомление об отказе от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ ответчиком (получена ответчиком (дата)).

(дата) в адрес ИП ФИО2 истцом направлена претензия о выплате денежных средств по расторгнутому договору, убытков, компенсации неустойки, морального вреда.

В соответствии с заключением специалистов ФИО5 и ФИО6 по проведенному заключению №-Д от (дата) стоимость фактически выполненных работ по строительству дома, в соответствии с приложением № (ведомость работ по строительству дома) к договору подряда №.05-24 от (дата) на дату окончания работ - (дата) составляет 5682550 рублей.

Согласно выводам специалистов ФИО5 и ФИО6 по проведенному заключению №-Д от (дата) качество фактичесй» построенного дома не соответствует Проекту (Приложение № к Договору подряда №.05-24 от (дата)), ГОСТам, СНиПам и иным нормативно-техническим требованиям законодательства РФ, стоимость устранения недостатков фактически построенного дома на дату составления Заключения составляет 501 102 рубля (л.д.53-80).

Таким образом, со стороны ответчика отсутствуют доказательства согласования с потребителем переноса срока выполнения работ, при этом истцом представлены достаточные и достоверные доказательства нарушения ответчиком как сроков выполнения работ, так и объёма выполненных работ.

Доказательств исполнения обязательств в установленный договором срок либо возврата денежных средств истцу, ответчиком в нарушение требований ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, согласно объяснениям истца в исковом заявлении и судебном заседании, до настоящего времени работы ответчиком не выполнены, сумма предоплаты не возвращена в полном объёме, факт неисполнения обязательств подтверждён.

Материалами дела подтверждено, что ответчиком не произведён возврат полученных от истца денежных средств в качестве предоплаты во исполнение договора.

С учётом получения ответчиком письменного уведомления о расторжении договора с требованием возврата предоплаты и уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, договор считается расторгнутым.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик не исполнил свои обязательства по договору в установленный договором срок, в том числе на момент рассмотрения спора в суде, заявленные истцом требования о расторжении договора, о возврате оплаченных по договору денежных средств подлежат удовлетворению, - суммы оплаченной по договору подряда за вычетом стоимости выполненных ответчиком работ, что составит 2307450 рублей (из расчёта: 7990000 рублей - 5682550 рублей).

Также с ответчика подлежит взысканию сумма, необходимая для устранения недостатков в объекте недвижимости и выполненных ответчиком работ – 501102 рублей.

Суд находит требование истца о взыскании неустойки подлежащим частичному удовлетворению, поскольку ответчиком допущена просрочка установленных договором, заключенным между сторонами, сроков выполнения работы.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В соответствии с п.1 ст. 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причинённых в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п.1 ст. 28 и п.п. 1,4 ст. 29 настоящего Закона подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны I заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. п. 1,2 ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания \слуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно абз. 5 п. 1 ст. 28 указанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

На основании пункта 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В связи с тем, что в установленный договором срок ответчиком работы по изготовлению и поставке материалов не выполнены, истцом заявлены исковые требования за просрочку выполнения требований о возврате оплаченных по договору денежных средств.

Поскольку договорные обязательства не исполнены ответчиком, истец в обоснование иска указывает, что ответчик нарушил требования Закона РФ «О защите прав потребителей» в части несоблюдения сроков передачи товара и его комплектности, в связи, с чем обязано уплатить ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 1% суммы оплата товара.

Согласно п.1 статьи 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

Согласно статье 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

В связи с нарушением подрядчиком срока проведения работ по договору подряда истцом в адрес ИП ФИО2 направлена претензия об отказе от исполнения договора, возврате уплаченной по договору суммы, выплате неустойки в соответствии с абз.4 п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

До настоящего времени ответчиком требования истца не удовлетворены, ответ на досудебную претензию мне не направлен.

С учетом общей цены договора в сумме 2907450 рублей за период с (дата) по (дата) (14 дней период просрочки) размер неустойки составляет 1221129 рублей, исходя из расчета: 2907450 х 14 дн. х 3%/100%.

В соответствии с ч.1, ч.2 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В соответствии с ч.1. ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

В соответствии с ст. 31 Закона о защите прав потребителей, требования потребителя о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Сумма неустойки за период с (дата) по (дата) (91 дней) составит 1368008 рублей 46 копеек из расчета: 501102 руб. х 3%/100% х14.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере стоимости работ для устранения в размере 501102 рублей. 

В соответствии со ст.15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В силу ст.151 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Принимая во внимание, что ответчик не произвёл в установленный договором срок поставку и установку мебели, чем, безусловно, нарушил права истца как потребителя, суд с учётом разумности и справедливости, а также конкретных обстоятельств дела, считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требования потребителя, установленных Законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что до настоящего времени ответчиком не удовлетворены требования истца о выплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, в связи с просрочкой возврата предоплаты по договору, при этом истцом предпринимались меры к получению денежных средств в досудебном порядке, в том числе заблаговременно направлялись требования о возврате денежных средств, поэтому с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в пользу истца в размере 2019840 рублей 50 копеек (50% от присужденной судом суммы (2307450 + 1221129 + 501102 + 10000 рублей)/100%). 

Заявлений от ответчика о применении к взыскиваемому штрафу положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не поступало.

В соответствии со ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно положениям ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в частности, относятся издержки, признанные судом необходимыми. 

В соответствии со ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителя (статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В соответствии со ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителя (статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Расходы истца по оплате оценки в размере 45000 рублей и по оплате почтовых расходов в размере 2124 рубля 24 копейки являлись необходимыми и подлежат возмещению истцу.

Истец при подаче иска был освобождён частично от уплаты госпошлины, его исковые требования частично удовлетворены, поэтому исходя из положений ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пп. 1 и 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, следует взыскать с ответчика в доход бюджета (адрес) государственную пошлину пропорционально удовлетворённым исковым требованиям в размере 55207 рублей 77 копеек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 196-198, 199, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ИП ФИО2 удовлетворить.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт №) в счёт 

неисполненных подрядчиком по договору подряда №.05-24 от (дата) работ - 2307450 рублей, неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору подряда №.05-24 от (дата) за период с (дата) по (дата) в размере 1221129 рублей, а также в счёт стоимости необходимых расходов для устранения недостатков фактически построенного (адрес) рубля, неустойку в размере 501102 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 2019840 рублей 50 копеек, в возмещение расходов по оплате услуг специалистов в размере 45000 рублей, почтовых расходов - 2124 рубля 24 копейки.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета госпошлину в размере 55207 рублей 77 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий В.(адрес)

Мотивированное заочное решение составлено судом (дата).

Судья