Дело № 2-3110/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 ноября 2017 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Ивановой И.А.,

при секретаре Карпекиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению М.Е.С. к АО «Янтарьэнерго» о понуждении кисполнения обязательств, взыскании компенсации морального и материального вреда,

Установил:

М.Е.С. обратилась в суд, указывая, что 

<

 Дата > между ней и АО «Янтарьэнерго» был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: 

<

 адрес > 

<

 адрес >. Кроме того, ей были выданы технические условия № Z-4142/13. 

<

 Дата > М.Е.С. обратилась к ответчику с письмом, в котором просила сообщить о ходе выполнения ответчиком своих обязательств по договору, указав на то, что свои обязательства согласно договору она исполнила в полном объеме, а именно: оплата по договору произведена. 

<

 Дата > в адрес истицы был направлен ответ, согласно которому был установлен ориентировочный срок завершения работ 

<

 Дата > К указанному времени свои обязательства сетевая организация не выполнила. В связи с чем, М.Е.С. повторно обратилась к ответчику с письмом. Ориентировочный срок выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения был установлен 

<

 Дата > В настоящее время, ответчиком свои обязательства по договору до настоящего времени не исполнены. В связи с указанными обстоятельствами просит суд обязать АО «Янтарьэнерго» исполнить свои обязательства по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскать с ответчика компенсацию морального и материального ущерба в размере 1 000 000 руб. 

В последующем М.Е.С. уточнила исковые требования, в котором просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 118500 руб., моральный вред в размере 900000 руб.

М.Е.С. в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования в полном объеме, просила иск удовлетворить, обязать ответчика исполнить обязательства по договору и подключить ее дом к электроэнергии.

Представитель ответчика АО «Янтарьэнерго» М.Д.Д., действующая на основании доверенности, возражала против заявленных требований, поддержала доводы, изложенные в письменном отзыве, просила в удовлетворении исковых требований отказать, пояснив, что на основании конкурсного отбора с ООО «ГосСтройИнвест» заключен был договор подряда на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Однако, поскольку согласовать прохождение трассы проектируемой линии электропередач 15 кВ с собственником земельных участков, на которых планировалось строительство указанной линии электропередач не представилось возможным, договор подряда исполнен не был. В связи с этим, 

<

 Дата > был заключен новый договор подряда с ООО «Инвекс». В настоящее время ведется разработка проектной документации. Также указала, что на сегодняшний день в организации отсутствует информация о выполнении истцом своей части обязательств по договору технологического присоединения, в том числе о готовности к проверке мероприятий по исполнению технических условий с приложением, необходимой документации согласно п. 85 Правил. Кроме того, истцом не представлено каких-либо доказательств причинения ему морального и материального вреда и причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями. 

Выслушав пояснения сторон, изучив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и дав им оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В п. 1 ст.307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с положениями ч. 1,ч. 3 ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

В соответствии с ч.1 ст.408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона отФедеральный закон от 

<

 Дата > N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации отот 

<

 Дата > N 861 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению. 

В соответствии с п.п. «б» п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.... срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств.

Пунктом 7 Правил установлена следующая процедура технологического присоединения к сетям энергоснабжения, в частности: выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В соответствии с положениями ч. 1,ч. 3 ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Таким образом, исходя из буквального содержания Правил следует, что выполнение технологического присоединения к сетям энергоснабжения зависит от действий обеих сторон по договору.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заказчика к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком своих обязательств по договору и техническим условиям.

Статьей 9 Федерального закона от 

<

 Дата > № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Судом установлено, что М.Е.С. является собственником жилого дома, площадью 1976 кв.м с кадастровым номером 39:05:051121:327, распложенного по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 60 м северо-западнее 

<

 адрес >, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

<

 Дата >.

Из материалов дела также следует, что 

<

 Дата > между ОАО Янтарьэнерго» и истцом заключен договор № (ЗЭС) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

По условиям договоров ОАО "Янтарьэнерго" обязалось для электроснабжения жилого дома истца осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ЩВУ объектов, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, 

- категория надежности – третья, 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, 

- точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя. 

В соответствии с п.5 договоров, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. 

Истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договоров в размере 550 руб., выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией. 

М.Е.С. выданы технические условия № Z-4142/13 от 

<

 Дата >.

Согласно выданных М.Е.С. технических условий для присоединения к электрическим сетям на заявителя возложена обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВт объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности, работы выполнить в соответствии с разработанным проектом, на вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью, установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

Присоединение к электросети осуществляется в точке зажима провода на опоре (№ уточнить при проектировании) ВЛИ-0,4 кВ Л-новая от ТП 15/04 кВ(новая). 

Сетевая организация в целях присоединения нового потребителя обязалась построить трансформаторную подстанцию (ТП) 15/04 кВ с трансформатором потребной мощности. От ВЛ 15-49 до ТП по п. 10.1 построить ВЛ 15 кВ сечением токопроводящих жил не менее 50 кв.мм (протяженность 1,0 км). Опоры ж.б., район по ветру - 4, по гололеду - 2. Присоединение выполнить через отключающийся пункт. От ТП по п. 10.1 до участка застройки заявителя построить ЛЭП 0,4 кВ (трассу ЛЭП, марку и сечение определить проектом, протяженность 400 м).

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению составляет6 месяцев со дня заключения договора.

Однако, пункт 8 Договора предусматривает исполнение обязанностей заявителем, необходимых для осуществления технологического присоединения, в том числе:

- по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- уведомление сетевой организации о выполнении технических условий;

- принятие сетевой организацией участия в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

При этом, пункт 11 Технических условий№Z-4142/13 от 

<

 Дата > предусматривает конкретные обязанности на сторонеМ.Е.С., необходимые для осуществления технологического присоединения.

Таким образом, из вышеуказанного следует, что выполнение сетевой организацией АО «Янтарьэнерго» своих обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям возможно только при условии выполнения заявителем обязательств, предусмотренных п.8 Договора и п.11 Технических условий.

Причем из буквального содержания технических условий следует, что действия заявителя, указанные в п.11 Технических условий должны предшествовать непосредственному технологическому присоединению его энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с положениями п.85 раздела IX указанных Правил, введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 

<

 Дата > №, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

После получения уведомления и необходимой документации, подтверждающей выполнение технических условий, сетевая организация в соответствии с п.87 указанных Правил рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.

Однако, в нарушении ч. 1 ст. 56 ГПК РФ истец не представил суду доказательств в обоснование того, что все обязательства, накладываемые на него Договором и Техническими условиями, необходимые для осуществления технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям АО «Янтарьэнеро», выполнены им в полном объеме. 

В подтверждение исполнения М.Е.С. своей части технических условий истицей представлен рабочий проект энергоснабжения жилого дома, в соответствии с которым ей необходимо на ж.б стойке на высоте 1,7 м, в непосредственной близости от проектируемой опоры установить щит учета (ЩУ-1) с расчетным прибором учета электрической энергии. Электроснабжение от ЩУ-1 до щита вводно-распределительного учета (ВРУ-1) выполнить кабеле марки АВБбШв 0 4х25, а также выполнить иные мероприятия. Вместе с тем, как следует из пояснений самой истицы, работы указанные в проекте ею не произведены, доказательств подтверждающих отсутствие возможности выполнить указанные в проекте работы в границах участка заявителя не представлено.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для обязания ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, принадлежащего М.Е.С. жилого строения.

Вместе с тем, суд также учитывает, что в соответствии с п. 6 Договора «Об осуществлении технологического присоединения», сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в целях исполнения своих обязательств по договору АО "Янтарьэнерго" разработано техническое задание по титулу "Строительство ТП-2 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-49, ЛЭП 0,4 кВ в 

<

 адрес > района". На основании конкурсного отбора с ООО "ГосСтройИнвест" заключен договор подряда № на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Однако по причине невозможности согласовать прохождение трассы проектируемой линии электропередач 15 кВ с собственниками земельных участков, на которых планировалось строительство указанной линии электропередач, договор подряда ООО "ГосСтройИнвест" исполнен не был. На сегодняшний день поитогом повторно проведенных на электронной торговой площадке конкурентных процедур с ООО "Инвекс" 

<

 Дата > заключен договор подряда на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время ведется разработка проектной документации. 

Учитывая, что проектные и строительные работы со стороны ответчика не проведены, в связи с чем, в связи с чем, ответчиком в соответствии с условиями договора не выполнена своя часть мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренная техническими условиями № Z-4142/13 от 

<

 Дата > При этом, суд принимает во внимание, что изначально истцом требования были изложены как обязании ответчика выполнении своих обязательств, суд полагает необходимым обязать ответчика АО "Янтарьэнерго" выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, принадлежащего М.Е.С., расположенного по адресу: по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 600 м.. северо-западнее 

<

 адрес >, кад. №, указанные в п. 10 технических условий Z-4142/13. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежать частичному удовлетворению, а именно только в части обязания ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которою решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает мнения сторон, устанавливает АО «Янтарьэнерго» срок выполнения работ по технологическому присоединению - в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Осуществление фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома М.Е.С. должно производиться в рамках заключенного договора, после предоставления М.Е.С. сведений о выполнении ею обязательств, предусмотренных п.8 Договора и п.11 Технических условий и проверки сетевой организацией выполнения технических условий.

Поскольку заявительницей не исполнены обязанности, предусматривающие выполнение ею в границах своего земельного участка мероприятий по технологическому присоединению, суд не находит оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, в связи с нарушением сроков технологического присоединения. Кроме того, М.Е.С. не предоставлено доказательств причинения ей материального вреда и размера указанного вреда, в связи с чем суд также не находит оснований для взыскания материального вреда.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

В силу того, что исковые требования М.Е.С. о понуждении исполнить обязательства удовлетворены частично, а она по правилам ст.17 ФЗ «О защите прав потребителей» освобождена от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления в суд с требованиями о защите прав потребителей, с учетом ч.1 ст.103 ГПК РФ, предусматривающей взыскание государственной пошлины, от уплаты которой истец был освобожден, с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, суд пропорционально удовлетворенной части исковых требований полагает необходимым взыскать с АО «Янтарьэнерго» в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования М.Е.С. удовлетворить частично:

- обязать АО «Янтарьэнерго» выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, принадлежащего М.Е.С., расположенного по адресу: 

<

 адрес > 

<

 адрес >, кад. №, указанные в п. 10 технических условий Z-4142/13 в течение двух месяцев с моменты вступления решения в законную силу. 

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с АО «Янтарьэнерго» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения. 

Мотивированное решение изготовлено 

<

 Дата >.

Судья И.А. Иванова