Заочное 

Решение

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ город Видное

Видновский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Зыряновой А.А., при секретаре судебного заседания Ванюковой Я.В., представителя истца ФИО1, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело № по иску АО «Мособлэнерго» к ФИО2 об исполнении обязательств и взыскании неустойки

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском к ответчику ФИО2, в котором просил суд: обязать ФИО2 в течение 2-х месяцев с даты вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п. 8 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить в АО «Мособлэнерго» копию данного разрешения;

Взыскать с ФИО2 в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>, взыскать с ответчика госпошлину 

<

данные изъяты> 

В обоснование иска указано, что между АО «Мособлэнерго» (далее - Истец, Сетевая организация) и ФИО2 (далее - Ответчик, заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

В соответствии с п. 1 Договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к Договору) (далее «Технические условия») сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями и оплатить выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Часть жилого дома» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №

В соответствии с п. 8 Договора, а также с п. 7 (г) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (Далее –Правила), на Заявителя возложены мероприятия по получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.

В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 4 месяца со дня заключения договора (т.е. до ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Заявитель не выполнил обязательства, предусмотренные п. 8 Договора и п. 7 (г) Правил.

Согласно п. 10.1 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>).

Из п. 17 Договора следует, что Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки.

Срок нарушения Заявителем выполнения мероприятий по технологическому присоединению- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет- 571 день.

Следовательно, сумма неустойки составляет: (

<

данные изъяты>* 0,25) / 100 * 365 = 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>),

ДД.ММ.ГГГГ Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия об исполнении обязательств и оплате неустойки (№ от ДД.ММ.ГГГГ). Требования Истца до момента обращения в суд с настоящим иском не исполнено.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте, дате и времени слушания дела извещён надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд определил рассмотреть дело на основании ч. 4 ст. 167 ГПК РФ в отсутствие ответчика с вынесением заочного решения.

Выслушав объяснения и доводы истца, изучив и оценив материалы гражданского дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Судом установлено, что между истцом АО «Мособлэнерго» и ответчиком ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

В соответствии с п. 1 Договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к Договору) (далее «Технические условия») сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями и оплатить выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Часть жилого дома» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №).

В соответствии с п. 8 Договора, а также с п. 7 (г) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (Далее –Правила), на Заявителя возложены мероприятия по получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.

В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 4 месяца со дня заключения договора (т.е. до 28.11,2017).

До настоящего времени ответчик не выполнил обязательства, предусмотренные п. 8 Договора и п. 7 (г) Правил. Поскольку обязанность ответчика совершить определённые действия установлена условиями указанного Договора, который никем не оспорен и недействительным не признан, но у суда имеются основания к удовлетворению исковых требований об обязании ответчика выполнить мероприятия, предусмотренные п. 8 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить в АО «Мособлэнерго» копию данного разрешения. С целью исполнения с судебного акта, суд устанавливает ответчику двухмесячный срок для совершения указанных действий, со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно п. 10.1 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>).

Из п. 17 Договора следует, что Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки.

Срок нарушения Заявителем выполнения мероприятий по технологическому присоединению- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет- 571 день. Размер неустойки составляет: (

<

данные изъяты>* 0,25) / 100 * 365 = 

<

данные изъяты> (№)

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 96 настоящего Кодекса. Исходя из изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» к ФИО2 удовлетворить. 

Обязать ответчика ФИО2 в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п. 8 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов и предоставить в АО «Мособлэнерго» копию данного разрешения. 

Взыскать с ответчика ФИО2 в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>, госпошлину 

<

данные изъяты> 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский областной суд через Видновский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Федеральный судья Зырянова А.А.