УИД 38RS0№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

03 марта 2025 года ....

Иркутский районный суд .... в составе председательствующего судьи Борзиной К.Н., при секретаре судебного заседания ФИО2, 

с участием представителя ответчика – ФИО3., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № № по исковому заявлению ФИО1 к АО "Иркутская электросетевая компания" об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, штрафа, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к АО "Иркутская электросетевая компания", в котором в обоснование заявленных исковых требований указал, что «24» ноября 2023 года между АО «Иркутская электрическая компания» с одной стороны и истцом с другой стороны, был заключен договор №-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с условиями Договора об осуществлении технологического присоединения к электросетям, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя, расположенного по адресу: ...., р....., кадастровый №.

Заявитель выполнил технические условия выданные приложением к заключенному договору, о чем направил соответствующее уведомление **/**/****, а также оплатил стоимость технологического присоединения, в соответствии с п. 10 Договора, о чем свидетельствуют квитанции о банковских операциях, в общей сумме 63849, 92 рублей.

Согласно п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения настоящего договора, т.е. окончательный срок подключения к электросетям истекал **/**/****.

В соответствии с п. 6.2 Договора сетевая организация обязана в течение 8 дней с момента уведомления потребителем о выполнении технических условий осуществить проверку выполнения потребителем технических условий с осмотром энергопринимающих устройств.

Условия типового Договора об осуществлении технологического присоединения к электросетям №-ЮЭС от **/**/****, сетевой организацией на настоящий момент не выполнены, что нарушает права истца.

Истец просит: 

Возложить обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопримающего устройства истца по адресу: ...., р....., кадастровый №, на АО «Иркутская электросетевая компания», в течении 30 дней со дня издания судебного акта;

Взыскать АО «Иркутская электросетевая компания», в пользу истца денежные средства, в сумме 47 887, 44 рублей, неустойку в соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от **/**/**** 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Взыскать АО «Иркутская электросетевая компания», в пользу истца штраф в размере 50 % в соответствии со ст. 13 Закона РФ от **/**/**** 2300-1 «О защите прав потребителей».

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, согласно представленному заявлению просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика АО "Иркутская электросетевая компания" ФИО3 в судебном заседании заявленные требования не признала по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, просил в их удовлетворении отказать в полном объеме. Просила при вынесении решения установить срок исполнения решения в течение трех месяцев в связи с выполнением инвестиционного проекта. О взыскании неустойки просила отказать, поскольку договор был пописан истцом и передан ответчику лишь **/**/**** и заявленный период неустойки находится за пределами сроков. 

Изучив письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что между АО ИЭСК и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт, категория надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, а потребитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 раздела 1 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: нежилое помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: ...., р......

Земельный участок с кадастровым номером № по адресу: ...., р..... принадлежит на праве собственности ФИО1, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

На основании п. 5 раздела 1 договора, срок выполнения мероприятий по технологическом присоединению составляет один год со дня заключения договора.

В силу пункта 6 раздела 2 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях.

Пунктом 8.2 раздела 2 договора предусмотрены обязанности потребителя об уведомлении сетевой организации о выполнении технических условий.В соответствии с п. 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказами Службы по тарифам .... и составляет 63849,92 рублей, в том числе НДС 20% 10641,65 рублей.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 процентов в течение 15 дней с даты заключения договора, 30 процентов в течение 60 дней с даты заключения договора, 20 процентов в течение 180 дней, 30 процентов в течение 15 дней со дня фактического присоединения, 10 % платы вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении. 

Факт произведенной оплаты по договору в размере 63849,92 рублей подтверждается квитанциями.

Заявитель выполнил технические условия, выданные приложением к заключенному договору, о чем направил соответствующее уведомление **/**/****.

Из доводов искового заявления следует, что в настоящий момент, сетевой организацией не исполняются предусмотренные Договором обязательства по выполнению соответствующих мероприятий по осуществлению фактического технологического присоединения объекта заявителя.

Данных о том, что ответчик выполнил свои обязательства по осуществлению технологического подключения материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах, учитывая, что предусмотренный действующим законодательством срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в нарушение статьи 56 ГПК РФ не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору.

Само же по себе принятие ответчиком мер к исполнению со своей стороны обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения, для выполнения которых требуются более значительные сроки, не влияет на приведенные выше выводы суда, поскольку право истца на своевременное выполнение условий договора, не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между иными лицами.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. 

Суд полагает возможным установить ответчику срок исполнить обязательства по Договору в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Разрешая заявленные требования истца о взыскании неустойки, проверив представленный расчет истца, суд приходит к выводу об отсутствие оснований для взыскания неустойки исходя из следующего.

Согласно п. 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Как ранее установлено судом, согласно п. 5 раздела 1 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора. 

П. 21 Договора предусмотрено, что Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Из представленного истцом договора №-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям следует, что договор подписан ФИО1 **/**/****.

Однако, подписанный экземпляр договора №-ЮЭС ФИО1 представлен в АО "Иркутская электросетевая компания" - **/**/****, что подтверждается входящим штампом на экземпляре сетевой организации, подписью ФИО1 в договоре, а также выписки из базы АО «ИЭСК». Следовательно, дата заключения договора является **/**/****. Срок выполнения мероприятий – один год, т.е. до **/**/****. Истцом заявлен период неустойки - с 24.11.22024 по **/**/****. Указанная неустойка не подлежит взысканию, поскольку в заявленный период срок исполнения обязательств по договору не истек. 

В соответствии с требованиями п.п.1,3 п.1 ст.333.19 НК РФ взысканию с ответчика в соответствующий бюджет подлежит госпошлина в размере 3000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО "Иркутская электросетевая компания» – удовлетворить частично. 

Возложить обязанность на АО "Иркутская электросетевая компания" исполнить обязательства по Договору №-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: ...., р....., кадастровый № в течение ТРЕХ МЕСЯЦЕВ с момента вступления решения в законную силу. 

Исковые требования ФИО1 к АО "Иркутская электросетевая компания» в большем размере – оставить без удовлетворения.

Взыскать с АО "Иркутская электросетевая компания в доход бюджета госпошлину в размере 3000 рублей. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский Областной суд через Иркутский районный суд в течение месяца с момента изготовления мотивированного текста решения суда – **/**/****. 

Судья: К.Н. Борзина