Дело № 2-1974/2017 «22» мая 2017 года 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Кондратьевой Н.М., 

при секретаре Светлаковой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Полис Групп» о взыскании неустойки, штрафа, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском, в котором с учетом уточненных в порядке ст. 39 ГПК РФ требований просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства за период с 01.04.2016 по 15.04.2017 в размере 546251,22 руб., штраф в размере 273125,61 руб. 

В обоснование заявленных требований истец указал на то обстоятельство, что 07.10.2014 между сторонами был заключен договор № БР-Д2К3/3/03/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в соответствии с п. 4.1 которого объект долевого строительства должен был передать истцу в срок до 31.03.2016, однако в нарушение указанного пункта фактически квартира передана истцу по акту приема-передачи 15.04.2017. 

В настоящем судебном заседании представитель истца ФИО2 и представитель ответчика ФИО3 просили суд утвердить мировое соглашение, согласно которого:

1. ответчик обязуется уплатить истцу 469000 рублей в качестве компенсации за нарушение срока строительства и передачи квартиры по договору № БР-Д2К3/3/03/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.10.2014, 

2. Ответчик обязуется уплатить истцу указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения сумму в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Октябрьским районный судом Санкт-Петербурга путем банковского перевода на следующие реквизиты: 

Получатель: ФИО1

Счет получателя: №

Банк получателя: ПАО «ВТБ 24»

Кор. Счет: 301018910300000000811

БИК: 044030811 

3. При условии точного и своевременного исполнения ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения, истец отказывается от материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет иска по настоящему делу, а также иных материально-правовых требований, связанных с нарушением срока строительства и передачи квартир по договору № БР-Д2К3/3/03/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.10.2014.

4. Судебные расходы сторонам не компенсируются.

Суд, выслушав стороны, полагает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны имеют право на любой стадии судебного разбирательства до принятия решения судом заключить мировое соглашение.

Судом сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ.

Поскольку условия подписанного сторонами мирового соглашения не противоречат требованиям закона и не нарушают прав и законных интересов истца, ответчика, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение, подписанное представителем ФИО1 – ФИО4, действующим от имени и в интересах ФИО1 на основании нотариальной доверенности 47 БА 2385799 от 13.03.2017 сроком на 1 год, и предоставляющей ФИО2 право на заключение мирового соглашения, с одной стороны и представителем ООО «Полис Групп» – ФИО3, действующей от имени и в интересах Общества на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества на имя ФИО3 25.11.2016 сроком на 1 год, и предоставляющей ФИО3 право на заключение мирового соглашения. 

В соответствии с абз.5 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39 (ч.1), 220 (абз.5), 221, 224-225 ГПК РФ,

о п р е д е л и л:

Утвердить мировое соглашение, подписанное представителем ФИО1 с одной стороны и представителем ООО «Полис Групп» с другой, согласно которого:

1. ООО «Полис Групп» обязуется уплатить ФИО1 469000 рублей в качестве компенсации за нарушение срока строительства и передачи квартиры по договору № БР-Д2К3/3/03/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.10.2014, 

2. ООО «Полис Групп» обязуется уплатить ФИО1 указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения сумму в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Октябрьским районный судом Санкт-Петербурга путем банковского перевода на следующие реквизиты: 

Получатель: ФИО1

Счет получателя: №

Банк получателя: ПАО «ВТБ 24»

Кор. Счет: 30101810300000000811

БИК: 044030811 

3. При условии точного и своевременного исполнения ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения, истец отказывается от материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет иска по настоящему делу, а также иных материально-правовых требований, связанных с нарушением срока строительства и передачи квартир по договору № БР-Д2К3/3/03/13 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.10.2014.

4. Судебные расходы сторонам не компенсируются.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению. 

Прекратить производство по гражданскому делу № 2-1974/2017 по иску ФИО1 к ООО «Полис Групп» о взыскании неустойки, штрафа. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в течение 15-ти дней в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи частной жалобы через Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья: