№ 2-1467/24

УИД 23RS0036-01-2024-001920-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 16 апреля 2024 г.

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Верхогляда А.С.,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием:

представителя истца

по доверенности 

<

адрес>4 от 16.01.2024 ФИО3,

представителя ответчика 

по доверенности № 

<

адрес> от 27.10.2023 ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении выполнить обязательства, взыскании неустойки и компенсации морального вреда,

установил:

ФИО5 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз», в котором просит возложить на АО «Краснодаргоргаз» обязанность исполнить обязательства по договорам о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капительного строительства к сети газораспределения; взыскать неустойки по договору № 127878-Т.П.(т) в размере 35 000 руб., по договору № 127878-СМР (ТП) в размере 51 357 руб., по договору № 127878 на обвязку газового оборудования в размере 30 962,84 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., о взыскании убытков в размере 196 944, руб., о компенсации судебных расходов на представителя в размере 20 000 руб., штрафа в размере 50%.

Исковые требования мотивированы тем, что 05.05.2021 между истцом и АО «Краснодаргоргаз» были заключены договоры о подключении к системе газоснабжения (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка и подключении (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения расположенных по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №). Стоимость работы, по указанным Договорам составляет в размере суммы 117 320,6 руб., которая была внесена заявителем в полном размере при подписании Договоров.

Согласно п. 1 Договора № 127878-СМР (ТП) от 05.05.2021 выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательства по осуществлению проектированию и строительству сети газопотребления на земельном участке к.н. 23:43:0116032:0043, а заявитель обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка составляет 90 дней со дня заключения договора. Срок выполнения работ подлежит продлению на пропорциональное количество дней.

Размер платы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка № 127878-СМР (ТП) составляет 72 962,60 руб., в том числе НДС 12 160,43 руб., из них: стоимость проектирования 21 604,8 рублей, в том числе НДС (20%); предварительная стоимость строительно-монтажных работ 51 357,80 руб., в том числе НДС (20%). Оплату гр. ФИО5 по вышеуказанному договору произвел в момент заключения договора от 05.05.2021 в размере 21 604,80 руб. и 16.07.2021 руб. в размере 51 357,80 руб.

Согласно Акту выполненных работ (услуг) к договору от 05.05.2023 № 127878-СРМ (ТП) проектирование АО «Краснодаргоргаз» выполнено стоимостью в сумме 21 604,8 рублей.

Кроме вышеуказанного договора между истцом и ответчиком заключены еще два договора: 1) Договор на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) от 05.05.2021 № 127878 по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить работы, связанные с газификацией объекта. Комплекс услуг (работ) по настоящему договору, сроки и стоимость выполнения работ предусмотрены Спецификацией (комплекс работ в количестве 14 пунктов, стоимость 30 962,84 рублей). Оплату произвел ФИО5 16.07.2021 в полном размере 30 962,84 рублей. Работы по вышеуказанному договору АО «Краснодаргоргаз» не были произведены, юридическое лицо АО «Краснодаргоргаз» свои обязательства по договору не исполнило.

В соответствии с п. 4 Спецификации к Договору № 127878 на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пусконаладочные работы) от 05.05.2021 срок выполнения мероприятий составляет 60 календарных дней.

В соответствии с п. 8.1 Договора № 127878 на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) от 05.05.2021 вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Работы по вышеуказанному договору АО «Краснодаргоргаз» не были произведены, юридическое лицо АО «Краснодаргоргаз» свои обязательства по договору не исполнило; 2) Договор № 127878Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно п. 10 Договора стоимость работы, составляет 35 000,00 рублей, которая была внесена заказчиком в полном размере согласно чеку об оплате от 05.05.2021. Юридическое лицо АО «Краснодаргоргаз» свои обязательства по данному договору не исполнило.

В виду того, что АО «Краснодаргоргаз» до настоящего времени свои обязательства по Договорам, не исполнило - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сетям газораспределения не выполнило, о наличии объективных причин, препятствующих исполнению договора, не сообщило, данное обстоятельство стало основанием для обращения в суд с исковым заявлением. 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении исковых требований. В случае удовлетворения исковых требований, просил применить ст. 333 ГК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В судебном заседании установлено, что 05.05.2021 между истцом и ответчиком были заключены договоры о подключении к системе газоснабжения (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка и подключении (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения расположенных по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №).

В соответствии с п. 59 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального Строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее - Правила подключения № 1314) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Предметом Договоров является обязанность АО «Краснодаргоргаз» выполнить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта к сети газораспределения, а Заявитель обязан оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Стоимость работы, по вышеуказанным Договорам составляет в размере суммы 117 320,6 руб., которая была внесена заказчиком в полном размере при подписании Договоров, что подтверждается материалами дела.

Согласно п. 1 Договора № 127878-СМР (ТП) от 05.05.2021 выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательства по осуществлению проектированию и строительству сети газопотребления на земельном участке кадастровый №, а заявитель обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость.

В соответствии с п. 3.2 Договора № 127878-СМР (ТП) срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка № 127878-СМР (ТП) составляет 90 дней со дня заключения договора.

В соответствии с п. 3.3 Договора № 127878-СМР (ТП) срок выполнения работ подлежит продлению на пропорциональное количество дней.

Согласно Приложения №1 к Договору, размер платы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка № 127878-СМР (ТП) составляет 72 962,6 руб., в том числе НДС 12 160,43 руб., из них: стоимость проектирования 21 604,08 руб., в том числе НДС (20%); предварительная стоимость строительно- монтажных работ 51 357,80 руб., в том числе НДС (20%).

Установлено, что по вышеуказанному договору истец произвел оплату в момент заключения договора от 05.05.2021 в размере 21 604,8 руб. и 16.07.2021 в размере 51 357,80 руб.

Согласно Акту выполненных работ (услуг) к договору от 05.05.2023 № 127878-СРМ (ТП) проектирование АО «Краснодаргоргаз» выполнено стоимостью в сумме 21 604,08 рублей.

Кроме того, установлено, что между истцом и ответчиком было заключено еще два договора.

Договор на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) от 05.05.2021 № 127878 по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить работы, связанные с газификацией объекта. 

Комплекс услуг (работ) по настоящему договору, сроки и стоимость выполнения работ предусмотрены Спецификацией (комплекс работ в количестве 14 пунктов, стоимость 30 962,84 рублей). 

Истец произвел оплату 16.07.2021 г. в полном размере 30 962,84 руб., что подтверждается кассовым чеком. Работы по вышеуказанному договору АО «Краснодаргоргаз» не были произведены, ответчик свои обязательства по договору не исполнил.

В соответствии с п. 4 Спецификации к Договору № 127878 на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пусконаладочные работы) от 05.05.2021 срок выполнения мероприятий составляет 60 календарных дней. 

В соответствии с п. 8.1 Договора № 127878 на оказание (выполнение) комплекса услуг (работ) (установка (обвязка) газового оборудования и пуско-наладочные работы) от 05.05.2021 вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Работы по вышеуказанному договору АО «Краснодаргоргаз» не были произведены, ответчик свои обязательства по договору не исполнил.

Согласно п. 10 Договора № 127878Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, стоимость работы составляет 35 000,00 рублей, которая была внесена истцом в полном объеме, что подтверждается кассовым чеком. Однако ответчик свои обязательства по договору не исполнил.

Согласно абз. 11 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации», Правительство Российской Федерации в области газоснабжения осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом «О Правительстве Российской Федерации», в том числе утверждает правила технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения утв. (далее – Правила № 1547).

Как указано в абз. 10 п. 2 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно п. 3 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с п. 72 Правил № 1547, исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению); б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил); г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Из п. 4 Договора следует, что Исполнитель обязан, кроме прочего: в случае поступления в соответствии пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила), обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении); нести эксплуатационную ответственность в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении).

Исходя из изложенных норм материального права и положений договора, единственным доказательством исполнения обязательств по договору о технологическом присоединении, является акт о подключении (технологическом присоединении).

Доказательства, подтверждающие выполнение ответчиком обязательств по договору, заключенному с истцом, суду не представлены.

Кроме того, в материалы дела не представлен акт о подключении (технологическом присоединении), в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что работы по спорному договору не выполнены ответчиком. 

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с пунктом 48 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения " утвержденных Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 (Далее - правила подключения) в случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, исполнитель обращается к такому основному абоненту в целях осуществления подключения заявителя. Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет соответствующий запрос основному абоненту и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса. Основной абонент в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего запроса от исполнителя направляет согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполнителем.

Основным абонентом в соответствии с п. 2 Правил является - юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения и (или) газопотребления.

Пунктом 18 Договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон установленных сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определённой в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно расчету, представленному истцом, неустойка составляет 117 319 руб. 

В соответствии с Правилами № 1547, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", подпунктом «д» пункта 74 предусмотрено, что Заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Так, согласно п. 12 Договора, внесение платы за подключение (технологическое присоединение) осуществляется ответчиком в следующем порядке: 1) 50 процентов платы, что составляет 17 500 руб. 00 коп., в том числе НДС 2 916 руб. 67 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 2) 35 процентов платы, что составляет 12 250 руб. 67 коп. вносится в течение 11 дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «А» пункта 72 Правил, в объеме, определённом в настоящем договоре; 3) 15 процентов платы, что составляет 5 250 руб., в том числе НДС 874 руб. 99 коп., вносится в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Представителем ответчика представлен контррасчет неустойки за период с 16.01.2022 по 12.02.2024, согласно которому неустойка: по Договору № 127878-Т.П. (т) составляет 9 273,25 руб., по Договору № 127878-СМР (ТП) составляет 29 752,20 руб., по Договору № 127878 составляет 30 962,84 руб.

Судом контррасчет ответчика проверен, признан арифметически верным, ввиду чего находит требования истца в части взыскания неустойки подлежащими частичному удовлетворению.

Относительно требований о компенсации морального вреда суд приходит к следующему.

Согласно ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Учитывая, что судом установлено нарушение прав потребителя со стороны ответчика, суд, с учетом характера и степени нравственных страданий истца, принципа разумности и справедливости полагает, что соразмерной причиненным истцу нравственным страданиям, будет являться компенсация морального вреда в размере 10 000 руб.

Относительно требования истца о взыскании с ответчика стоимости произведенных расходов за электроэнергию на отопление жилого дома и покупку электрообогревателя в размере 196 944 руб., суд приходит к следующему.

Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ и мерой ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пунктам 1, 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из указанных норм, в предмет судебного исследования входит совокупность следующих юридически значимых фактов: факт причинения вреда; противоправность поведения ответчика; причинная связь между таким поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда; размер понесенных убытков. При этом отсутствие хотя бы одного из элементов является основанием для отказа в иске.

Под причинно-следственной связью понимается объективно существующая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует во времени другому (следствию) и с необходимостью порождает его. Причинная связь между фактом причинения вреда (убытков) и действием (бездействием) причинителя вреда должна быть прямой (непосредственной).

Юридически значимые обстоятельства, порядок распределения бремени доказывания, а также законодательные презумпции в отношении требований о взыскании убытков разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23 июня 2015 года № 25) и постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление от 24 марта 2016 года № 7).

В порядке пункта 12 постановления от 23 июня 2015 года № 25 по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Бремя доказывания наличия и размера вреда, причинно-следственной связи между возникшим вредом (убытками) и действиями причинителя вреда лежит на истце, который в силу ст. 56 ГПК РФ должен доказать наличие вышеперечисленных условий для возмещения убытков.

Как усматривается из материалов дела, в стоимость произведенных расходов за электроэнергию на отопление жилого дома и покупку электрообогревателя истцом включены только размер оплаты, который составил 196 944 руб.

Таким образом, истец не предоставил суду платежные поручения об оплате электроэнергии и покупку электрообогревателя, а только предоставил размер расходов, понесенный им по оплате электроэнергии в спорный период.

Вместе с тем размер убытков должен быть с достоверностью подтверждён и определяться на основании предоставленных в дело доказательств.

В рассматриваемой ситуации убытки являются ценовой разницей стоимости электроэнергии, потраченной на отопление в исковой период и определенной по установленной мощности отопительных приборов, и стоимости газа, которую истец бы оплатил при своевременном исполнении ответчиком обязательств по договору. При определении убыток истец также не учел свои расходы по оплате стоимости электрической энергии, потребляемой на оплаты коммунальных расходов, не связанных с отоплением (освещение, работа бытовых приборов и пр.).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Следовательно, требования истца в части взыскания убытков удовлетворению не подлежат.

В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Исходя из фактических обстоятельств дела, данное гражданское дело невозможно отнести в категории сложных дел, требующих сбора большого объема доказательств, в рассматриваемом деле нет необходимости в проведении судебной экспертизы, или истребовании больших объемов документации, по которым могла проводиться длительная подготовка, не подано каких-либо процессуальных ходатайств. Ввиду чего, требования в данной части не подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона ФЗ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Относительно требований истца о взыскании с ответчика в его пользу штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, суд находит несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку ответчиком частично исполнены обязательства по договорам.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей. Также, согласно п. 3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Принимая во внимание, что на основании п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ и п. 3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» истец освобожден от уплаты государственной пошлины, а также что судом удовлетворены исковые требования имущественного характера (неустойка) в размере 69 988,29 руб., а также требования неимущественного характера (понуждение выполнить обязательства), суд полагает необходимым взыскать с ответчика в доход местного бюджета сумму государственной пошлины в размере 8 299,64 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении выполнить обязательства, взыскании неустойки и компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» исполнить обязательства по договорам от 05.05.2021 № 127878Т.П.(т), от 05.05.2021 № 127878, заключенных между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения технологического присоединения к сети газопотребления по договору № 127878Т.П.(т) от 05.05.2021 в размере 9 273 (девять тысяч двести семьдесят три) рубля 25 копеек.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения технологического присоединения к сети газопотребления по договору № 127878-СМР (ТП) от 05.05.2021 в размере 29 752 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения технологического присоединения к сети газопотребления по договору № 127878 от 05.05.2021 в размере 30 962 (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 84 копейки.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в доход местного бюджета сумму государственной пошлины в размере 8 299 (восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 64 копейки.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение одного месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Судья А.С. Верхогляд

Решение изготовлено в окончательной форме 19.04.2024.