Дело № 2-93/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тотьма 06 февраля 2018 года

Тотемский районный суд Вологодской области в составе:

судьи Цыгановой О.В.

при секретаре Свистуновой Т.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ООО «Газпром энерго» Северный филиал о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки и компенсации морального вреда,

установил:

ФИО2 обратился в суд с иском к ООО «Газпром энерго» Северный филиал о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что между истцом и ООО «Газпром энерго» Северный филиал (дата) заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям № .... Согласно договору сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по адресу: ..., кадастровый номер земельного участка ... в срок шесть месяцев со дня заключения договора. В силу п. 6 договора сетевая организация обязана исполнить обязательства по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя. Сумма по договору составляет 550 рублей, которую истец уплатил (дата). До настоящего времени работы ответчиком не выполнены, технологическое присоединение дома истца к электрическим сетям отсутствует. (дата) он обращался к ответчику о выдаче справки, которая требовалась для оформления возведенного дома, в справке указано, что дом будет подключен к электрическим сетям до (дата). (дата) обратился к ответчику с претензией по исполнению договора, ответа на которую не последовало. Согласно п. 17 предусмотрена ответственность сторон в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по договору в виде неустойки в размере 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора и общего размеры платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Период просрочки составил с (дата) по (дата)-1655 дней х 0,014 х550 х8,25%=1051,34 руб. (неустойка по договору). Кроме того, из-за бездействия ответчика истцу причинен моральный вред, который он оценивает в 50000 рублей. Просит обязать ответчика исполнить договор от (дата) № ..., осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: ..., взыскать неустойку в сумме 1051,34 руб. и компенсацию морального вреда 50000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал по основаниям, указанным в иске, дополнительно пояснил, что земельный участок ... находится у него в аренде, на указанном земельном участке в период с ... года по ... год им возведен жилой дом, адрес дома .... Имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но ввод объекта не произведен, поскольку отсутствует электричество. В ... году он обратился с заявлением к ответчику на подключение участка к электросети, (дата) с ним был заключен договор № ... на технологическое присоединение к электросети, были выданы технические условия, согласно которым источником питания был определен КТПн-7 ..., точкой присоединения опора № ..., ее удаленность от его участка метров 400. Для того, что бы осуществить присоединение, сетевой организации необходимо было проложить воздушную линию до границ его участка и поставить опору, а он в свою очередь должен был разработать проект электроснабжения в границах своего земельного участка. Однако ответчиком соответствующие работы не проводились, опора была не установлена, в связи с чем проект им разработан не был. В ... году была построена воздушная изолированная линия электропередачи по 

<

адрес> и поставлена опора № ..., которая располагалась значительно ближе к его дому, поэтому он обратился к ответчику с заявлением об изменении технических условий на подключение к электроэнергии с целью изменения точки присоединения. (дата) было заключено дополнительное соглашение к договору от (дата), срок технологического присоединения был определен в 6 месяцев с даты подписания соглашения, новые технические условия были выданы (дата), где точкой присоединения значилась опора ... и предусмотрена была прокладка ЛЭП от оп.... до границ земельного участка заявителя, однако до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено. Ввиду бездействия ответчика он заказал проект электроснабжения своего дома до опоры ..., но он был не согласован ответчиком по причине того, что до границ его земельного участка они самостоятельно должны осуществить прокладку электролинии, а он лишь в границах своего земельного участка. Моральный вред выразился в том, что ввиду отсутствия электроснабжения дома он не может ввести его в эксплуатацию, заехать в него и проживать, вынужден проживать в съемном жилье, иного жилья для проживания не имеет.

Ответчик- представитель ООО «Газпром энерго» Северный филиал в судебное заседание не явился, направили в адрес суда отзыв, согласно которого по заявке ФИО1 на технологическое присоединение объекта был заключен Договор от (дата) № ... д(БС) на технологическое присоединение жилого дома по 

<

адрес>. В связи с отсутствием линии электропередач в непосредственной близости к земельному участку заявителя, Северным филиалом ООО «Газпром энерго» разрабатывались необходимые мероприятия по строительству воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ в п. ..., а именно, включение в инвестиционную программу ООО «Газпром энерго» строительства данного объекта. По завершению проведения конкурсных процедур, был заключен договор от (дата) № ... на разработку проектной документации на строительство объекта .... Проектная документация утверждена приказом ООО «Газпром энерго» от (дата) № .... Закупка на проведение строительно-монтажных работ была размещена на электронной торговой площадке Газпром Банка, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром». На основании Протокола заседания комиссии по подведению итогов конкурентных закупок ООО «Газпром энерго» по оценке заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме от (дата), признан победителем в качестве Подрядчика ООО «КЭМП», с которым в дальнейшем был заключен договор от (дата) № ... на выполнение строительно-монтажных работ. Работы по строительству воздушной линии изолированной ... выполнены. В связи со строительством новой линии электропередач ..., заключено дополнительное соглашение от (дата) №... с целью согласования переноса срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта Заявителя на 6 мес. 

В соответствии со ст.14, п.20 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», к функциями органов местного самоуправления относится «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

При наделении граждан земельными участками в ..., в нарушение законодательства, администрацией не была предусмотрена прокладка коммуникаций, т.е. земля под строительство электропередач к участку ФИО1 не была выделена. В связи с этим, участок линии от построенного ..., до участка Истца разрабатывался силами Северного филиала ООО «Газпром энерго».

Кроме того, согласно Заявлению Истца от (дата) «Об изменении Технических условий», ответчиком были изменены и направлены (дата) Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго». Таким образом, ответчик осуществлял все необходимые действия для исполнения обязательств по договору.

Объект заявителя находится на удалении 150 метров от вновь построенной линии .... Для подключения жилого дома необходимы дополнительные МТР, которые в настоящее время проходят процедуру согласования закупки.

При получении необходимых материалов Северный филиал ООО «Газпром энерго» выполнит обязательства по технологическому присоединению объекта заявителя, предусмотренные Договором на технологическое присоединение.

Исковые требования в части взыскания неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по договору и в части компенсации морального вреда не признают, ввиду отсутствия факта причинения истцу физических и нравственных страданий и просят отказать в удовлетворении данных требований.

Третье лицо- представитель территориального отдела Роспотребнадзора по ВО в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах по доверенности ФИО3 требования заявителя поддержала и пояснила, что согласно п.26 ст.1 ФЗ №35 от 26.03.2003 года «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйств энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке установленным Правительством РФ и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Договор является публичным. Такой договор потребителем ФИО1 был заключен. В соответствии со ст.309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями и условиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, которые определяет порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям. Согласно п. 3 данных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятий по технологическому присоединению при условии соблюдении им настоящих правил. Истцом были соблюдены правила, согласно техническим условиям он разработал проект энергоснабжения дома. В соответствии со ст. 27 закона о защите прав потребителей, исполнитель обязан осуществить выполнение работы, срок установленный договором о выполнении работ. Ответчиком работы по договору выполнены не были. В соответствии со ст. 28 закона о защите прав потребителей, потребитель по своему выбору, вправе назначить исполнителю новый срок, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от цены выполнения работы. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка в пользу потребителя. Поскольку действиями ответчика истцу причинен моральный вред, выразившийся в неисполнении обязанности присоединении к электрическим сетям, в результате чего истец испытывал нравственные и физические страдания, то с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда, которая должна быть определена судом с учетом разумности и справедливости.

Суд, заслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № от 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения. 

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п.16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ООО «Газпром энерго» является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица 27.07.1998 года. В соответствии с п. 2.11.7 Устава общество имеет филиал – Северный филиал ООО «Газпром энерго». Согласно пункта 3.2. Устава ООО «Газпром энерго», утвержденного решением Участника ООО «Газпром энерго» от 02.02.2010 года № 24, оказывает услуги по передаче и распределению электрической и тепловой энергии, оказание услуг по технологическому присоединению энергоустановок к сетям энергоснабжения, в том числе разработку и выдачу технологических условий на технологическое присоединение электроустановок к сетям электроснабжения.

Как установлено в судебном заседании, между ООО «Газпром энерго» в лице директора Северного филиала ФИО4 и ФИО1 на основании поданной последним заявки, (дата) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ....

Согласно настоящего договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению жилого дома заявителя, расположенного на земельном участке № ... к ВЛ-0,38 кВ., ... исполнителя. Заявитель обязался оплатить услуги, работы по технологическому присоединению, стоимость которых составляет 550 рублей. Оплата по договору ФИО1 произведена (дата).

Пунктом 8 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Мероприятия по технологическому присоединению указаны в разделе 2.2 настоящего договора и включают в себя подготовку исполнителем технических условий, разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, разработку заявителем проектной документации, в границах своего участка, осмотр присоединяемых объектов заявителя исполнителем, проверку исполнителем выполнения технических условий заявителем, включение коммутационного аппарата.

В соответствии с п. 2.3 договора технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора.

Согласно Технических условий, являющихся Приложением № 1 к указанному договору отпуск электроэнергии возможен при выполнении следующих условий: -питающий центр: КТПн-7 ..., точка присоединения: болтовые присоединения отходящей КЛ-0,22 кВ. с ВЛ-0,28 кВ. опора №..., способ подключения: сечение и трассу КЛ-0,22 кВ. определить проектом.

(дата) между ООО «Газпром энерго» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № ... к договору от (дата) № ... согласно которого срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты подписания настоящего дополнительного соглашения, а срок действия технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям по (дата).

(дата) ФИО1 обратился с заявлением к ответчику об изменении технологических условий в части точки присоединения к высоковольтной линии в п. ....

На основании заявки ФИО2 (дата) подготовлены измененные технологические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» № ....

Согласно измененных технических условий энергопринимающим устройством является ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: ..., подключение осуществляется к источнику питания ТП-7 ..., точкой присоединения является ТП-7 .... Сетевой организацией осуществляется прокладка ЛЭП от оп.... до границы земельного участка заявителя, а также фактические действия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети ООО «Газпром энерго». Заявитель осуществляет разработку и реализацию проекта энергоснабжения энергопринимающих устройств заявителя, проектная документация должна быть согласована с СФ ООО «Газпром энерго». Срок действия технических условий – 2года.

Согласно договора аренды №... от (дата) и выписки ЕГРН от (дата) годаземельный участок с кадастровым номером ... площадью ... кв.м. находится в аренде у ФИО1

На указанном земельном участке ФИО1 разрешено строительство индивидуального малоэтажного жилого дома, что подтверждается разрешением № ....

(дата) ФИО1 администрацией Тотемского муниципального района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию индивидуального малоэтажного жилого дома по адресу ....

Установлено, что истцом оплата по договору произведена, выполнен проект электроснабжения жилого дома до точки присоединения оп. .... Ответчиком же обязанность по прокладке ЛЭП от оп.... до границы земельного участка заявителя не исполнена, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в установленный договором срок не произведено до настоящего времени, что стороной ответчика не оспаривается. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении требований ФИО1 и возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: ... на земельном участке кадастровый номер № ... к электрическим сетям, по условиям договора от (дата) № ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 Гражданского процессуального кодекса РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, необходимости времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению жилого дома к электрическим сетям, суд полагает возможным установить для ответчика » двухмесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца. 

В связи с установлением того обстоятельства, что ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по договору, суд приходит к выводу о том, что ответчик должен нести ответственность в виде уплаты неустойки.

При этом, суд учитывает, что к спорным правоотношениям в части определения размера ответственности сетевой организации по договору положения Закона РФ «О защите прав потребителей» не применяются, так как данный вид ответственности урегулирован специальным законодательством.

Так, в соответствии с пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (в редакции, действовавшей на день заключения договора) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Аналогичные положения о порядке исчисления неустойки установлены в пункте 5.3 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ... от (дата).

Истцом рассчитана неустойка за период начиная с (дата) по (дата), однако суд полагает, что с учетом заключенного дополнительного соглашения к договору от (дата), где срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к энергоснабжению был согласован сторонами – 6 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения, следовательно, период неустойки следует рассчитывать с (дата) по (дата).

Таким образом, размер неустойки, подлежащий взысканию с ООО «Газпром энерго» в пользу ФИО1 составит 240 руб. 12 коп. из расчета: 0,014х8,25% (ставка рефинансирования на дату заключения договора) х 550 рублей (оплата услуг по договору) x 378 дня (кол-во дней просрочки за период с 15.12.2016 года по 27.12.2017 года) = 240 руб. 12 коп.

Правоотношения сторон в части, неурегулированной специальным законодательством, регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей". 

Поскольку специальным законодательством - Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861, вопросы компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя-гражданина не урегулированы, к спорным правоотношениям применимы положения ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя ФИО1 по несвоевременному исполнению условий договора причинены нравственные страдания, переживания. Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушениями его прав потребителя со стороны ООО «Газпром энерго», суд полагает определить сумму компенсации морального вреда в размере 2000 рублей как соответствующую требованиям разумности и справедливости, и взыскивает ее с ответчика в пользу истца.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Учитывая, что истцом направлялась ответчику досудебная претензия об исполнении условий договора, но до настоящего времени требования истца ответчиком не удовлетворены, с ответчика в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований потребителя 2240,12 руб., что составляет 1120,06 руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Обязать ООО «Газпром энерго» Северный филиал в срок не позднее двух месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: ... на земельном участке с кадастровым номером №... к электрическим сетям, по условиям договора № ... от (дата) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ООО «Газпром энерго» Северный филиал и ФИО1.

Взыскать с ООО «Газпром энерго» Северный филиал в пользу ФИО1 неустойку в сумме 240 руб., 12 коп, компенсацию морального вреда 2000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 1120,06 руб., всего- 3360,18 руб.

В удовлетворении остальной части иска ФИО1- отказать.

Взыскать с ООО «Газпром энерго» Северный филиал в доход бюджета Тотемского муниципального района госпошлину 700 (семьсот) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Тотемский районный суд.

Судья О.В. Цыганова

Мотивированное решение изготовлено 09 февраля 2018 года.

Судья О.В. Цыганова