УИД 21RS0001-01-2025-000698-93

Дело № 5-41/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 июля 2025 года 

<

адрес>

Судья Алатырского районного суда Чувашской Республики Кончулизов И.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>,

установил:

из представленных Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики материалов следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, замещавший должность заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время с 8.00 до 17.00, допустил бюджетное нарушение предусмотренное статьей 306.1 БК РФ, а именно при реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации не обеспечил соблюдение Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в целях поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах, опорных населенных пунктах и исторических поселениях, Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (с учетом дополнений и изменений), Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (с учетом дополнений и изменений) при использовании межбюджетных субсидий иных межбюджетных трансфертов, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, в части недостижения показателя результативности использования.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО2, своевременно и надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела в судебном заседании участия не принимал. Согласно полученной телефонограмме вину в совершении административного правонарушения признает. Просит назначить ему минимально возможное наказание и рассмотреть дело без его участия.

Судья счел возможным рассмотреть дело без участия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО2

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, - ведущий инспектор сектора выездных проверок Управления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Б. Е.М. в судебном заседании пояснила, что она проводила проверку исполнения отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> бюджетного законодательства. В связи с выявленными нарушениями в отношении должностного лица – заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики ФИО2 был составлен протокол по части 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заслушав должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетными трансфертами являются средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Требованиями части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого главой 30 настоящего Кодекса предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

Как усматривается из материалов дела, при проведении контрольного мероприятия проверки исполнения представления, вынесенного по результатам контрольного мероприятия «Аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики», за 2023 год и истекший период 2024 года», по месту нахождения администрации 

<

адрес> установлено следующее.

В пункте 3 представления Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № предложено обеспечить завершение реализации проекта «Благоустройство исторической части 

<

адрес>, пл. Октябрьской Революции)» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях, с соблюдением условий, определенных Соглашениями, включая сроки завершения мероприятий и обеспечение уровня софинансирования.

В ответ на представление администрация письмом от ДД.ММ.ГГГГ № сообщила о завершении работ по реализации проекта «Благоустройство исторической части 

<

адрес>, пл. Октябрьской революции)», а также, что во II квартале 2025 года планируется проведение работ по выявлению нарушений на участке благоустройства, в целях их устранения в рамках гарантийного срока.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес подрядной организации ООО «

<

данные изъяты>» направлена претензия № о безвозмездном устранении недостатков, с указанием перечня выявленных дефектов, с просьбой предоставить график устранения указанных замечаний (для согласования) и выполнить требуемый комплекс строительно-монтажных работ на объекте с последующим предъявлением заказчику информации об устранении замечаний.

На момент проверки в адрес администрации ответ от подрядной организации ООО «

<

данные изъяты>» не поступал, и как показали результаты осмотра - дефекты и разрушения не устранены.

Ведущим инспектором сектора выездных проверок Управления внешнего муниципального финансового контроля Б. Е.М., инспектором сектора экспертно-аналитической работы и камеральных проверок Управления внешнего муниципального финансового контроля ФИО в присутствии начальника отдела строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алатырского муниципального округа ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ произведен выборочный осмотр объектов благоустройства: «Благоустройство исторической части 

<

адрес>, пл. Октябрьской Революции)»; «Благоустройство исторической части 

<

адрес>, пл. Октябрьской революции) (П-этап)».

По результатам комиссионного осмотра (выборочных замеров и подсчетов) установлено, что на территории благоустройства завершены работы по укладке плитки (тротуар, дорога), установлены малые архитектурные формы (урны, скамейки), игровой комплекс «Викинг», арт-объект «Крепость», произведено устройство освещения, уличной галереи. При этом отмечены следующие недостатки (дефекты):

- на одной из клумб визуально заметны следы протечки воды;

- произведена некачественная подготовка почвы (газоны не выровнены, на газоне имеется строительный и бытовой мусор, отсутствует грунт проектной толщины);

- газонная трава взошла неравномерно «пучками», что могло возникнуть ввиду некачественной подготовки грунта и проведения работ при неблагоприятных погодных условиях;

- отдельные саженцы деревьев посохли;

- на отдельных участках тротуара отмечаются наличие дефектов на плитке (выкрашивание, излом, неровности);

- отдельные элементы (канат и площадка - подиум) игрового комплекса «Викинг» (состоящего из горки, канатной дороги, с ударпоглощающим песчаным покрытием) находятся в непригодном для пользования состоянии.

Кроме того, установлено, что на территории благоустройства работы по озеленению территории (посадка газона, посадка саженцев) выполнены частично, а именно на территории благоустройства не произведена высадка саженцев «Дерен белый Элегантиссима» в количестве 1500 штук, которые по на момент проведения контрольного мероприятия (осмотр) хранились на складе по адресу: 

<

адрес>.

В целях завершения реализации указанного проекта Отделом архитектуры с ООО «

<

данные изъяты>» (далее - Подрядчик) по результатам процедуры закупки ДД.ММ.ГГГГ заключен муниципальный контракт (далее МК) № на общую сумму 25616,0 тыс. рублей. Контрактом предусмотрено выполнение работ по озеленению и по установке малых архитектурных форм (Указатель и Крепость).

Источником финансирования МК от ДД.ММ.ГГГГ № определены:

- средства бюджета 

<

адрес> Чувашской Республики, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год в размере 2305439 рублей 37 копеек;

- средства бюджета 

<

адрес> Чувашской Республики, переданные из республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год в размере 23310553 рубля 63 копейки.

Согласно пункту 4.2 МК от ДД.ММ.ГГГГ № срок исполнения подрядчиком обязательств определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исполнение МК от № составило в сумме 25509,8 тыс. рублей, в том числе:

акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2297,7 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ);

акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2208,0 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ);

акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21004,1 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ).

Оплата произведена в сумме 25509,8 тыс. рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках МК от ДД.ММ.ГГГГ № приняты и оплачены работы по озеленению (газон) на общую сумму 2297,7 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе по следующим видам работ:

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом - 4384,22 кв.м.;

- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную - 4384,22 кв.м.;

- семена газонных трав (смесь) - 87,6844 кг.

В ходе осмотра объекта благоустройства установлено, что работы по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см и посев газона не выполнены, либо выполнены некачественно, не произведено выравнивание почвы на газонах, газонная трава взошла частично.

Указанное свидетельствует об отсутствии результата работ по озеленению территории.

Кроме того, исполнительной документацией не подтверждено качество используемых для озеленения территории материальных ресурсов, то есть не представлены сертификаты на травосмесь и грунт, чем нарушены положения статей 72, 306.1 БК РФ, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

По акту приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках МК от ДД.ММ.ГГГГ № Заказчиком приняты и оплачены работы по озеленению (живая изгородь) на общую сумму 2208,0 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе: «Дерен белый Элегантиссима 0,5-1 м» в количестве 874 шт.

В смете ЛC-02-01-06 (доп. 1), представленной к аукционной документации на общую сумму 3911,2 тыс. рублей, отражены следующие работы (затраты) по:

- разделу «Живая изгородь» (2 шт. на 1 п.м.): подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% - 375м, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений 375 м, дерен белый Элегантиссима 0,5-1 м - 750 шт.;

- разделу «Газон»: подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом - 43,8482 кв.м., посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную- 43,8482 кв.м., семена газонных трав (смесь) - 87,6874 кг.

При этом по акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках МК от ДД.ММ.ГГГГ № приняты и оплачены затраты по стоимости материального ресурса «Дерен белый Элегантиссима 0,5-1 м» в количестве 874 шт. на общую сумму 2208,0 тыс. рублей (оплата п/п № от ДД.ММ.ГГГГ), или больше предусмотренных сметой на 124 шт., одновременно исключены затраты на выполнение работ по: подготовке стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% - 375 м; посадке кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений 375 м.

Вместе с тем, затраты на подготовку посадочных мест и посадку кустарников являются неотъемлемой частью работ по созданию живой изгороди.

В тоже время, средства, выделенные из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов создания комфортной городской среды, должны быть использованы в соответствии с Правилами их предоставления и условиями Соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета строго по целевому назначению, в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей этапы выполнения работ.Проверкой установлено, что Отделом архитектуры в рамках исполнения МК № от ДД.ММ.ГГГГ приняты и оплачены работы по озеленению (живая изгородь и газон), стоимость которых сложилась в общей сумме 4505,7 тыс. рублей, или в пределах стоимости, определенной в сметной документации на общую сумму 4537,0 тыс. рублей (с учетом компенсация НДС и коэффициента доведения до цены контракта). В тоже время в акте о приемке выполненных работ не включены затраты по подготовке 874 стандартных посадочных мест и посадке живой изгороди.

Таким образом, Отделом архитектуры в нарушение статьи 72 БК РФ не обеспечено соблюдение требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в части изменения объем работ и затрат, определенных условиями МК № от ДД.ММ.ГГГГ более чем на 10,0%, а именно приняты и оплачены саженцы «Дерена белого Элегантиссима 0,5-1 м» на 124 штуки больше за счет исключения объемов работ по подготовке стандартных посадочных мест и посадке живой изгороди, предусмотренные сметой, без внесения изменений в муниципальный контракт расчетно на сумму 313,3 тыс. рублей.

Вместе с тем, исключение затрат на выполнение работ по подготовке стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 25% -375м, посадке кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений 375 м без объективных причин:

- нарушает Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в целях поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах, опорных населенных пунктах и исторических поселениях;

- приводит к невыполнению условий Соглашения о предоставлении субсидий (иного межбюджетного трансферта), имеющих целевое назначение, предоставленных в 2023 году из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа 

<

адрес> на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- не обеспечивает достижение показателя результативности в части завершения реализации в полном объеме проекта благоустройства - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В составе исполнительной документации отсутствуют сертификаты на травяную смесь и кустарники «Дерен белый Элегантиссима». В Общем журнале работ, а также в актах освидетельствования скрытых работ по Озеленению № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует подпись лица осуществляющего строительный контроль - директора ООО «Энигма».

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 105 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ саженцы «Дерен белый Эленгантиссима» приняты к учету как материальные запасы - в количестве 1500 штук на сумму 3773,0 тыс. рублей, в том числе приобретенных в рамках исполнения муниципальных контрактов: МК № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 874 штук на сумму 2208,0 тыс. рублей, МК № от ДД.ММ.ГГГГ по благоустройству исторической части 

<

адрес>, пл. Октябрьской Революции) в количестве 626 штук на сумму 1565,0 тыс. рублей.

В ходе осмотра установлено, что саженцы «Дерен белый Эленгантиссима» в зимний период хранились на неотапливаемом складе, расположенном по адресу: 

<

адрес> (нежилое помещение, неотапливаемый склад). На момент осмотра саженцы не высажены на территории благоустройства, что создает риск их гибели и как следствие причинения ущерба бюджету на сумму 3773,0 тыс. рублей.

Невыполнение работ по подготовке стандартных посадочных мест и посадке кустарников-саженцев в соответствии с условиями муниципального контракта в последующем создает риски возникновения дополнительных затрат бюджета в 2025 году расчетно в сумме 1920,0 тыс. рублей, в том числе на посадку: 874 штук саженцев в расчетной сумме 1118,7 тыс. рублей (960,0тыс. рублей/ 750 штук *874 штук) по МК № от ДД.ММ.ГГГГ; 626 штук саженцев в расчетной сумме 801,3 тыс. рублей (960,0тыс. рублей/ 750 штук *626 штук) по МК № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Отделом архитектуры, как получателем субсидии, допущено бюджетное нарушение, предусмотренное статьей 306.1 БК РФ, выразившееся в нарушении статьи 139 БК РФ, Правил предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в целях поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах, опорных населенных пунктах и исторических поселениях, Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №(с учетом дополнений и изменений), Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №(с учетом дополнений и изменений), а именно Отделом архитектуры допущено не выполнение работ по посадке 1500 саженцев «Дерен белый Эленгантиссима», что в свою очередь не обеспечивает достижение показателя результативности использования субсидии.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для составления ДД.ММ.ГГГГ в отношении должностного лица ФИО2 протокола об административном правонарушении №, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Содержание протокола об административном правонарушении соответствует требованиям, статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В нём имеются подписи ФИО2 в ознакомлении его с протоколом, с правами и обязанностями, в получении копии протокола. 

Требованиями статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Распоряжением и.о. главы 

<

адрес> Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 назначен на должность муниципальной службы заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики с ДД.ММ.ГГГГ. С ним заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ.

Распоряжением и.о. главы города Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 освобожден от замещаемой должности муниципальной службы заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики.

В соответствии с пунктом 5.2. Положения об отделе архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач и осуществление возложенных функций.

Согласно подпункту 8 пункта 2.1. Положения об отделе архитектуры одной из основных задач Отдела являются осуществление функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации 

<

адрес> но решению вопросов местного значения в сфере разработки правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В соответствии с пунктом 1.4. должностной инструкции заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №, заместитель главы администрации в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конституцией ЧР, законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чувашской Республики, Положением об отделе архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики и должностной инструкцией.

Таким образом, ФИО2, занимая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя главы администрации – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики, является должностным лицом, ответственным за соблюдение условий муниципальных контрактов, порядка и условий использования межбюджетных субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики.

При этом у должностного лица ФИО2 имелась возможность для соблюдения условий муниципальных контрактов, порядка и условий использования межбюджетных субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно статье 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушения, являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Оценив представленные в материалах дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, судья находит доказанной вину должностного лица – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики ФИО2, замещавшего с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, в необеспечении соблюдения Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в целях поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах, опорных населенных пунктах и исторических поселениях, Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № при использовании межбюджетных субсидий иных межбюджетных трансфертов, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, в части недостижения показателя результативности использования.

Действия должностного лица ФИО2 судья квалифицирует по части 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность ФИО2, его имущественное положение, обстоятельство, отягчающее административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность должностного лица ФИО2, предусмотренных статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

Согласно постановлению Алатырского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – заместитель главы администрации 

<

адрес> Чувашской Республики – начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики ФИО2 привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

В соответствии со статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность ФИО2, судья признает повторное совершение однородного административного правонарушения.

Учитывая изложенное в совокупности, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, судья считает необходимым назначить должностному лицу ФИО2 административное наказание в виде административного штрафа.

Оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть освобождения ФИО2 от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения, судья не усматривает исходя из характера и обстоятельств его совершения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

постановил:

признать должностное лицо – начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

<

адрес> Чувашской Республики ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 12000 (двеннадцать тысяч) рублей.

Административный штраф необходимо уплатить по следующим реквизитам: 

получатель платежа УФК по Чувашской Республике (Контрольно-счетная палата Чувашской Республики л/с 

<

***>), 

ИНН 

<

***>, 

КПП 213001001, 

р/с 

<

***> в Отделении – НБ Чувашская Республика Банка России/УФК по Чувашской Республике в г. Чебоксары, 

кор/сч 40102810945370000084, 

БИК 019706900, 

ОКТМО 97701000,

КБК 80511601242010000140 «Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации».

Разъяснить ФИО2, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Предупредить ФИО2 об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления, с подачей жалобы через Алатырский районный суд Чувашской Республики.

Судья И.А. Кончулизов