Дело №

№

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

15 января 2020 года г.Чита

Центральный районный суд г. Читы в составе 

председательствующего судьи Емельяновой В.Е.,

при секретаре Былковой М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя военного прокурора Читинского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц к Министерству обороны Российской Федерации, ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, 

решил:

Иск военного прокурора Читинского гарнизона в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Министерства обороны Российской Федерации, выразившееся в непринятии мер, направленных на проведение работ по капитальному ремонту здания столовой, инв. № в/части № (военный городок №), расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязать Минобороны России организовать включение в план капитального ремонта на ДД.ММ.ГГГГ здания столовой, инв. № в/части № (военный городок №), расположенного по адресу: 

<

адрес>, в вышеуказанном объеме работ, с одновременным планированием и выделением лимитов бюджетных средств на указанный ремонт не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Возложить на Министерство обороны Российской Федерации обязанность в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение капитального ремонта здания столовой, инв. № в/части № (военный городок №), расположенного по адресу: 

<

адрес>, связанного с: заменой асбестоцементных листов кровли на профлист - 400 м2; заменой отмостки - 100 м2; штукатуркой фасада - 115 м2; окраской фасада - 550 м2; ремонтом крыльца (устройством бетонного слоя толщиной 15 мм, напольной плитки) - 6,5 м2; заменой оконных блоков на ПВХ 1,7*1,7 м - 13 шт.; заменой дверных блоков 2,1*0,8 м- 15 шт.; заменой дверного блока на металлический 2,1*1,4 м - 1 шт.; устройством подвесного потолка «Армстронг» - 441 м2; устройством подвесного потолка «Грильято» - 80 м2; шпаклевкой и окраской стен в/эмульсионной краской - 925 м2; облицовкой стен керамической плиткой - 250 м2; оштукатуриванием стен – 142 м2; оклейкой стен обоями - 321 м2; заменой керамической плитки пола - 250 м2; ремонтом бетонного пола - 712 м2; монтажом вентилятора радиального ВЦ4-75-ЗД5- 0,3 АУЗ с электродвигателем 4А71В2 - 1 шт.; установкой зонта с регулируемым шибером - 2 шт.; монтажом воздуховодов 0,7 мм, 150*150 - 40 м; заменой смесителей - 8 шт.; заменой труб Д32 - 45,6 м; заменой труб канализации ДЮО -17 м, Д50 - 40 м: заменой задвижек Д32 -14 шт.; заменой стальных труб Д25 -218 м; заменой радиаторов - 20 шт.; заменой электропроводов ВВГ (3*6, 3*4, 3*2,5); заменой выключателей, розеток; монтажом щита управления шкафного исполнения 1200*1000; установкой группового распределительного щита; монтажом трехфазных автоматов (35А, 40А, 50А); монтажом однофазных автоматов (16А, 25А, 35А); монтажом кабеля СИПЗ*70+1*50.

Производство по делу в части обязания Федерального государственное бюджетное учреждение «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации в десятидневный срок с даты вступления решения суда в законную силу подготовить и направить в Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации обращение с ходатайством о содействии в выполнении капитального ремонта здания столовой, инв. № в/части № (военный городок №), расположенного по адресу: 

<

адрес>, прекратить в связи с отказом истца от исковых требований.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного текста решения путем подачи апелляционной жалобы в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г. Читы.

Судья В.Е. Емельянова