РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Минусинск 28 июля 2023 г. 

Минусинский городской суд в составе:

председательствующего судьи Горнаковой О.А.,

при секретаре Хорошевой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске действующего в интересах ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибири» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске обратился в Минусинский городской суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ (л.д. 72-73) в интересах ФИО2 к ПАО «Россети Сибири», в котором просит обязать ПАО «Росстеи Сибирь» в течение одного рабочего дня с момента вынесения решения суда в случае удовлетворения требований территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске составить уведомление об обеспечении со стороны ПАО «Россети Сибирь» возможности присоединения к электрическим сетям принадлежащего ФИО2 объекта «Гараж», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в форме электронного документа и разместить это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ПАО «Россети Сибирь» в личном кабинете ФИО2 Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работы в размере 4235 руб. и в размере 27 руб. 50 коп. на день вынесения судебного решения, если оно будет вынесено в пользу ФИО2, а также компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб. и штраф, предусмотренный Законом «О защите прав потребителей». Требования мотивировав тем, что 22.06.2022 между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (технические условия №). В соответствии с п. 1 Договора от 22.06.2022 (технические условия №), сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевогохозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). В соответствии с п. 3 Договора от 22.06.2022 (технические условия №), технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п. 11 Договора от 22.06.2022 (технические условия №), размер платы за технологическое присоединение составил 550,00 руб., квитанция на данную сумму была выдана ФИО2 после подачи им заявки на технологическое подключение. Обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение ФИО2 были выполнены в полном объеме 22.06.2022, что подтверждается справкой по операции от 22.06.2022 на сумму 550,00 руб. В соответствии с п. 6 Договора от 22.06.2022 (технические условия №), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения. То есть, ответчик, в соответствии с условиями договора, должен был осуществить технологическое присоединение принадлежащего ФИО2 объекта в срок до 23.12.2022, однако, технологическое присоединение к электрическим сетям принадлежащего ФИО2 объекта «Гараж», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществлено ответчиком 26.05.2023. Согласно п. 110 Правил № 861, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. Однако, по результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями ответчик в течение одного рабочего дня не составил уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1 к Правилам № 861, в форме электронного документа и не разместил это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете ФИО2 Ответчик, как исполнитель работ по технологическому присоединению к принадлежащим ему электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО2, обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ. Кроме того, пп. «В» п. 16 Правил № 861 предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки. Расчет неустойки: 1) общая сумма денежных средств, оплаченная ФИО2 за технологическое присоединение 550 руб., 5 % от этой суммы составит: (550 руб. х 5%) : 100 % = 27,50 руб. за один календарный день; 2) просрочка наступила с 23.12.2022 и на момент составления искового заявления, то есть, на 26.05.2023 - дата осуществления технологического подключения, составила 154 дня: 27,50 руб. х 154 дня = 4235 руб. Таким образом, сумма неустойки, подлежащая взысканию с ответчика в пользу ФИО2, составляет 4235 руб. В связи с тем, что ответчиком, получившим от ФИО2 денежные средства в размере 550 руб. за мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные договором от 22.06.2022 (технические условия №), был нарушен срок выполнения указанных работ, которые не выполнены до настоящего времени, в результате чего ФИО2 пришлось неоднократно обращаться к ответчику и заниматься судебными хлопотами, ФИО2 испытывал физические и нравственные страдания, чем ему был причинен моральный вред, который последний оценивает в 15 000 руб., также с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (л.д. 4-6). 

Определением от 30.03.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечено ПАО «Красноярскэнергосбыт» (л.д. 53). 

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске, действующая на основании доверенности ФИО3 (л.д. 16), в судебном заседании заявленные требования поддержала с учетом их уточнения от 29.05.2023, указав, что не поддерживает требования в части взыскания неустойки в размере 27 руб. 50 коп. в день, поскольку технологическое присоединение было произведено ответчиком 26.05.2023, то есть до вынесения судом решения. 

Истец ФИО2, в судебном заседании требования поддержал с учетом их утонения произведенного представителем Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске ФИО3, суду указал, что проверял личный кабинет перед судебным заседанием, уведомление об обеспечении со стороны ответчика возможности присоединения к электрическим сетям в его личном кабинете не размещено. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен (л.д. 102), ходатайство об участии в рассмотрении дела путем организации видеоконференц-связи не поддержал, просил о рассмотрении дела без его участия (л.д. 103). Кроме того направил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что согласно п. 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих, устройств, потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергий, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим-сетям» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании, договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки установленные Правилами. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя льготной категории, к которой относится истец, сетевая организация обязана: заключить договор с лицом, обратившимся в сетевую-организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащего ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании; обеспечить заявителю «возможность самостоятельно осуществить технологическое присоединение его объекта к электрическим сетям. Учитывая отсутствие действующих сетей в месте расположения гаража заявителя на момент принятия заявки, сетевой организации требовалось осуществить строительство новых линейных объектов, в связи с чем условиями заключенного с истцом договора для ПАО «Россети Сибирь», как сетевой организации, предусмотрены обязанности по проектированию и строительству новых объектов электроэнергетики: (раздел 10 технических условий). В целях размещения электросетевых объектов (в том числе линейных объектов) ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с требованиями земельного законодательства необходимо оформить права на земельные участки, на которых данные объекты планируются к размещению. В отсутствие такого оформления созданные сетевой организацией объекты будут являться самовольной постройкой. Во исполнение договора Обществом разработана проектная документация, получены необходимые согласования размещения возводимого линейного объекта электроэнергетики. В месте расположения гаража заявителя (

<

адрес> сетевой организацией осуществлялось технологическое присоединение не одного гаража ФИО1, а целого массива гаражей, что в принципе даже отражено в самом иске, в связи с чем вносились, соответствующие корректировки в проектную документацию, а присоединение конкретного гаражного бокса проводилось последовательно. Строительство новой ВЛИ 0,4 кВ от ТПЗ-19-2704 протяженностью более 550 метров для обеспечения гаражного массива э/э завершено в апреле 2022 г., ввод в эксплуатацию произведен в мае 2022 г., в настоящее время работниками ПО МЭС завершаются мероприятия по конечному присоединению объектов заявителей, а также организации учета потребления э/э, который возложен на сетевую организацию. Просрочка исполнения договора с заявителем в части установки приборов коммерческого учета потребления э/э вызвана сложившейся неблагоприятной макроэкономической ситуацией в стране, последствия которой выразились для ПАО «Россети Сибирь» в реальном дефиците технологического оборудования, по причине отказа в поставках более 20 контрагентов, в том числе производителей, в силу ограничения импорта комплектующих. Поставка приборов учета АСКУЭ возобновлена в августе 2022 г., в период сентябрь - октябрь 2022 г. Минусинским РЭС - осуществлялась их планомерная установка, которая аналогично строительству сетей, проводилась последовательно. В настоящий момент сетевая организация завершила все необходимые мероприятия по технологического присоединению, в настоящее время исключительно подлежит оформлению акт об осуществлении ТП. Таким образом, сетевая организация не бездействовала после заключения договора ТП, а предпринимала все возможные меры по исполнению договора в рамках имеющихся прав и установленных законодательством ограничений, вина ПАО «Россети Сибирь» отсутствует, так как причинами просрочки исполнения договора являются объективные факторы, на которые ни заявитель, ни сетевая организация влияния не имеют. Обращаем особое внимание суда и государственного органа, выступающего представителем истца по настоящему судебному спору, на незаконность неимущественного требования и его несоответствие условиям технологического присоединения, разделом 11 Технических условий которого установлена обязанность истцу, как заявителю, самостоятельного присоединения к действующем электрическим сетям в точке присоединения. Таким образом, возложение на ответчика обязанности истца «осуществить технологическое присоединение» не допустимо в силу как общих (условий договора), так и специальных норм закона, следовательно требование истца об осуществлении технологического присоединения удовлетворению не подлежит. Договор технологического присоединения – это самостоятельный вид гражданско-правового договора, который обладает признаками договора оказания услуг, не имеющего материального (вещественного) результата. При этом, предметом договора технологического присоединения является не строительство электросетевых объектов до заявителя и не поставка электрической энергии заявителю, а организация технической возможности для потребителя получать данную коммунальную услугу, приобретаемую у гарантирующего поставщика, которым на территории края является ПАО «Красноярскэнергосбыт». Истец обязан определить период начисления штрафной санкции, исходя непосредственно из даты фактического исполнения мероприятий каждой стороной договора. До настоящего времени истец в адрес сетевой организации, сведений о выполнении ТУ, фактическом присоединении не предоставил, что препятствует оформлению актов

выполнения ТУ и ТП по вине самого заявителя. Наложение на сетевую организацию дополнительных финансовых нагрузок и не требующееся для фактического разрешения спора обязательств капитального характера, влекущих отток ресурсов от реально подлежащих исполнению публичных обязательств, нарушает общие принципы исполнимости судебных решений, а также противоречит Директивам Правительства РФ от 06.03.2022 №2182П—П13кс, установившим мораторий, на присуждение к взысканию с организаций и учреждений осуществляющих публичные полномочия и социально-значимую деятельность, административных штрафов; неустоек, пени и иных денежных средств, не связанных с непосредственным исполнением договорных обязательств. Ответчик не препятствовал истцу в пользовании, принадлежащем ему имуществом. Доказательств посягательства на иные неимущественные права истца, со/стороны ответчика, что согласно закону, является основанием к возмещению морального вреда, исковое заявление не содержит. Следовательно, требование о взыскании неустойки и морального вреда не обосновано и удовлетворению не подлежит (л.д. 33-34). 

Представитель третьего лица ПАО «Красноярскэнергосбыт» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен (л.д. 101), об уважительных причинах неявки суду не сообщил. 

Информация о движении дела размещена на официальном Интернет-сайте Минусинского городского суда – http//minusa.krk.sudrf.ru/.

Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц участвующих в деле. 

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Судом установлено, что ФИО2, является правообладателем нежилого здания гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым № (л.д. 31-32).

Между ПАО «Россети Сибири» и ФИО4 был заключен договор от 22.06.2022 № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которому ПАО «Россети Сибири» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, для электроснабжения объекта гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Срок выполнения мероприятий по договору установлен – 6 месяцев, со дня заключения договора. 

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.5 договора). 

ФИО2 произведена оплата за технологическое присоединение, в соответствии с условиями договора (п.11), что подтверждается справкой по операции мобильного приложения Сбербанк от 22.06.2022 на сумму 550 руб. (л.д.12). 

Требование об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, исключено стороной истца из заявленных требований, в связи с его исполнением стороной ответчика. 

Согласно п. 110 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. По результатам выполнения сетевой организацией и заявителем, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

Однако по результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями ответчик в течение одного рабочего дня не составил уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1 к Правилам № 861, в форме электронного документа и не разместил это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в связи с чем истцом были уточнены исковые требования.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств размещения в личном кабинете ФИО2 уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1 к Правилам № 861, требования истца в данной части подлежит удовлетворению, в течение одного рабочего дня с момента вступления настоящего решения в законную силу. 

Разрешая требования истца о взыскании договорной неустойки, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно п. 20 договора об осуществлении технологического присоединения предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки, при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем, не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Как указано выше, п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (л.д. 9).

В ходе рассмотрения дела представителем ответчика заявлено о необходимости применения установленного Правительством РФ моратория, в части взыскания неустойки, а также уменьшения размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей данной статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория.

В силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" за период действия шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве неустойка, предусмотренная Законом о защите прав потребителей, не взыскивается с юридического лица, на которое распространяется действие этого моратория.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда от 24 декабря 2020 г. N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что целью введения моратория, предусмотренного указанной статьей, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам.

В силу подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абз. 5 и 7 - 10 п. 1 ст. 63 названного закона. В частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей (абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве).

Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда от 24 декабря 2020 г. N 44, в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497, срок действия моратория был ограничен 6 месяцами с момента официального опубликования данного нормативного акта, то есть, в период с 01 апреля 2022 г. по 01 октября 2022 г. 

Стороной истца произведен расчет неустойки за период с 23.12.2022 по 26.05.2023 (то есть после окончания срока действия моратория), что составляет – 4235 руб. (550 руб. (плата за технологическое присоединение) х 5% (неустойка по договору) х 154 дня).

Рассчитанный стороной истца размер неустойки в размере 4235 руб., суд полагает соразмерным последствиям нарушения обязательства, оснований для применения ст. 333 ГК РФ и ее снижения суд не усматривает.

На основании ст.151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом. Согласно ч.2 ст.1099 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно ч. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В силу п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку установлено нарушение ПАО «Россети Сибири» прав ФИО2 как потребителя, суд считает подлежащими удовлетворению его требование о компенсации морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, длительность неисполнения заключенного договора, социальную значимость не оказанной услуги для истца, характер и степень нравственных страданий истца, принцип разумности и справедливости и приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 10 000 руб.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, изложенное, с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований потребителя, что составит: (10 000 руб. + 4235 руб.) х 50% = 7117 руб. 50 коп. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ПАО «Россети Сибири» в доход местного бюджета также подлежит взысканию госпошлина в размере 1000 руб. (300 руб. (по требованию неимущественного характера) + 300 руб. (по требованию неимущественного характера) + 400 руб. (по требованию имущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске действующего в интересах ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибири» о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» ОГРН 

<

***> в течение одного рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу составить уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», в форме электронного документа и разместить это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете ФИО2, 

<

данные изъяты>).

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ОГРН 

<

***> в пользу ФИО2, 

<

данные изъяты>) неустойку в размере 4235 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 7117 руб. 50 коп.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» ОГРН 

<

***> государственную пошлину в размере 1000 руб. в доход местного бюджета.

Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд, через Минусинский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Председательствующий:

Мотивированный текст решения суда составлен 10 августа 2023 г.