Копия

Дело НОМЕР

УИД 52RS0НОМЕР-16

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 января 2024 года г.Н.Новгород

Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Котеевой М.Г., при секретаре Чешуиновой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО3 о взыскании денежных средств.

В обоснование требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком, ФИО3, был заключен договор на проведение работ по ремонту помещений НОМЕР, предметом которого являются работы по ремонту (ремонтно-отделочные работы) на объекте заказчика, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>. Стоимость работ по Договору составила 1 196 586, 50 рублей (Приложение НОМЕР к Договору).

Истцом во исполнение условий договора, была передана сумма денежных средств в общем размере 2 001 320 рублей, что подтверждается актами о получении денежных средств, и квитанцией о банковской транзакции по переводу денежных средств.

Пунктом 4.1. Договора установлено, что сроки и этапы выполнения работ устанавливаются сторонами в Графике производства работ (Приложение НОМЕР к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 2 Графика выполнения работ (Предложение НОМЕР) дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего момента времени работы в полном объеме ответчиком не выполнены.

В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ ответчику направлена претензия, которую ответчик оставил без рассмотрения, а требования - без удовлетворения.

Согласно предоставленным актам выполненных работ. Ответчиком были выполнены работы на общую сумму 1 113 336 рублей, при этом часть работ была выполнена с недостатком, и мной данные работы приняты не были. Стоимость не принятых работ составила 70 950 рублей. Ответчик взял на себя обязательства по устранению недостатков, но также до настоящего времени их не устранил.

Как указано в п. 7.2. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств в указанные сроки, произошедшее по его вине, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

Также по состоянию на текущую дату Ответчиком, согласно Приложению НОМЕР к Договору, не выполнено работ на общую сумму 427 665 рублей.

Кроме того, поскольку истцом по Договору Ответчику передано 2 001 320 рублей, а выполнено работ на сумму 1 730 272, 81 руб. (1113 336 руб. по актам - 70 950 руб., не принятых мною работ + 687 886, 81 руб. стоимость приобретенного материала, согласно балансового отчета), то со стороны Ответчика подлежит возврату не использованная часть денежных средств в размере 271 047, 19 рублей 19 копеек (2 001 320 - 1 730 272, 81 = 271 047, 19).

ДД.ММ.ГГГГ истцом посредством смс-сообщения ответчику направлено уведомление о расторжении договора на проведение работ по ремонту помещений НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, возврате неиспользованной сумма денежных средств и выплаты неустойки за ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств в указанные сроки. Данное сообщение было оставлено без рассмотрения, денежные средства истцу не возвращены.

За защитой своих нарушенных прав истец была вынуждена обратиться за юридической помощью. За юридические услуги истцом была внесена оплата в размере 30 000 рублей.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере 271 047 рублей 19 копеек, оплаченные истцом по договору на проведение работ по ремонту помещений НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ; неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем взятых на себя обязательств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 126 149 рублей 59 копеек, денежные средства, в размере 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда, денежные средства, в размере 30 000 рублей за юридические услуги, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.

Представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить, не возражал простив рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд считает ответчика надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного разбирательства в соответствии со ст.167,233 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных выше лиц, в порядке заочного производства.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд считает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком, ФИО3, был заключен договор на проведение работ по ремонту помещений НОМЕР, предметом которого являются работы по ремонту (ремонтно-отделочные работы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, 

<

адрес>. Стоимость работ по Договору составила 1 196 586, 50 рублей (Приложение НОМЕР к Договору).

Истцом во исполнение условий договора, была передана сумма денежных средств в общем размере 2 001 320 рублей, что подтверждается актами о получении денежных средств, и квитанцией о банковской транзакции по переводу денежных средств.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания, сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Пунктом 4.1. Договора установлено, что сроки и этапы выполнения работ устанавливаются сторонами в Графике производства работ (Приложение НОМЕР к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 2 Графика выполнения работ (Предложение НОМЕР) дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего момента времени работы в полном объеме Ответчиком не выполнены.

В силу п.1 абз.2 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п.2 ст.715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Согласно ч.4 ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

По смыслу приведенных норм материального права основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" Исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

В соответствии с ч.1 ст.28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно предоставленным актам выполненных работ. Ответчиком были выполнены работы на общую сумму 1 113 336 рублей, при этом часть работ была выполнена с недостатком, и истцом данные работы приняты не были. Стоимость не принятых работ составила 70 950 рублей. Ответчик взял на себя обязательства по устранению недостатков, но также до настоящего времени их не устранил.

Также по состоянию на текущую дату Ответчиком, согласно Приложению НОМЕР к Договору, не выполнено работ на общую сумму 427 665 (четыреста двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.

Истцом по договору ответчику передано 2 001 320 рублей, а выполнено работ на сумму 1 730 272, 81 руб. (1 113 336 руб. по актам - 70 950 руб., не принятых мною работ + 687 886, 81 руб. стоимость приобретенного материала, согласно балансового отчета), то со стороны Ответчика подлежит возврату не использованная часть денежных средств в размере 271 047 рублей 19 копеек (2 001 320 - 1 730 272, 81 = 271 047, 19). Доказательств обратного в нарушение требований ст.56 ГПК РФ ответчиком суду не было представлено. В связи с чем, денежные средства в размере 271 047,19 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 126 149,59 руб.

В соответствии со ст.31 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" 1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. 3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Согласно п.5 ст.28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). 

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Как указано в п. 7.2. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств в указанные сроки, произошедшее по его вине, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом представлен расчет неустойки, из которого следует, что размер неустойки составляет 126 149,59 рублей. 

За указанный период размер неустойки составит 1 120 000 руб. *3% * 148 дней = 4972800 руб., но не более 1 120 000 руб. Истец просит взыскать неустойку в размере 501 591 руб. 

При решении вопроса о взыскании в пользу истца компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

Согласно статье 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку судом установлен факт нарушения прав истца как потребителя в результате виновных действий ответчика, требование о возмещении морального вреда подлежит удовлетворению. 

Определяя сумму компенсации морального вреда, суд исходит из требований разумности и справедливости, соразмерности и степени вины ответчика в причинении вреда, с учетом конкретных обстоятельств дела, понесенных истцом физических и нравственных страданий, суд считает, что с ответчика в пользу истца должна быть взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа в размере 50% от присужденной суммы в размере 203 598,39 руб. (271 047,19 руб. +126 149,59 руб. + 10 000 руб.)*50%.

Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч.1 ст.100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны понесенные расходы.

С учетом изложенного, в пользу истца с ответчика подлежат взысканию расходы на юридические услуги– 10 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

взыскать в пользу ФИО1 (паспорт НОМЕР) с ФИО3 (паспорт НОМЕР) денежные средства в размере 271 047,19 рублей, неустойку – 126149,59 рублей, моральный вред – 10 000 рублей, штраф - 203 598,39 рублей, расходы на юридические услуги – 10 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления

Судья М.Г. Котеева

Копия верна