Дело № 2-2281/20

УИД 25RS0003-01-2020-002222-85

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 октября 2020 года Первореченский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе:

Председательствующего: судьи Симоновой Н.П.

при секретаре: Пархоменко Э.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к КППК «Примкрайстрой» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа

у с т а н о в и л :

Истец обратилась в суд с иском КППК «Приморкрайстрой» о взыскании неустойки, указав в обоснование, что 31.07.2017 заключен договор № долевого участия в финансировании строительства жилого дома экономического класса, расположенного по адресу: г.Владивосток, в районе 

<

адрес> по условиям которого ответчик обязан был передать истцу квартиру до 28.02.2018. Истец полностью исполнила свои обязательства по договору, оплатив стоимость квартиры в размере 3 412 266 рублей. Квартира до настоящего времени истцам не передана. Претензия истца об уплате неустойки оставлена ответчиком без ответа. Просит взыскать с ответчика неустойку за период с 30.08.2019 по 31.03.2020 в сумме 385 160 рублей, компенсацию морального вреда по 50 000 рублей, штраф в размере 50% от взысканной судом суммы, расходы по оплате услуг представителя 20 000 рублей. 

В судебном заседании представитель истца на иске настаивала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, пояснив, что квартира до настоящего времени не передана истцу, ссылка ответчика на обстоятельства непреодолимой силы не состоятельна, оснований для снижения размера неустойки не имеется, истец вынуждена длительное время проживать в крайне стесненных условиях с пожилой матерью, работая медсестрой в госпитале, принимающем пациентов с COVID-19, заболела сама и заразила пожилую мать.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, направил в суд письменные возражения, указав, что основным фактором, не позволяющим застройщику привлекать денежные средства дольщиков и заключать договоры долевого участия является то, что в сентябре 2016 года АО «АИЖК» приостановило аккредитацию вышеуказанного объекта строительства и в результате страховые компании полностью прекратили свою работу по объекту 

<

адрес> что привело к невозможности заключения договоров долевого участия и как следствие привлечение денежных средств. Многочисленные переговоры со страховыми компаниями подтвердили их готовность возобновить свою работу с КППК «Приморкрайстрой» после привлечения застройщиком кредитных средств для строительства объекта. В период с декабря 2016 КППК «Приморкрайстрой» вело переговоры с банками. 14.08.2019 ответчиком заключено соглашение с НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края о финансировании завершения строительства дома №, в настоящее время срок окончания строительства дома установлен до 31.10.2020, срок ввода дома в эксплуатацию до 31.12.2020, передача ключей от квартиры будет осуществлена до 30.04.2021. Кроме того, ведению строительных работ препятствовало включение земельного участка с кадастровым номером № площадью 15 га., отведенной под строительство, в запретную зону военного объекта - Владивостокское лесничество МО РФ. Администрацией Приморского края была проделана длительная работа по снятию запретной зоны в период с 17.02.2016 по 23.11.2017 (645 дней). Ранее решением суда истцу была взыскана неустойка по состоянию на 29.08.2019. Просит в удовлетворении иска отказать, а в случае признания обоснованности иска применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки и штрафа до суммы процентов, исчисленных исходя и учетной ставки Банка России по правилам ст. 395 ГК РФ. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.

Правоотношения, связанные с участием граждан в финансировании долевого участия в строительстве подлежат регулированию общими нормами обязательственного права ГК РФ главы 21-26, специальными нормами - Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В части взыскания компенсации морального вреда и штрафа применяются положения ФЗ «О защите прав потребителей» 

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии с ч.1 ст.4 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В силу ч.1 ст.6 настоящего Закона застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (ч. 2 ст. 6 Закона)

В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Закона)

Согласно ч.1 ст.12 Закона обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

Из материалов дела следует, что 31.07.2017 между истцом и КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома экономического класса, расположенного в районе 

<

адрес> объектом которого являлась 2-х комнатная квартира площадью 

<

данные изъяты> кв.м., приведенная площадь 

<

данные изъяты> кв.м. 3 412 266 рублей.

Истец внесла полную оплату за квартиру, что подтверждается платежным поручением № от 22.08.2017 на сумму 3 412 266 рублей, часть из которых (1 000 000 рублей) оплачено за счет кредитных денежных средств по договору с Банком ВТБ 24 от 31.07.2017.

Договором долевого участия от 31.07.2017 определен срок передачи объекта долевого строительства дольщику – не позднее 28.02.2017 (п.4.1.6).

До настоящего времени застройщик не сдал дом в эксплуатацию. 

Судом установлен факт нарушения ответчиком обязательства по своевременной передаче дольщику квартиры, что в соответствии со ст.330 ГК РФ является основанием для взыскания неустойки в размере, определенном ч.2 ст.6 ФЗ № 214-ФЗ. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного договором. В силу п.7.3 договора и п.2 ст.6 ФЗ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства цены договора, за каждый день просрочки. Если участником долевого участника является гражданин, предусмотренная настоящим пунктом неустойка уплачивается Застройщиком в двойном размере.

Решением Первореченского районного суда г.Владивостока от 17.10.2019 с учетом Определения судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда с ответчика в пользу истца взыскана неустойка, рассчитанная по состоянию на 29.08.2019 в сумме 400 000 рублей компенсацию морального вреда 5 000 рублей, штраф 202 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей.

Истец настаивает на взыскании неустойки по состоянию на за период с 30.08.2019 по 31.03.2020 в сумме 385 160 рублей. 

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки, в обоснование данного довода указано на явное несоответствие размера неустойки последствиям нарушения обязательства.

В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе её уменьшить.

В абзаце втором пункта 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что применение ст.333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Как разъяснено в п.26 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2013, суд вправе уменьшить размер неустойки за нарушение предусмотренного договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, установив, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Неустойка подлежит уменьшению в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, в зависимости от степени выполнения ответчиком своих обязательств, действительного размера ущерба, причиненного в результате указанного нарушения, и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Из правовой позиции, приведенной в абз. 1 п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» следует, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств следует учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п. 3, п. 4 ст. 1 ГК РФ). 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушений обязательств является одним из правовых способов предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом свободного определения неустойки. При применении данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 263-О).

Абзацем 2 Пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. 

Верховным Судом РФ разъяснено, что если заявлены требования о взыскании неустойки, установленной договором в виде сочетания штрафа и пени за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на основании статьи 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств исходя из общей суммы штрафа и пени (п.80 Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7)

Размер неустойки за 451 день по состоянию на 26.11.2018 в соответствии с п.7.3 договора и п.2 ст.6 ФЗ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» составляет в размере 513 486 рубля. 

Учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, длительность неисполнения обязательства по передаче квартиры истцу, принятие застройщиком мер к завершению строительства, наличии препятствий к выполнению строительно-монтажных работ в связи с установлением запретной зоны военного объекта -Владивостокского лесничества МО РФ, наличие заявления ответчика о несоразмерности последствиям нарушения обязательств подлежащей взысканию неустойки и применении ст.333 ГК РФ, а также принимая во внимание, что неустойка по своей природе носит компенсационный характер и не должна служить средством обогащения, отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у истца неблагоприятных последствий, наступивших в связи с нарушением ответчиком обязательств, исходя из общей стоимости квартиры, суд, на основании положений ст. 333 ГК РФ, в целях соблюдения баланса интересов сторон, суд полагает необходимым снизить размер неустойки до 200 000 рублей.

В соответствии со ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей» в пользу истцов подлежит взысканию компенсация морального вреда. Определяя размер компенсации морального вреда суд с учетом принципа разумности и справедливости, заслуживающих внимания доводов истца о длительном вынужденном проживании истца, в том числе в период распространения новой короновирусной инфекции в крайне стесненных обстоятельствах, суд в полагает необходимым взыскать компенсацию морального вреда 5 000 рублей.

В соответствии с ч.6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей» подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя 102 500 рублей.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ с ответчика также подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в разумных пределах, которые с учетом незначительной сложности, но крайне значимости для истца рассмотренного дела, объема выполненной представителем работы, суд определяет в размере 10 000 рублей.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 5 700 рублей

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» в пользу ФИО1 неустойку в сумме 200 000 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей, штраф 102 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей.

В удовлетворении иска в остальной части - отказать.

Взыскать с Казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» в доход муниципального бюджета Владивостокского городского округа государственную пошлину 5 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г.Владивостока в течение месяца со дня составления мотивированного решения 

Председательствующий: